돈화문 국악예술당 건립 물량 변경 내역

(단위:천원)

구 분	당 초		변 경		증·▽감	비 고
	주요 내용	금 액	주요 내용	금 액
식재공사	- 매화나무(R12) 5주 - 배롱나무(R15) 6주 - 산수유(R12) 3주 - 소나무(조형, R15) 3주 - 소나무(조형, R20) 4주 - 소나무(조형, R25) 2주 - 회화나무(R15) 5주 - 눈향(H0.2×W0.3) 30주 - 매자(H1.5×W0.3) 200주 산철쭉(H0.3) 390주 황매화(H1.0) 50주 오죽(H3.5×R3) 40주 - 둥굴레(12㎝) 140본 - 맥문동(10㎝) 790본 - 비비추(8㎝) 30본 - 옥잠화(8㎝) 120본 - 수호초(8㎝) 2600본 - 마삭줄(8㎝) 35본 인동(8㎝) 35주 잔디(평떼) 340㎡	45,724	- 매화나무(R12) 0주 - 배롱나무(R15) 0주 - 산수유(R12) 0주 - 소나무(조형, R15) 3주 - 소나무(조형, R20) 3주 - 소나무(조형, R25) 0주 - 회화나무(R15) 0주 - 눈향(H0.2×W0.3) 0주 - 매자(H1.5×W0.3) 100주 산철쭉(H0.3) 390주 황매화(H1.0) 50주 오죽(H3.5×R3) 40주 - 둥굴레(12㎝) 40본 - 맥문동(10㎝) 2,190본 - 비비추(8㎝) 30본 - 옥잠화(8㎝) 120본 - 수호초(8㎝) 2600본 - 마삭줄(8㎝) 0본 인동(8㎝) 0주 잔디(평떼) 162.09㎡ - 배롱나무(R12) 3주 - 산수유(R8) 3주 - 회양목(H0.2×W0.3)1,200주 - 사철(H1.5×W0.5) 100주 - 화살(H1.2×W0.8) 250주	42,288	-3,436
포장 공사	화강디딤돌(잔디o) 6㎡ 화강디딤돌(잔디×) 10㎡ 방근시트/토양 287㎡/287㎡ 해미석깔기 176㎡ 녹지경계석 59㎡ 현무암판석(썬큰) 31㎡	20,220	화강디딤돌(잔디o) 9㎡ 화강디딤돌(잔디×) 0㎡ 방근시트/토양 287㎡/287㎡ 해미석깔기 109㎡ 녹지경계석 0㎡ 현무암판석(썬큰) 31㎡	16,357	-3,863
시설물공사	자전거거치대 7개 잔디보호매트 116㎡ 벽면녹화매쉬 32㎡ 등의자 및 경관석 각1개	6,030	자전거거치대 7개 잔디보호매트 95㎡ 벽면녹화매쉬 0㎡ 등의자 및 경관석 각1개	2,667	-3,363
직공비계		71,974		61,312	-10,662