문서번호	시설과-4579
결재일자	2019.6.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설과장
협조

동관소 전기실 배전반 교체공사

정전근무 계획

2019. 6.

동관소 전기실 배전반 교체공사 정전근무 계획

서울대공원 동관소 전기실 배전반 교체공사와 관련하여 전기공사를 위한 야간 정전근무 계획을 보고 드림

1		공사 개요

● 공 사 명 : 동관소 전기실 배전반 교체공사

● 공사기한 : ‘19. 6. 17. (월) ~ ‘19. 7. 14. (일)

● 공사업체 : 우진전력공사

2		정전 및 야간근무 계획

● 정전일시 : ‘19. 7. 8. (월) 20 : 00 ~ ’19. 7. 9. (화) 08 : 00

● 세부일정

연번	시간	작업내용	비고
1	20:00~22:00	- 정전 및 방전 - 단말 철거
2	22:00~02:00	배전반 3면 철거 및 신설
3	02:00~06:00	단말처리(결선)
4	06:00~08:00	점검 및 테스트

● 정전구간 : 동관소 전체(동관소 당직실 조명은 임시가동)

※ 장미원, 꼬마동물사, 홍학사, 기린사 식당(FOOD HOUSE등), 유모차 대여소, 기념매점, 가로등(장미원~기린나라구간), 매표소 포함

● 근무인원 : 시설과 이춘한팀장, 정성윤, 김병수 주무관, 이승기, 김오식,윤성원 실무관

- 공무직 초과근무 계획

연번	근무시간	근무자	근무내용
1	2019. 7. 8. (월) 18 : 00 ~ (화) 06 : 00 (휴게시간 4시간 포함)	이승기 김오식 윤성원	정전작업 등 전기안전관리

3		행정사항

● ‘19. 6. : 각 부서 별 정전 관련 협조 공문 발송.  끝.