문서번호	동남권공공개발추진단-2214
결재일자	2015.3.18.
공개여부	비공개
방침번호

				시 민
주무관	동남권공공개발추진반장	동남권공공개발추진단장		도시재생본부장
협 조	재생정책과장
	개발행정팀장

동남권공공개발추진단 조직 및 인력 보강계획

2015. 3

도시재생본부

(동남권공공개발추진단)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

동남권공공개발추진단 조직․인력 보강계획

□ 한전부지, 서울의료원, 한국감정원 민간개발과 잠실종합운동장 일대의

민자유치 복합개발, 영동대로 지하 광역교통망 구축 등

□ 국제교류복합지구 조성사업의 원활한 추진을 위해 동남권공공개발추진단의

조직 및 인력을 보강하고자 함

1. 조직 현황

□ 조 직

				동남권공공개발추진단(행정3급)
						추 진 반(토목4)
개발행정팀 (행정5)							개발계획팀 (토목5)						개발사업팀 (건축5)
- 사업추진 자문단 운영 - 사업 홍보 - 조직, 인사, 예산							- 도시관리계획 수립 - 마스터 플랜 수립 - 민간 사전협상						- 민간투자사업 검토 - 국제 전문가 공모 - 공공부문 사업

□ 인 력

구분	계	단장 (행정3)	반장 (토목4)	팀장			직원
				행정	토목	건축	행6	임기제 (행정)나	행7	행9	토6	토7	건6	건7	건8	사무 운영
정원	12	1	1	1	1	1	1	1	2	-	1	-	1	1	-	-
현원	13	1	1	1	1	1	1	-	1	1	-	1	1	-	1	2

※ 조직 연혁

○ ´14.4.1 : 코엑스~잠실운동장 일대 국제교류복합지구 조성 발표(시장)

○ ´14.7.8 : 영동국제교류복합지구 사업실행추진체 구성․운영계획(시장)

− 도시계획국에 동남권MICE추진단(행정3급, T/F) 신설 : 1단1반2팀1명

○ ´14.12 : 민선 6기 조직 개편안 마련

− 도시재생본부 신설에 따라 조직․업무 이관(도시계획국→도시재생본부)

− 추진단 명칭 변경 : 동남권MICE추진단 → 동남권공공개발추진단

↳ 정식 직제화 : 시 행정기구 설치조례 개정(´15.1.1 시행)

2. 문제점

□ 조성사업 진척에 따른 실무인력 절대 부족(사무분장표 등 : 붙임 1)

○ 도시관리계획 수립, 한전부지 사전협상, 잠실종합운동장 일대 국제공모, 사업화 및 사업자 공모 등 단위사업별 구체화로 업무량 지속 증가

○ 특히 사전협상은 충분한 공공기여를 얻기 위해 매우 중요하나, 유사 성격 타 사업단, 협상 상대방(현대차 그룹)에 비해 전담 실무인력이 절대 부족

※ 현대차그룹 사전협상팀 : 90명(GBC건립추진단), 마곡사업단 : 2과 35명

○ 자문단회의 개최 등 회의 및 보고자료 작성에 많은 시간을 소비하고 있어 실무인력의 부족현상 갈수록 심화

− 월1회 집중회의(시장), 현안조정회의(1․2부시장), 2부시장 공정회의(주1회) 등

○ 복합지구 조성사업의 주민 참여, 국내외 홍보전략 수립․운영이 필요하나 전문인력 부족으로 실행에 어려움

− 홈페이지 구축 등 홍보관련 업무를 부서 서무담당직원이 수행

□ 조직과 인사운영의 불일치

○ 동남권공공개발추진단은 직제규칙상 과(課)급으로 규정(정원은 3급 또는 4급 복수운영)하고서, 실제 인사는 단장은 국장급(행정3급)으로 그 하부조직으로 반장은 4급(시설) 운영으로 불일치

※ 시 행정기구 설치조례 시행규칙 제20조의2(도시재생본부에 두는 과)

① 도시재생본부에 재생정책과, 공공개발센터, 공공재생과, 도시 활성화과, 역사도심재생과, 주거재생과, 재생협력과, 주거사업과, 주거환경개선과, 동남권공공개발추진단, 동북4구사업단을 둔다.

○ 직제규칙상 과조직인데도 4급 반장(과장급)이 설치되어 업무수행의 권한과 책임 불명확 등 조직운영 혼란

− 반장 전결 공문 시행 시 발송자가 ‘동남권공공개발추진단장’으로 표기

− 문서 공개여부 결정을 반장 확인 없이 단장이 승인

□ 조직 명칭의 혼란

○ 명칭(동남권공공개발추진단)과 업무(국제교류복합지구)가 자연스럽게 연결되지 않은 부조화로, 시민들은 ‘동남권 유통단지’ 관련 조직으로 잘못 인식

○ 통상적으로 임시조직에 사용하는 ‘추진반’을 계속 쓰고 있으며,   동남권공공개발추진단의 명칭이 너무 길어 호칭과 업무 연상에 어려움

□ 정원보다 낮은 현원 직급

○ 정원(12명)보다 현원이 2명 초과지만 이는 정원에 없는 사무운영직에  기인하고, 보직인력도 정원에 비해 직급이 낮아 업무 수행능력 미흡

− 행정․토목․건축 3명(6~7급 → 8~9급), 사무운영

○ T/F성격의 조직으로 적정인력 확보가 어렵고 우수인력 유치에도 일정한 한계

3. 개선방안

업무량의 증가 추세에 맞추어 조직과 인력의 단계별 확충․보강

□ 1단계 조직 보강 − ´15년 상반기, 인력 6명 증원

○ 최소한의 실무인력 정원 추가 확보 : 12명 → 18명

− ´15년 집중 추진업무에 투입하여 금년 10월 ‘국제교류복합지구 기본계획 (마스터플랜)’ 대시민 발표 준비

직렬	계급	담당업무	비고
행정	7급	･ 복합지구 조성사업 행･재정관련 업무	개발행정팀
임기제	다급	･ 복합지구 조성사업 홍보 전문요원	〃
토목 (2)	6급	･ 한전부지 사전협상 및 중앙정부 협력업무	개발계획팀
	7급	･ 한강･탄천변 열린 시민공간 조성 및 활성화 계획 수립･집행	개발사업팀
건축 (2)	6급	･ 공공부지 민간투자 사업화 방안 검토 및 사업자 공모 실시	〃
	7급	･ 한전부지 사전협상 및 도심공항터미널 이전 관련업무	계발계획팀

※ 2015년 동남권공공개발추진단 주요업무 : 붙임 2

○ 업무추진 동력 및 조직 위상 강화를 위해 실․본부의 ‘기획관’과 동일한 3급 조직으로 조정 필요(시 행정기구 설치조례 시행규칙 개정)

− 실제 인사 운영과 조직관련 규정의 일치

□ 2단계 조직 보강 − ´15년 말, 1단2과6팀으로 확대

○ ´15.10월 국제교류복합지구 마스터플랜 발표 후 사업의 실행체제 구축을 위하여 ‘1단2과 체제’로 확대 보강

○ 국제교류복합지구의 홍보를 위해 추진단 명칭을 합리적으로 변경

< 1단계 : 1단1반3팀 >
		동남권공공개발 추진단
					추진반
개발행정팀							개발계획팀						개발사업팀

➡

< 2단계 : 1단2과6팀 >
												국제복합지구사업단
	국제지구계획과																								국제지구사업과
사업 총 괄 팀									사업관리팀								기반 시설 팀							민자 유치 팀									사업계획 팀								개발사업팀

− 정원 편성

구분	계	단장 (행정3)	과장 (토목4)	팀장			직원
				행정	토목	건축	행6	임기나	임기다	행7	토6	토7	건6	건7	임7	사무 운영
정원	27	1	2	2	2	2	3	2	1	2	2	1	2	1	1	3

※ 동남권공공개발추진단 중기사업계획(´15~´18년) : 붙임 3

○ 인사과 및 본부 주무부서와 협의를 통해 인사 발령 시 정원의 직급에 맞는 인력 확보

＜붙임 1＞

동남권공공개발추진단 사무 분장

□ 개발행정팀 : 5명

직급	이름	담당업무	비고
행정5급	조경익	개발행정팀 업무 총괄	15.1.19발령
행정6급	박정우	․ 복합지구 조성 추진자문단 운영 및 회의 총괄 - 마이스·경제분과, 문화·체육 분과 운영 ․ 복합지구 조성관련 중앙정부 및 타 기관 협의 - 국·공유지 교환, 대정부 건의 등 ․ 부서 조직, 인사, 국회․시의회 관련업무 ․ 업무보고서, 현안보고, 회의자료 작성	´15.2.23 발령
행정7급	이문정	․ 복합지구 조성사업 홍보 총괄 - 홈페이지 구축 및 관리, SNS 운영, 시민토론회, 전문가 워크숍 실시 등 ․ 잠실운동장 시민 아이디어 공모 업무 ․ 예산, 회계, 물품관리 등 서무	´15.1.23 발령
관리운영 7급	백경하	․ 직원 보수 및 문서관리 ․ 기간제근로자 보수 및 보험관리 ․ 직원 후생복지및 교육, 학습관리
〃	강영애	동남권공공개발추진단장 부속실

□ 개발계획팀 : 3명

직급	이름	담당업무	비고
시설5급 (토목)	김창호	개발계획팀 업무 총괄
임기제 다급	이은중	․ 코엑스∼잠실운동장 도시관리계획 수립 ․ 국제교류복합지구 마스터플랜 수립 ․ 추진자문단(기반시설분과) 운영
시설7급 (토목)	최나영	․ 민간부지(한전, 감정원) 사전협상 ․ 민간부지(한전, 감정원, 서울의료원) 세부개발 지침 수립 ․ 올림픽대로 개선 타당성 및 기본계획 수립 ․ 국제교류복합지구 교통개선대책 검토

□ 개발사업팀 : 4명

직급	이름	담당업무	비고
시설5급 (건축)	고현정	개발사업팀 업무 총괄
시설6급 (건축)	우인식	․ 잠실종합운동장 일대 사업화 방안 마련 - 공공 및 민간의 효율적인 분배방안 검토 - 민간투자 사업화 및 사업자 공모방안, 운영방안 등 검토 ․ 사업자 공모 실시 ․ 잠실종합운동장 주경기장 리모델링 - 타당성 검토 및 기본계획 수립, 투자심사 등 관련 절차 추진
시설7급 (건축)	김정아	․ 잠실종합운동장 일대 도시재생 구상 국제공모 실시 ․ 국제교류 복합지구 지구단위계획 재정비에 따른 전략환경영향평가 ․ 탄천 변 공간 시민이용 활성화 및 공원화
행정9	김종욱	․ 추진자문단 사업기획분과 운영 ․ 잠실종합운동장 일대 사업추진 및 운영방안 마련 지원 ․ 잠실종합운동장 일대 도시재생 구상 국제공모 지원	´15.2.28 발령

＜붙임 2＞

국제교류복합지구 조성사업

□ 코엑스~잠실운동장 일대 72만㎡를 서울의 미래 핵심공간 및 세계적 명소로 조성

□ 복합지구 내 국제업무, MICE, 스포츠, 문화엔터테인먼트 4대 핵심기능 유치․강화

□ 사업배경

○ ｢2030 서울플랜｣에서 3도심의 ‘도시 글로벌 경쟁력 강화’ 전략 수립

○ 도심의 대규모 개발 가능지역으로 ‘국제업무 및 MICE산업’ 최적지

□ 주요내용 − 2023년까지 민간․공공 복합개발

○ MICE 시설과 지원환경 확충으로 ‘마이스 클러스터’ 조성

○ 잠실운동장 복합 개발로 ‘스포츠 콤플렉스 및 문화 인프라’ 구축

○ 올림픽대로 및 탄천변 도로 지하화로 ‘열린 시민 공간’ 조성

개발구상안

□ 추진실적

○ 6년의 준비를 거쳐 ｢코엑스~잠실운동장 일대 종합발전계획｣ 발표(´14.4)

○ 성공적 사업 추진을 위한 외부기관과의 협력 및 내부 협업 체제 구축

− 중앙정부의 지원 협의, 사업 자문단 설치, 관계부서 T/F 운영

○ 시민 참여 프로그램 운영 및 전문가 국제공모 기획(´14.11~)

− 천만상상 테마 제안, 시민 아이디어 공모, 국제공모 전문위원단 구성

○ 현대차 그룹의 한전부지 개발 구상 및 사전협상 제안서 접수(´15.1)

− 115층(571m) 높이의 글로벌비즈니스센터(GBC) 건립

□ ´15년 추진계획

국제교류복합지구 기본계획 수립

○ 코엑스~잠실종합운동장 일대 도시관리계획(´14.7~´16.2)

− 1단계(´14.7~´15.4) : 가용부지(한전, 서울의료원 등) 정비방안 검토

− 2단계(´15.5~´16.2) : 기반시설 정비, 부문별 지구단위계획 수립

○ 지구단위계획 수립에 따른 교통․환경영향 개선대책(´15.3~12)

○ 시민․전문가 참여 및 사회적 공감대 형성

− ｢Post 88 잠실종합운동장｣ 시민 아이디어 온라인 공모(´15.1~3)

− 경제, 체육 등 각계 전문가 워크숍, 시민토론회(´15.3~10)

− 잠실종합운동장 일대 도시재생 구상 국제공모(´15.3~9)

➡ 각계 의견과 공모결과 선정된 아이디어는 기본계획에 반영

민간개발 행정지원

○ 한전부지 개발을 위한 사전협상(´15.3~ )

− 협상조직 구성 : 협상조정협의회, 협상정책회의, 협상지원 실무TF

− 도시관리계획 변경, 건축계획(안), 공공기여 계획 협상

○ 서울의료원․한국 감정원 이전부지 개발지침 마련(´15.5)

− 서울의료원 : 지구단위계획 변경(제2종 일반주거 → 준주거)

− 한국감정원 : 업무시설 도입 유도 및 저층부 시민이용 문화시설 복합화

공공사업 실행기반 구축

○ 잠실종합운동장 주․보조경기장 리모델링 계획(´15.4~12)

− ‘88 서울올림픽 성지, 서울 유일의 종합육상경기장’ 기능 유지

− 주경기장 하부공간 활용 등을 통한 융․복합화 및 이용도 극대화

○ 올림픽대로 지하화 타당성 조사 및 기본계획(´15.2~´16.2)

− 범위 : 영동대교 남단~종합운동장(연장 3km, 지하도로 8차로)

○ 탄천변 공간 시민이용 활성화 및 공원화계획(´15.4~12)

− 탄천 동로(0.8㎞) 및 서로(1.0㎞) 지하화 및 버스주차장 이전

※ 국제교류복합지구 조성 로드맵

＜붙임 3＞

동남권공공개발추진단 중기사업계획(´15~´18년)

연도	추진업무	비고
2015	1. 코엑스~잠실종합운동장 일대 도시관리계획 수립 − 서울의료원부지 지구단위계획 변경 결정 − 국제교류복합지구 지구단위계획구역 변경 결정 − 국제교류복합지구 마스터플랜 수립 및 지구단위계획 재정비 검토 2. 교통영향 분석 개선대책 : 용역 시행 − 교통관련 부서 협의 및 교통개선 T/F 참여 3. 전략환경영향 평가 및 개선대책 : 용역 시행 − 환경관련부서 및 기관 협의, 심의 수행 4. 한전부지 사전협상 − 협상조정협의회 운영․협상 : 2주 1회(최소 6개월 운영) − 협상정책회의 운영 : 월평균 1회 약 6개월 운영, 필요시 수시회의 − 실무T/F 운영 : 유관부서 및 자치구 참여, 협상기간 중 수시운영 − 협상에 따른 감정평가 시행 : 평가사 선정 및 평가 − 지구단위계획 입안 및 심의, 결정고시 − 교통개선 T/F 참여 및 개발로 인한 부영향 검토 − 전문가 워크숍 개최 : 초고층 빌딩 안전 등 주요 이슈의 사회적 공감대 형성 − 수도권 정비심의도서 작성 및 심의(국토교통부) 5. 잠실종합운동장 일대 도시재생 구상 국제공모 실시 − 국제공모 실시 및 공모결과 마스터플랜 수립 시 반영 ․ 전문위원단 운영, 공모지침 작성, 심사위원회 구성 및 운영, 시상식 및 전시회 개최, 공모결과 정리 등 − 국제공모 관리용역 수행업체 선정 및 관리감독 6. 잠실종합운동장 일대 사업화방안 검토 및 마련 − 사업의 공공 및 민간의 효율적인 분배방안 검토 − 시설 운영방안, 획지구분방안 검토 − 사업방식, 사업자 공모방안 검토
2015	7. 잠실종합운동장 일대 주경기장 리모델링 − 기본방향 검토 및 관련 부서 협의 8. 국제교류복합지구 조성 자문단 운영 : 격월 개최 − MICE․경제, 문화․체육 등 4개 분과 9. 국제교류복합지구 홍보전략 수립 − 복합지구 브랜딩, 마케팅, 중장기 추진전략 − 기능별, 수단별, 대상별 최적의 홍보방안 마련 10. 국제교류복합지구 홍보 실행 − 복합지구 홈페이지 및 SNS 계정 구축 및 운영 − 복합지구 홍보 동영상 및 홍보물 제작 − 기자설명회, 프레스투어, 보도자료 배포 등 언론홍보 − 일반시민, 지역주민, 전문가 대상 설명회․토론회 개최
2016	1. 한전부지 사전협상 − 지구단위계획 수립(세부개발계획서) ․ 지구단위계획변경(안) 입안 및 공람공고, 관계부서 협의 − 수도권정비 심의 : 수도권정비 심의도서 작성 및 심의 신청(국토교통부) − 건축 인․허가 시 지구단위계획 비교 검토 의견 제시 2. 국제교류복합지구 지구단위계획 재정비 − 지구단위계획 재정비 입안 및 공람공고, 관계부서 협의 3. 잠실종합운동장 일대 주경기장 리모델링 − (기술)타당성 조사 및 기본계획 수립 − (재정)타당성 조사 − 투자심사, 건축정책위원회 자문 등 관련 절차 수행 − 전국체전 개최 대비 개․보수 실시 4. 잠실종합운동장 일대 민간자본 투자사업 시행 − 사업방식 검토(관련 법, 전문가 자문, 워크숍 등) − 국내외 민간 개발기업(developer) 설명회 − 민간 사업자 공모지침 및 공모 5. 기반시설 기본계획 수립 및 투자심사 등 행정절차 이행 − 올림픽대로 지하화 기본계획 및 투자 심의 − 주경기장 리모델링 기본계획 및 투자 심의 − 한강 및 탄천변 정리 기본계획 − 탄천 동․서로 지하화 및 동부간선도로 진출입로 기본계획 6. 영동대로 복합환승센터 조성 − 사업방식 검토(관련 법, 전문가 자문 등) − 관련 부서 및 기관 협의체 운영(사업비 분담 등) − 공항터미널 이전방안 검토 및 협의 7. 국제교류복합지구 조성 자문단 운영 : 격월 개최 − MICE․경제, 문화․체육 등 4개 분과 8. 국제교류복합지구 홍보 실행 − 복합지구 홈페이지 및 SNS 계정 관리․운영 − 복합지구 홍보 동영상 및 홍보물 제작 − 기자설명회, 프레스투어, 보도자료 배포 등 언론홍보 − 일반시민, 지역주민, 전문가 대상 설명회․토론회 개최
2017	1. 한전부지 GBC 건립 : 공공기여 이행안내 및 이행 유도 2. 구 한국감정원부지 사전협상 − 협상조정협의회 운영 및 협상 : 2주 1회(최소 6월) − 협상정책회의 운영 : 월평균 1회(약 6월), 필요시 수시 − 실무T/F 운영 : 유관부서 및 자치구 참여, 수시운영 − 협상에 따른 감정평가 시행 : 평가사 선정 및 평가 − 지구단위계획 입안 및 심의, 결정고시 추진 − 교통개선 T/F 참여 및 개발로 인한 부영향 검토 3. 서울의료원 세부개발계획 수립 − 민간의 사업계획 수립에 따른 지구단위계획 변경결정 4. 잠실종합운동장 일대 민간자본투자사업 시행 − 사업방식 검토(관련 법, 전문가 자문, 워크숍 등) − 국내외 민간 개발기업(developer) 설명회 − 민간 사업자 공모지침 및 공모 5. 잠실종합운동장 일대 주경기장 리모델링 − 예산 편성 및 기본방침 수립(발주 및 입찰방식 등) - 설계 국제공모 실시 : 공모지침 작성, 심사위원회 구성 및 운영, 당선작 선정 및 계약 등 - 기본설계 및 실시설계, 관련 행정절차 수행 - 전국체전을 위한 개․보수 실시 6. 기반시설 기본계획 수립 및 투자심사 등 행정절차 이행 − 올림픽대로 지하화 기본계획 및 투자 심의 − 탄천 동․서로 지하화 및 동부간선도로 진출입로 기본계획 7. 탄천 변 공간 시민이용 활성화 및 공원화 − (기술)타당성 조사 및 기본계획 수립 등 관련 절차 수행 − 설계 국제공모 실시 : 공모지침 작성, 심사위원회 구성 및 운영, 당선작 선정 및 계약 등 8. 영동대로 복합환승센터 조성사업 시행 − 관련 부서 및 기관 협의체 운영(사업비 분담이행 등) − 관련기관 협의체 협약체결 및 사업시행 9. 국제교류복합지구 조성 자문단 운영 : 격월 개최 − MICE․경제, 문화․체육 등 4개 분과 10. 국제교류복합지구 홍보 실행 − 복합지구 홈페이지 및 SNS 계정 관리․운영 − 복합지구 홍보 동영상 및 홍보물 제작 − 기자설명회, 프레스투어, 보도자료 배포 등 언론홍보 − 일반시민, 지역주민, 전문가 대상 설명회․토론회 개최
2018	1. 한전부지 GBC 건립 : 공공기여 이행안내 및 이행 유도 2. 서울의료원 개발 : 민간의 사업계획 수립에 따른 지구단위계획 변경결정 3. 구 한국감정원부지 사전협상 − 지구단위계획 수립(세부개발계획서) : 지구단위계획 변경(안) 입안 및 공람공고, 관계부서 협의 − 수도권정비 심의 : 수도권정비심의도서 작성 및 심의신청(국토교통부) − 건축 인․허가 시 지구단위계획 비교검토 의견 제시 − 공공기여 이행안내 및 이행 유도 4. 잠실종합운동장 일대 주경기장 리모델링 − 리모델링 관련 협의(허가) − 전국체전 개최 대비 개․보수 실시 5. 잠실종합운동장 일대 민간자본 투자사업 시행 - 국내․외 민간 사업자 행정절차 이행 - 민간사업 점검 및 지도 6. 탄천 변 공간 시민이용 활성화 및 공원화 - 설계 국제공모 실시 : 공모지침 작성, 심사위원회 구성 및 운영, 당선작 선정 및 계약 등 - 기본설계 및 실시설계, 관련 행정절차 수행 7. 기반시설 기본계획 수립 및 투자심사 등 행정절차 이행 − 올림픽대로 지하화 기본계획 및 투자 심의 − 탄천 동․서로 지하화 및 동부간선도로 진출입로 기본계획 8. 영동대로 복합환승센터 조성사업 시행 − 관련 부서 및 기관 협의체 운영(사업비 분담이행 등) − 관련기관 협의체 협약체결 및 사업시행 9. 국제교류복합지구 조성 자문단 운영 : 격월 개최 − MICE․경제, 문화․체육 등 4개 분과 10. 국제교류복합지구 홍보 실행 − 복합지구 홈페이지 및 SNS 계정 관리․운영 − 복합지구 홍보 동영상 및 홍보물 제작 − 기자설명회, 프레스투어, 보도자료 배포 등 언론홍보 − 일반시민, 지역주민, 전문가 대상 설명회․토론회 개최