문서번호	한양도성연구소-708
결재일자	2019.4.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	한양도성연구소장	학예연구부장	서울역사박물관장
협 조
	경영지원부장
	총무과장
	시설과장
	전시과장
	교육대외협력과장
	조사연구과장
	유물관리과장
	보존과학과장
	청계천박물관장
	주무관

동대문역사관 상설전시 개편

전시물 제작 설치 계획(안)

2019.  4.

서울역사박물관

(한양도성연구소)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

동대문역사관 상설전시 개편 전시물 제작 설치 계획(안)

2009년 개관 이후 노후한 동대문역사관의 상설전시 전시시설 및 전시 콘텐츠를 개선하는 전시물 제작 설치 용역을 추진하여 동대문 지역의 역사성을 살리는 현장 박물관으로 재단장하고자 함

1		추진 근거 및 사업 개요

○ 추진근거

- 동대문역사문화공원 개편 기본계획(안)(한양도성박물관-2278, 2017. 7. 25)

- 동대문역사관 상설전시 개편 기본설계 용역 시행 계획(안)(한양도성박물관-353, 2018. 2. 27)

○ 사업개요

- 사 업 명 : 동대문역사관 상설전시 개편 전시물 제작 설치 용역

- 사업기간 : 2019년 4월 ~ 2020년 7월(※ ’20년 5월 재개관 예정)

- 사업내용 : 동대문역사관 상설전시 개편 실시설계, 전시시설 및 전시물 철거, 전시시설 및 패널, 영상, 모형 등 전시물 제작 설치

- 소요예산 : 1,560,400천원(※2019~2020년 연차사업)

2		추진 현황

○ ’17. 7.25 : 동대문역사문화공원 개편 기본계획(안) 수립

○ ’17. 8.29 ~ 12.20 : 동대문역사문화공원 개편 기본계획 수립 용역

○ ’18. 2.27 : 동대문역사관 상설전시 개편 기본설계 용역 시행 계획(안) 수립

○ ’18. 3 ~ ’18. 8 : 동대문역사관 상설전시 개편 기본설계 용역 실시

3		추진 방향

○ ‘동대문역사문화공원 개편 기본계획(2017)’ 및 ‘동대문역사관 상설전시 개편 기본설계(2018)’를 바탕으로 실시설계 및 전시물 제작·설치 추진

○ 동대문역사관 전면 휴관으로 인한 관람불편 최소화를 위해 전시시설 철거와 전시시설 및 전시물 설치는 동절기를 활용하여 추진

○ 효율적인 사업예산의 집행과 연도별 예산 상황을 감안, 장기계속계약의 형태로 2019년 하반기 및 2020년 상반기 연차사업으로 발주

○ 전시물 제작 시 전문 분야별 고증과 자문을 실시하여 성과물의 수준과 완성도를 높임

○ 제한경쟁입찰(협상에 의한 계약) 및 제안서 평가위원회 개최로 공정하면서도 성공적으로 과업을 수행할 역량을 갖춘 최적의 업체 선정

4		세부 추진 계획

□ 동대문역사관 상설전시 전시물 제작 설치 용역

○ 용 역 명 : 동대문역사관 상설전시 개편 전시물 제작 설치 용역

○ 과업기간 : 계약일 ~ 2020년 7월

○ 대상공간 : 동대문역사관 전시실(총 777.98㎡) 등

구분	면적	용도
1층	777.98㎡	상설전시실(434.56㎡), 기획전시실(104.61㎡), 기계실, 기타
지하1층	482.3㎡	수장고(180.41㎡), 사무실(72.63㎡), 화장실, 기타

※ 상설전시 개편에 따른 외부 안내사인물 설치 포함

○ 과업내용 : 전시 실시설계, 전시물 및 시설물 철거·이전, 전시시설물 및 보조물 제작 설치, 모형·영상·그래픽 등 전시물 제작·설치, 전시 내용 고증 및 자문, 전시물 시험가동 및 운영 안정화

○ 소요예산 : 1,540,400천원(2019년: 900,000천원/ 2020년 640,400천원)

○ 계약형태 : 장기계속계약(1차: 2019년/ 2차 2020년)

○ 예산편성내역

- 총 소요예산 : 1,540,400천원

- 사업비 세부내역

공종(부문)	금액(원)			비율(%)
	총 예산	2019년 예산	2020년 예산(안)
전시시설공사 (유구이전비용 포함)	519,500,000	419,500,000	100,000,000	33.72
전시그래픽	117,400,000	0	117,400,000	7.62
전시모형	130,800,000	130,800,000	0	8.49
전시영상SW	296,000,000	0	296,000,000	19.22
전시영상HW	351,000,000	224,000,000	127,000,000	22.79
전기공사 등	125,700,000	125,700,000	0	8.16
합계	1,540,400,000	1,000,000,000	540,400,000	100

※ 동대문역사관 상설전시 기본설계(2018) 원가계산서에 따름

□ 주요 과업 내용

○ 전시 연출 계획 및 실시설계, 도면 및 지침 작성

○ 기존 전시물 및 시설물 철거·이전

○ 전시시설물 및 보조물 제작·설치

○ 모형, 영상(S/W, H/W), 그래픽 등 제작·설치

○ 전시물 내용 고증 및 제작 방법 등 자문

○ 전시물, 전시보조물 시험가동 및 운영 안정화

○ 전시공간에 필요한 부대시설 공사

(전기, 조명, 음향, 소방, 장애인 관련 시설)

○ 특수 전시물의 경우 관리 및 운영 매뉴얼 작성

○ 준공도면 작성 및 원가계산서·산출내역서 작성

□ 상설전시 전시 구성

○ 상설전시 개편 전시구성(안)

구분		주요 내용
PART 1	프롤로그	1-1. 동대문역사관의 소개
		1-2. 도성의 동쪽
		1-3. 동대문 지역 연표
PART 2	조선시대 도성방어와 군사시설	2-1. 한양도성의 축조
		2-2. 평지에 쌓은 성벽
		2-3. 도성방어와 치성의 설치
PART 3	이간수문	3-1. 이간수문의 건설
		3-2. 이간수문과 남소문동천
PART 4	훈련원과 하도감	4-1. 훈련원, 조선의 군인양성소
		4-2. 훈련도감의 설림과 운영
		4-3. 하도감
		4-4. 염초청
PART 5	20세기의 변화	5-1. 별기군 창설과 임오군란
		5-2. 근대공원의 탄생
		5-3. 경성운동장의 설림
PART 6	땅속에서 찾은 역사	6-1. 동대문운동장의 발굴연혁
		6-2. 유구의 발굴과 이전복원

○ 동대문역사관 상설전시 개편 기본설계 평면도

□ 계약 방법 및 사업자 선정

○ 계약 방법 : 제한경쟁입찰(협상에 의한 계약)

- 관련근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제43조 1항 및 제44조

※ 협상에 의한 계약 사유 : 전문성 확보

■ 박물관 전시는 전문성과 모형 ․ 작동장치 ․ 영상 등 창의적 물품제작이 큰 비중을 차지하는 대중적 작품이므로 설계자의 의도구현이 관건임

■ 구체적인 제안서 및 설계도면 ․ 내역서 등을 통해 전시업체를 선정함으로써 가격경쟁보다 전시의 질적인 내용을 우선시하여 평가할 수 있음

■ 제안서 평가위원회의 결과에도 불구하고 우선협상순위 업체 및 이하순위 업체와 협상 절차를 통해 박물관과 가장 유리하다고 인정되는 자와 계약할 수 있음

5		소요 예산 및 집행 방법

○ 총소요예산 : 1,560,400천원

○ 예산 과목 : 서울역사박물관, 역사와 문화의 복합공간 창조, 한양도성전시관 운영, 한양도성박물관・연구소 운영, 시설비(401-01)/ 사무관리비(201-01)

(단위 : 천원)

예산과목		내 역		예산액 (천원)
시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	○ 전시설계 및 전시물 제작 설치 - 전시연출 계획 및 실시설계 - 전시시설 및 전시물 철거 - 전시시설물 및 보조물 제작 - 모형, 진열장, 영상, 그래픽 등 제작	900,000 (’19년 예산) 650,400 (’20년 예산)	1,540,400
일반 운영비	사무관리비 (201-01)	○제안서 평가회 개최 ○전문가 자문수당 등 ○원고료 및 번역 ○유물 복제 및 자료 구입 등		20,000

□ 예산 집행 방법

○ 동대문역사관 상설전시 개편 전시물 제작 설치 용역

: 제한경쟁입찰(협상에 의한 계약)

○ 제안서 평가, 회의 개최, 원고료 등 기타 운영비

: 평가수당 등 일반지출, 기타 운영비 1,000만원 이하 일상경비로 교부받아 집행 후 정산

6		향후 추진 일정

○ ’19. 4           : 사업 계획 수립

○ ’19. 4 ~ 6     : 일상감사, 사전 규격 공개, 입찰공고 및 사업자 선정

○ ’19. 7 ~12     : 전시연출 계획 및 실시설계, 자문회의 개최, 원고 작성, 영상·모형 등 전시물 제작 등

○ ’19.11 ~ ’20. 4 : 전시시설 및 전시물 철거, 전시물 제작·설치 공사(전시실 임시 폐관)

○ ’20. 4 ~ 5       : 시험가동 및 전시 안정화

○ ’20. 5            : 동대문역사관 재개관

○ ’20. 6 ~ 7      : 검수 및 보완, 준공도면 및 보고서 작성

※ 위 일정은 상황에 따라 변경될 수 있음

7		행정 사항

○ 총무과 : 예산집행 지원

○ 시 설 과 : 전시영상(H/W, S/W) 관련 자문, 설계도 검토 및 공사감독 지원

○ 전 시 과 : 전시 콘텐츠 협조 및 제작 지원

○ 교육대외협력과 : 보도자료 및 전시홍보 지원

○ 조사연구과 : 발굴조사 관련 자료 제공 협조

○ 유물관리과 : 소장유물 대출 협조 및 유물사진 자료 제공 협조

○ 보존과학과 : 상설전시실 전시환경 점검 및 유물 보존처리 협조

○ 청계천박물관 : 청계천 발굴 자료 제공 협조

○ 서울디자인재단: 전시공사 관련 시설운영 및 차량출입 협조.  끝.