동대문역사관 상설전시 개편 전시물 제작 설치 계획(안)

2009년 개관 이후 노후한 동대문역사관의 상설전시 전시시설 및 전시 콘텐츠를 개선하는 전시물 제작 설치 용역을 추진하여 동대문 지역의 역사성을 살리는 현장 박물관으로 재단장하고자 함

1		사업 개요

○ 사 업 명 : 동대문역사관 상설전시 개편 전시물 제작 설치

○ 사업기간 : 2019년 4월 ~ 2020년 7월(※ ’20년 6월 재개관 예정)

○ 사업내용 : 동대문역사관 상설전시 개편 실시설계, 전시시설 및 전시물 철거, 전시시설 및 패널, 영상, 모형 등 전시물 제작 설치

2		추진 현황

○ ’17. 7.25 : 동대문역사문화공원 개편 기본계획(안) 수립

○ ’17. 8.29 ~ 12.20 : 동대문역사문화공원 개편 기본계획 수립 용역

○ ’18. 2.27 : 동대문역사관 상설전시 개편 기본설계 용역 시행 계획(안) 수립

○ ’18. 3 ~ ’18. 8 : 동대문역사관 상설전시 개편 기본설계 용역 실시

3		세부 추진 계획

□ 시설 개요

○ 위    치 : 서울시 중구  을지로 281 동대문역사문화공원 내

○ 대상공간 : 동대문역사관 전시실(총 777.98㎡) 등

□ 상설전시 개편 전시구성(안)

○ 상설전시 개편 전시구성(안)

구분		주요 내용
PART 1	프롤로그	1-1. 동대문역사관의 소개
		1-2. 도성의 동쪽
		1-3. 동대문 지역 연표
PART 2	조선시대 도성방어와 군사시설	2-1. 한양도성의 축조
		2-2. 평지에 쌓은 성벽
		2-3. 도성방어와 치성의 설치
PART 3	이간수문	3-1. 이간수문의 건설
		3-2. 이간수문과 남소문동천
PART 4	훈련원과 하도감	4-1. 훈련원, 조선의 군인양성소
		4-2. 훈련도감의 설림과 운영
		4-3. 하도감
		4-4. 염초청
PART 5	20세기의 변화	5-1. 별기군 창설과 임오군란
		5-2. 근대공원의 탄생
		5-3. 경성운동장의 설림
PART 6	땅속에서 찾은 역사	6-1. 동대문운동장의 발굴연혁
		6-2. 유구의 발굴과 이전복원

○ 동대문역사관 상설전시 개편 기본설계 평면도

4		추진 일정

○ ’19. 4 ~ 6     : 사업 계획 수립 및 사업자 선정

○ ’19. 7 ~12     : 전시연출 계획 및 실시설계, 자문회의 개최, 원고 작성, 영상·모형 등 전시물 제작 등

○ ’19.11 ~ ’20. 5 : 전시시설 및 전시물 철거, 전시물 제작·설치 공사(전시실 임시 폐관 중)

○ ’20. 6 ~ 7      : 시험운영 및 동대문역사관 재개관

※ 위 일정은 상황에 따라 변경될 수 있음