		동대문역사문화공원 건설

(도시기반시설본부, 공공시설부)

역사와 첨단․녹지 등이 어우러진 역사문화공원 조성 및 신성장 동력산업인

디자인산업을 선도할 디자인플라자를 건설하여 서울의 랜드마크로서 세계적인 관광 명소화 및 지역경제 활성화 도모

1		사 업 개 요

❍ 사업내용

-  위    치 : 서울 중구 을지로7가 2-1번지 일대

-  규    모 :  연면적 85,320㎡(지하3층, 지상4층, 최고높이 29m)

-  주요시설 : 컨벤션홀, 전시관, 디자인정보센터, 지하연결광장 등

❍ 사업기간 : ‘06. 9. ~ ’13. 7

❍ 총사업비 : 422,562백만원

- ’11년이전 : 280,564백만원 ,  ’12년 : 72,200백만원 ,  ’13년 이후 : 69,798백만원

❍ 기대효과

- 디자인․패션산업 진흥을 통한 서울을 세계적 디자인 산업중심도시         및 DDP를 세계 디자인 메카로 부각

- 관광사업 활성화를 통한 도심상권 부활 및 지역경제 활성화 도모

- 서울성곽 복원 및 문화재 이전 복원 등 민족 자긍심 고취

2		추 진 결 과

① 디자인플라자

- 건설공사(건축, 토목, 조경, 설비) 88.5%

- 전기․통신공사 71.6%

② 지하연결광장

- 구조물공사 90%, 내부마감 68%

❍ 최근 3년간 예산집행 실적

(단위:백만원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용․변경(C)	예산현액 (D=A+B+C)	집행액 (E)	차년이월	불용액	집행률 (E/D)×100
2010	72,493	25,002		97,495	52,416	44,707	371	53.8%
2011	74,063	44,707		118,770	96,012	22,290	468	80.8%
2012	72,200	22,290		94,490	81,694	12,490	306	86.5%

※ 당해연도 추경은 당초예산에 포함 작성, ‘12년 신규사업은 ’12년도만 작성

※ 예비비 사용이 있을 경우에는 이․전용에 포함하고, 예비비 액수를 별도로 표시

❍ ‘12년 성과지표

(단위:백만원)

계 획	실 적	추 진 율	비 고
94,490	81,694	86.5%

3		추진상 애로점

❍ 해당사항 없음

4		향 후 계 획

❍ ‘13. 5 : 컨벤션홀, 전시관, 디자인정보센터 천정/벽체 마감공사 완료

❍ ‘13. 7 : 시운전 및 외부 마감공사(조경, 토목포함) 완료