“창조하는 기술인․생각하는 지식인․화합하는 동명인”

수신자  서울시 도시기반시설본부장

(참조)  도시철도토목부장

제  목  진접1공구 2020년 6월 휴일 작업계획 보고

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. KCC(진접선) 제711-244호(2020.5.26)와 관련입니다.

3. 진접선(4호선연장) 차량기지 1공구(인입선) 건설공사와 관련 시공사로부터 원활한 공사 추진을 위해 2020년 6월 휴일 작업계획서가 접수되어 붙임과 같이 보고하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

붙    임 : 1. 검토의견서 1부.

2. 휴일작업계획서(6월) 1부.
3. 시공사 공문 사본 1부.  끝.

(주)동명기술공단종합건축사사무소

진접선(4호선연장) 차량기지 1공구(인입선) 건설공사

감독권한대행 등 건설사업관리용역

책임건설사업관리기술자  권 일 순(인)

수신처 :

담당 : 이사 장성일                                 책임건설사업관리기술자 : 권일순

협조 :

시행 : 동명감 진접1 제2020-157호 (2020.05.26)                  접수 :         -          (20     .      .    )

주소 : (12036) 경기도 남양주시 오남읍 양지리 371-1  /  http://www.dmec.co.kr

전화 : 031-575-3705    /    전송(FAX) 02-575-3706    /    jjcar2018@hanmail.net

검 토 의 견 서

공 사 명	진접선(4호선연장) 차량기지 1공구(인입선) 건설공사
관련문서	KCC(진접선) 제711-244호(2020.5.26)	검토기간	2020.05.26
건 명	휴일작업계획서(2020년 6월) 검토
1. 검토목적 ○ 진접선(4호선연장) 차량기지 1공구(인입선) 건설공사 중 공사의 연속성 확보와 원활한 공정추진을 위하여 시공사에서 제출한 휴일작업계획 검토 및 건설사업관리기술자 근무계획을 수립하여 공사관리에 철저를 기하고자 함. 2. 공사개요 ○ 구 간 : 경기도 남양주시 오남읍 양지리 ~ 진접읍 금곡리 ○ 규 모 : 입출고선(L=5,556m, 단선(상·하선) 1,459m, 복선 4,097m, 환기구 2개소), 차량기지(L=113m) ○ 공사기간 : (총괄)`18.12.31 ~ `24.10.29 (1차)`18.12.31 ~ `20.06.30 ○ 공 사 비 : (총괄 도급비)909.49억원, (1차 도급비)40억원 ○ 도 급 자 : (주)케이씨씨건설 3. 관련근거 ○ 공사계약특수조건 제11조(휴일 및 야간작업) ○ 건설사업관리용역 과업내용서 6.3(휴일 및 야간근무에 대한 건설사업관리대가 지급) 4. 휴일작업 사유 1) 작업의 연속성 확보 및 원활한 공정추진을 위해 휴일 및 공휴일에도 지속적 공사추진 시행 요청과 2) 시공사 휴일작업시행에 따른 공사관리를 위한 건설사업관리기술자 근무계획 수립

5. 휴일작업계획

작업일	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
06월06일 (토)	- 작업구1 (환기구#1)	수직구 천공, 발파, 버럭 처리, R/B시공 지보설치,S/C타설	권일순 부사장	김승태 팀장 최병준 대리 박진용 대리 윤수한 기사
	- 작업구2 (환기구#2)	경사갱 막장면 정리
06월07일 (일)	- 작업구1 (환기구#1)	- 수직구 천공, 버럭 처리, R/B시공 지보설치,S/C타설	최광준 상무	최성윤 과장 박순민 대리 임상욱 대리
	- 작업구2 (환기구#2)	경사갱 시험발파 준비(천공)
06월13일 (토)	- 작업구1 (환기구#1)	- 수직구 천공, 발파, 버럭 처리, R/B시공 지보설치,S/C타설	장성일 이사	이육규 팀장 구현우 팀장 임상욱 대리
	- 작업구2 (환기구#2)	선진수평보링,B/P,폐수처리시설 설치 (가설 건축물 인허가 따라 일정 변경)
06월14일 (일)	- 작업구1 (환기구#1)	- 수직구 천공, 버럭 처리, R/B시공 지보설치,S/C타설	권일순 부사장	심준수 팀장 박순민 대리 양원호 기사
	- 작업구2 (환기구#2)	선진수평보링,B/P,폐수처리시설 설치 (가설 건축물 인허가 따라 일정 변경)
06월20일 (토)	- 작업구1 (환기구#1)	수직구 천공, 발파, 버럭 처리, R/B시공 지보설치,S/C타설	최광준 상무	구현우 팀장 최성윤 과장 이충헌 실장 임상욱 대리
	- 작업구2 (환기구#2)	경사갱 굴진
06월21일 (일)	- 작업구1 (환기구#1)	- 수직구 천공, 버럭 처리,R/B시공 지보설치,S/C타설	장성일 이사	김승태 팀장 도화영 대리 양원호 기사
	- 작업구2 (환기구#2)	경사갱 굴진 (양수허가에 따라 일정 변경 될 수 있음)
06월27일 (토)	- 작업구1 (환기구#1)	수직구 천공, 발파, 버럭 처리, R/B시공 지보설치,S/C타설	권일순 부사장	심준수 팀장 도화영 대리 박진용 대리 윤수한 기사
	- 작업구2 (환기구#2)	경사갱 굴진
06월28일 (일)	- 작업구1 (환기구#1)	- 수직구 천공, 버럭 처리, R/B시공 지보설치,S/C타설	최광준 상무	이육규 팀장 최병준 대리 임상욱 대리
	- 작업구2 (환기구#2)	경사갱 굴진 (양수허가에 따라 일정 변경 될 수 있음)

6. 건설사업관리단 근무계획

구 분	근무일자	근무시간	근 무 자	대체 휴무계획		비 고
				대체 휴무일	업무대행자
휴일 작업	6월 6일(토)	07:30 ~ 16:30	권일순 부사장	-	정상근무
	6월 7일(일)	07:30 ~ 16:30	최광준 상무	-	정상근무
	6월13일(토)	07:30 ~ 16:30	장성일 이사	6월12일(금)	최광준 상무
	6월14일(일)	07:30 ~ 16:30	권일순 부사장	-	정상근무
	6월20일(토)	07:30 ~ 16:30	최광준 상무	6월19일(금)	장성일 이사
	6월21일(일)	07:30 ~ 16:30	장성일 이사	-	정상근무
	6월27일(토)	07:30 ~ 16:30	권일순 부사장	6월26일(금)	최광준 상무
	6월28일(일)	07:30 ~ 16:30	최광준 상무	-	정상근무

*일요일 및 공휴일은 대체 휴무없이 정상 근무예정이며, 시공사로 대가 청구예정

7. 시공사 휴일작업계획서 승인조건

1) 휴일에는 근무인원이 상대적으로 축소되어 안전 및 품질, 환경 등의 현장
관리에 어려움이 있으므로 복합공종 및 위험공종은 공정계획을 검토하여 가급적
평일에 이루어질 수 있도록 관리

2) 현장관리자 배치기준을 준수하여 성실하게 근무

3) 휴일작업 중 토요일 관리단 근무자는 금요일 대체휴무를 원칙으로 하나,
대체휴무를 할 수 없는 상황이 발생하는 경우에는 시공사에 청구조건임.

4) 서울시 휴일 작업 현장관리 개선방안 및 근로자보호 10대 기본사항, 안전시공
10대 기본사항 등을 철저히 준수

8. 검토의견

◦ 작업의 연속성 확보와 원활한 공정추진을 위해 휴일작업 시행이 필요함에 따라
관련규정 『서울특별시 공사계약 특수조건 11조(휴일 및 야간작업)』에 의거
귀책사유가 시공사에 있어 건설사업관리대가는 시공사 부담이 타당함.

◦ 또한 시공사에서 요청한 휴일작업 시행에 따른 공사관리의 공백이 발생하지
않도록 평일과 동일하게 건설사업관리업무를 수행함이 적정하다고 판단됨. 끝.

붙임자료) 서울특별시 공사계약 특수조건 11조(휴일 및 야간작업)

작 성 자 :

분야별건설사업관리기술자

장  성  일  (인)

확 인 자 :

책임건설사업관리기술자

권  일  순  (인)

휴일 작업 계획서

(20.06.06 ~ 20.06.28)

1. 사업명 : 진접선(4호선연장) 차량기지(인입선) 1공구 건설공사

2. 작업내용

작업일	작업 형태	작업위치	작업내용	관리자
				감리단	시공사
06월06일(토)	현충일	-. 작업구1 (환기구#1)	수직구 천공, 발파, 버럭 처리, R/B시공 지보설치,S/C타설	권일순 부사장	김승태 팀장 최병준 대리 박진용 대리 윤수한 기사
		-. 작업구2 (환기구#2)	경사갱 막장면 정리
06월07일(일)	휴일	-. 작업구1 (환기구#1)	- 수직구 천공, 버럭 처리, R/B시공 지보설치,S/C타설	최광준 상무	최성윤 과장 박순민 대리 임상욱 대리
		-. 작업구2 (환기구#2)	경사갱 시험발파 준비(천공)
06월13일(토)	휴일	-. 작업구1 (환기구#1)	- 수직구 천공, 발파, 버럭 처리, R/B시공 지보설치,S/C타설	장성일 이사	이육규 팀장 구현우 팀장 임상욱 대리
		-. 작업구2 (환기구#2)	선진수평보링,B/P,폐수처리시설 설치(가설 건축물 인허가 따라 일정 변경)
06월14일(일)	휴일	-. 작업구1 (환기구#1)	- 수직구 천공, 버럭 처리, R/B시공 지보설치,S/C타설	권일순 부사장	심준수 팀장 박순민 대리 양원호 기사
		-. 작업구2 (환기구#2)	선진수평보링,B/P,폐수처리시설 설치(가설 건축물 인허가 따라 일정 변경)
06월20일(토)	휴일	-. 작업구1 (환기구#1)	수직구 천공, 발파, 버럭 처리, R/B시공 지보설치,S/C타설	최광준 상무	구현우 팀장 최성윤 과장 이충헌 실장 임상욱 대리
		-. 작업구2 (환기구#2)	경사갱 굴진
06월21일(일)	휴일	-. 작업구1 (환기구#1)	- 수직구 천공, 버럭 처리,R/B시공 지보설치,S/C타설	장성일 이사	김승태 팀장 도화영 대리 양원호 기사
		-. 작업구2 (환기구#2)	경사갱 굴진(양수허가에 따라 일정 변경 될 수 있음)
06월27일(토)	휴일	-. 작업구1 (환기구#1)	수직구 천공, 발파, 버럭 처리, R/B시공 지보설치,S/C타설	권일순 부사장	심준수 팀장 도화영 대리 박진용 대리 윤수한 기사
		-. 작업구2 (환기구#2)	경사갱 굴진
06월28일(일)	휴일	-. 작업구1 (환기구#1)	- 수직구 천공, 버럭 처리, R/B시공 지보설치,S/C타설	최광준 상무	이육규 팀장 최병준 대리 임상욱 대리
		-. 작업구2 (환기구#2)	경사갱 굴진(양수허가에 따라 일정 변경 될 수 있음)

3. 휴일 작업 위치

-. 작업구1(환기구#1) 작업위치

○범례
	작업 위치

본선터널 수직구 당고개쪽 차량기지쪽	수직구 천공, 발파, 버럭 처리, R/B시공 지보설치, S/C타설

-. 작업구2(환기구#2) 작업위치

경사갱 굴진,지보설치, 숏크리트 타설,