“창조하는 기술인․생각하는 지식인․화합하는 동명인”

수신자  서울시 도시기반시설본부장

(참조), 도시철도토목부장

제  목  휴일작업계획 승인요청(2016년 8월 둘째주)

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 대림서지923(공) 제16-377호(2016.08.09)와 관련입니다.

3. 서울지하철 9호선 3단계 923공구 건설공사와 관련하여 시공사로부터 원활한 공사추진을 위해 2016년 8월(둘째주) 휴일작업계획 승인요청이 있어 검토한 결과 적정하여 붙임과 같이 보고하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

붙    임 : 1. 감리 검토의견서 1부.

2. 2016년 8월 둘째주 휴일작업계획서 1부.

3. 휴일근무 실적 1부.

4. 시공사 공문 사본 1부.  끝.

(주)동명기술공단종합건축사사무소

서울지하철 9호선 3단계 923공구 건설공사 전면책임감리

책임감리원  권 일 순(인)

수신처 :

담당 : 이사 김창섭                        책임감리원 : 권일순

협조 : 이사 황자연

시행 : 동명감923 제2016-239호 (2016.08.10)                     접수 :         -          (20     .      .    )

주소 : (05359) 서울시 강동구 천호대로 1244(둔촌동 600) 2층  /  http://www.dmec.co.kr

전화 : 02-473-1923(토목), 02-470-7327(상부분야)  /  전송(FAX) 02-474-1923   /  92309@hanmail.net

감 리  검 토 의 견 서

공 사 명

서울지하철 9호선 3단계 923공구 건설공사

제    목

휴일작업계획 검토(2016년 8월 둘째주)

1. 검토목적

◦ 서울지하철 9호선 3단계 923공구 건설공사와 관련 원활한 공사추진을 위해 시공사로부터

휴일작업계획 승인 요청이 있어 적정성을 검토하여 공정관리와 안전관리에 만전을 기하고자 함.

2. 관련근거

가. 입찰안내서 공사계약 일반조건Ⅴ.6휴일 및 야간작업

→ 계약담당자의 승인없이 휴일 및 야간작업을 할 수 없다.

나. 일괄입찰 등의 공사계약 특수조건 제19조(야간 및 휴일작업)

→ 휴일 및 야간 작업시는 공사감독관의 감독하에 공사를 시행하여야 한다.

→ 공사감독관의 추가비용은 계약상대자의 부담으로 한다.

다. 감리과업지시서 6.2.3 휴일 및 야간작업 근무요령

3. 휴일작업 사유

가. 구조물 작업의 연속성 및 효율성

나. 향후 강우 등을 감안하여 실작업 가능일수 산정이 불확실하고 작업의 연속성을 고려하여

휴일작업 시행

4. 휴일 감리근무자

근무일자	근무자	근무시간
`16.08.13(토)	권일순(책임감리원)	09:00~18:00

5. 검토의견

가. 개착구간에 대한 작업의 연속성과 효율성을 고려하여 휴일작업계획은 적정하다고 판단되며,

나. 휴일작업 시행에 따른 공사관리의 공백이 발생되지 않도록 적정인원을 배치하여 공사관리

다. 감리원 휴일근무는 해당등급 인원이 제한적이므로 감리원이 순번제로 근무실시

라. 휴일작업으로 인하여 발생되는 감리비에 대한 시공사 의견

- 휴일작업에 의한 감리대가는 우선 시공사에서 지급예정

검 토 자

2016. 08. 10.  소속 : 923공구  직위 : 보조감리원  성명 : 김 창 섭  (인)

확 인 자

2016. 08. 10.  소속 : 923공구  직위 : 책임감리원  성명 : 권 일 순  (인)

휴 일 작 업 계 획

(`16.8.13~16.8.15)

1. 사업명 : 서울지하철 9호선 3단계 923공구 건설공사

2. 작업 공종 및 구간

작업일	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
8월 13일(토)	본선터널 본선1구간	현장정비 방수 및 되메우기	권일순	조진우
	938정거장 본선2구간	구조물 철근조립 및 거푸집 설치 방수 및 되메우기 외부출입구#1,2 기초방수 및 구조물 철근조립 정거장 복구#1단계 가시설 및 되메우기 구조물 철근조립 및 거푸집 설치 방수 및 되메우기
8월 14일(일)	본선터널 본선1구간 938정거장 본선2구간	작업 없음 -. 현장휴무에 따른 관리내용 가시설, 구조물 등 이상 유무 확인 양수기 작동상태 확인 전기시설 이상유무 확인 화재예방 순찰 작업장 폐쇄 이상유무 확인 공사구간 시민불편사항 확인 야간 교통시설물 이상유무 확인 현장민원 해결 등	-	양대경
8월 15일(월)	본선터널 본선1구간 938정거장 본선2구간	작업 없음 -. 현장휴무에 따른 관리내용 가시설, 구조물 등 이상 유무 확인 양수기 작동상태 확인 전기시설 이상유무 확인 화재예방 순찰 작업장 폐쇄 이상유무 확인 공사구간 시민불편사항 확인 야간 교통시설물 이상유무 확인 현장민원 해결 등	-	신상엽

3. 휴일작업 근무자 명단

2016.8.13.(토)				2016.8.14.(일)
구 분	직 무	성 명	비 고	구 분	직 무	성 명	비 고
감리단	감리원	권일순		감리단	감리원	-
시공사	공 사	조진우		시공사	휴일 당직자	양대경
	공 무	박준철
	안 전	원효섭
	품 질	김종우
2016.8.15.(월)
구 분	직 무	성 명	비 고
감리단	감리원	-
시공사	휴일 당직자	신상엽

□ 장비현황

구 분	장 비	규 격	등록번호	비 고
본선터널	-
본선1구간	카고크레인	15T	서울08바7735	이지호
	굴삭기	06	경기02파6108	정정환
	바브캣	-	서울03나6318	이동규
	진동롤러	10T	서울09가5235	윤선남
938정거장	카고크레인	18T	서울87아4944	박희조
	굴삭기	06	서울02하6491	박우승
	굴삭기	015	서울02거5442	박인수
	굴삭기	02	서울02파8158	박신영

□ 휴일 작업사유

- 구조물 공사의 연속성 확보 및 예정 공정 추진

□ 작업 시간

- 07:00~18:00 (주간)

□ 기타

- 휴일감리대가는 시공사 지급예정임.

작성자 : 현장대리인   최 승 욱   (인)

확인자 : 책임감리원   권 일 순   (인)

□ 감리원 휴일근무 (2016년 7월) 실적

○ 근무현황

구 분	성 명	등 급	공휴일	토요일	일요일	계	비 고
책임감리원	권일순	수석감리사	-	2	-	2
보조감리원	황자연	감리사	-	1	1	2
보조감리원	김창섭	감리사보	-	1	1	2
계	-	-	0	-	-	6

○ 휴일작업 내용

일자	작업시간	공사구간	작업내용	근무자		비 고
				감리단	시공사
2016. 07.02 (토)	07:00 ~ 18:00	본선 터널 본선1구간 938정거장 본선2구간	- 현장정비 - 방수 및 되메우기 - 구조물공, 토공 및 가시설, 방수 및 되메우기 - 구조물공	권일순	전수영 차장 외8명
2016. 07.09 (토)	07:00 ~ 18:00	본선 터널 본선1구간 938정거장 본선2구간	- 현장정비 - 방수 및 되메우기 - 구조물공, 가시설, 방수 및 되메우기 - 구조물공, 방수 및 되메우기	김창섭	전수영 차장 외8명
2016. 07.10 (일)	07:00 ~ 18:00	본선 터널 본선1구간 938정거장 본선2구간	- 현장정비 - 현장정비 - 구조물공, 토공 및 가시설, 방수 및 되메우기 - 구조물공, 주형보 해체, 노상성토	김창섭	박준철 부장 외9명
2016. 07.16 (토)	07:00 ~ 18:00	본선 터널 본선1구간 938정거장 본선2구간	- 현장정비 - 방수 및 되메우기 - 구조물공, 토공 및 가시설, 방수 및 되메우기 - 구조물공, 노상 성토, 보조기층 포설	권일순	전수영 차장 외9명
2016. 07.23 (토)	07:00 ~ 18:00	본선 터널 본선1구간 938정거장 본선2구간	- 현장정비 - 방수 및 되메우기 - 구조물공, 가시설, 방수 및 되메우기 - 구조물공, 방수 및 되메우기	황자연	박준철 부장 외9명
2016. 07.24 (일)	07:00 ~ 18:00	본선 터널 본선1구간 938정거장 본선2구간	- 현장정비 - 방수 및 되메우기 - 구조물공, 가시설, 방수 및 되메우기 - 구조물공, 방수 및 되메우기	황자연	전수영 차장 외9명