“창조하는 기술인․생각하는 지식인․화합하는 동명인”

수신자  서울시 도시기반시설본부장

(참조), 도시철도토목부장

제  목  휴일작업계획 승인요청(2017년 12월 2일~3일)

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 대림서지923(공) 제17-359호(2017.11.29)와 관련입니다.

3. 서울지하철 9호선 3단계 923공구 건설공사와 관련하여 시공사로부터 구조물 공사의 연속성 확보 및 예정공정 추진을 위해 2017년 12월 2일~3일 휴일작업계획 승인요청이 있어 검토한 결과 적정하여 붙임과 같이 보고하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

붙    임 : 1. 감리 검토의견서 1부.

2. 2017년 12월 2일~3일 휴일작업계획서 1부.

3. 휴일근무 실적 1부.

4. 시공사 공문 사본 1부.  끝.

(주)동명기술공단종합건축사사무소

서울지하철 9호선 3단계 923공구 건설공사 전면책임감리

책임감리원  권 일 순(인)

수신처 :

담당 : 이사 김창섭                        책임감리원 : 권일순

협조 :

시행 : 동명감923 제2017-312호 (2017.11.29)                     접수 :         -          (20     .      .    )

주소 : (05359) 서울시 강동구 천호대로 1244(둔촌동 600) 2층  /  http://www.dmec.co.kr

전화 : 02-473-1923(토목), 02-470-7327(상부분야)  /  전송(FAX) 02-474-1923   /  92309@hanmail.net

감 리  검 토 의 견 서

공 사 명

서울지하철 9호선 3단계 923공구 건설공사

제    목

휴일작업계획 검토(2017년 12월 2일~3일)

1. 검토목적

◦ 서울지하철 9호선 3단계 923공구 건설공사와 관련 구조물 공사의 연속성 확보 및 예정 공정 추진을 위해 시공사로부터 휴일작업계획 승인 요청이 있어 적정성을 검토하여 공정관리와 안전관리에 만전을 기하고자 함.

2. 관련근거

가. 입찰안내서 공사계약 일반조건Ⅴ.6휴일 및 야간작업

→ 계약담당자의 승인없이 휴일 및 야간작업을 할 수 없다.

나. 일괄입찰 등의 공사계약 특수조건 제19조(야간 및 휴일작업)

→ 휴일 및 야간 작업시는 공사감독관의 감독하에 공사를 시행하여야 한다.

→ 공사감독관의 추가비용은 계약상대자의 부담으로 한다.

다. 감리과업지시서 6.2.3 휴일 및 야간작업 근무요령

3. 휴일작업 사유

- 구조물 공사의 연속성 확보 및 예정 공정 추진

4. 휴일 감리근무자

근무일자	근무자	근무시간
`17.12.02(토)	김창섭(보조감리원)	09:00~18:00
`17.12.03(일)	권일순(책임감리원)

5. 검토의견

가. 구조물 공사의 연속성 확보 및 예정 공정 추진을 고려하여 휴일작업계획은 적정하다고 판단되며,

나. 휴일작업 시행에 따른 공사관리의 공백이 발생되지 않도록 적정인원을 배치하여 공사관리

다. 감리원 휴일근무는 해당등급 인원이 제한적이므로 감리원이 순번제로 근무실시

라. 휴일작업으로 인하여 발생되는 감리비에 대한 시공사 의견

- 휴일감리대가는 시공사 지급예정임

검 토 자

2017. 11. 29.  소속 : 923공구  직위 : 보조감리원  성명 : 김 창 섭  (인)

확 인 자

2017. 11. 29.  소속 : 923공구  직위 : 책임감리원  성명 : 권 일 순  (인)

휴 일 작 업 계 획

(`17. 12. 2 ~ `17.12. 3)

1. 사업명 : 서울지하철 9호선 3단계 923공구 건설공사

2. 작업 공종 및 구간

작업일	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
12월 2일(토)	본선터널	현장정비	김창섭	전수영
	본선1구간	가시설 해체 및 되메우기
	938정거장	방수 및 되메우기
		구조물 철근조립 및 거푸집 설치
	본선2구간	방수 및 되메우기
		구조물 철근조립 및 거푸집 설치
12월 3일(일)	본선터널	현장정비	권일순	최승욱
	본선1구간	가시설 해체 및 되메우기
	938정거장	방수 및 되메우기
		구조물 철근조립 및 거푸집 설치
	본선2구간	방수 및 되메우기
		구순물 철근조립 및 거푸집 설치

3. 휴일작업 근무자 명단

2017. 12. 2.(토)		2017. 12. 3.(일)
구 분	성 명	구 분	성 명
감리단	김창섭	감리단	권일순
시공사	이영재 소장 , 전수영 차장 최문규 차장 , 김종우 과장 원효섭 과장 , 신상엽 대리 총원 6명	시공사	최승욱 부장 , 박치용 부장 박찬진 부장 , 양대경 대리 정재환 대리 , 박진우 대리 신순자 대리 총원 7명
한준건설	유상열 소장 , 김상준 차장 김대운 과장 총원 3명	한준건설	최승준 차장 , 이효재 과장 이종우 과장 총원 3명

□ 장비현황

구 분	장 비	규 격	등록번호	비 고
본선터널	-
본선1구간	-
938정거장	카고크레인	25T	인천80사3253	성준호
	굴삭기	06	경기02거6068	박찬규
	굴삭기	03	경기02거6701	임계철
본선2구간	카고크레인	25T	경기80바7490	최종복

□ 휴일 작업사유

- 구조물 공사의 연속성 확보 및 예정 공정 추진

□ 작업 시간

- 07:00~18:00 (주간)

□ 기타

- 휴일감리대가는 시공사 지급예정임

작성자 : 현장대리인   최 승 욱   (인)

확인자 : 책임감리원   권 일 순   (인)

□ 감리원 휴일근무 (2017년 11월) 실적

○ 근무현황

구 분	성 명	등 급	공휴일	토요일	일요일	계	비 고
책임감리원	권일순	수석감리사	-	1	1	2
보조감리원	김창섭	감리사보	-	3	1	4
계	-	-	0	4	2	6

○ 휴일작업 내용

일자	작업시간	공사구간	작업내용	근무자		비 고
				감리단	시공사
2017. 11.04 (토)	07:00 ~ 18:00	본선 터널 본선1구간 938정거장 본선2구간	- 현장정비 - 현장정비 - 구조물공, 방수 및 되메우기 - 구조물공, 방수 및 되메우기	김창섭	최승욱 부장 외 6명
2017. 11.05 (일)	07:00 ~ 18:00	본선 터널 본선1구간 938정거장 본선2구간	- 현장정비 - 현장정비 - 구조물공, 방수 및 되메우기 - 구조물공, 방수 및 되메우기	김창섭	박찬진 부장 외 5명
2017. 11.11 (토)	07:00 ~ 18:00	본선 터널 본선1구간 938정거장 본선2구간	- 현장정비 - 현장정비 - 구조물공, 방수 및 되메우기 - 구조물공, 방수 및 되메우기	김창섭	최승욱 부장 외 7명
2017. 11.18 (토)	07:00 ~ 18:00	본선 터널 본선1구간 938정거장 본선2구간	- 현장정비 - 현장정비 - 구조물공, 방수 및 되메우기 - 구조물공, 방수 및 되메우기	김창섭	최승욱 부장 외 7명

일자	작업시간	공사구간	작업내용	근무자		비 고
				감리단	시공사
2017. 11.19 (일)	07:00 ~ 18:00	본선 터널 본선1구간 938정거장 본선2구간	- 현장정비 - 현장정비 - 구조물공, 방수 및 되메우기 - 구조물공, 방수 및 되메우기	권일순	박찬진 부장 외 5명
2017. 11.25 (토)	07:00 ~ 18:00	본선 터널 본선1구간 938정거장 본선2구간	- 현장정비 - 현장정비 - 구조물공, 방수 및 되메우기 - 구조물공, 방수 및 되메우기	권일순	전수영 차장 외 7명