문서번호	시설과-538
결재일자	2017.1.31.
공개여부	비공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관	시설과장	관리부장	서울대공원장
협 조
	총무과장
	전략기획실장
	주무관
	주무관
	주무관

동물 사육관리실 근무환경 개선공사 시행계획

2017. 1.

서울대공원

(시 설 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

동물사육관리실 근무환경 개선공사 시행계획

동물원 내 사육관리사무실이 노후되어 직원들의 근무환경이 열악한 실정이므로 보수공사를 실시하여 쾌적한 근무환경 조성 및 직원 복지향상에 기여코자 함

1		추 진 근 거

□ 시장 지시사항(‘15. 2. 22) : 서울대공원 방문시 동물사육관리 시설의 열악한 근무환경 개선 지시

□ 동물복지2과-321호(‘16.01.19) 및 동물복지1과-241호(‘17.01.30)

2		‘16년 추진실적

□ 사 업 명 : 서울대공원 동물사육관리실 근무환경 개선공사

□ 공사기간 : ‘16. 6. 7 ~ ‘16. 8. 5.

□ 소요예산 : 200백만원

□ 세부사항(동물사 6개소)

동물사명	주요공사 내용	비 고
제3AF관	· 사무실 확장 · 화장실 신설 · 바닥 및 천정 마감재 교체 · 전기, 기계 및 통신공사 등
낙타사	· 사무실 확장 · 탈의실 및 샤워실 설치 · 바닥 및 천정 마감재 교체 · 전기, 기계 및 통신공사 등
곰사	· 사무실 확장 · 외부 출입문 신설 및 교체 · 탈의실, 샤워실 및 화장실 신설 · 전기, 기계 및 통신공사 등

동물사명	주요공사 내용	비 고
남미관	· 사무실 확장 · 탈의실 및 샤워실 설치 · 화장실 리모델링 · 조리실 바닥 타일설치 · 노후 창문 교체 · 전기, 기계 및 통신공사 등
열대조류관	· 사무실 확장 · 여자샤워실 설치 · 사무실 바닥 및 천정 마감재 교체 · 남자 탈의실 설치 · 전기, 기계 및 통신공사 등
사슴사	· 탈의실 설치 · 노후 외부창호 교체 · 사무실 및 창고 도장공사 · 사무실내 노후 출입문 교체 · 전기, 기계 및 통신공사 등

3		‘17년 추진계획

□ 사 업 명 : 서울대공원 동물사육관리실 근무환경 개선공사

□ 사업기간 : 2017. 3. ~ 2017. 7.

□ 사업금액 : 100백만원

4		공 사 계 획

□ 대상시설물 : 6개소(큰물새장 외 5개소)

관리부서	동물사명	시설 개선내역		우선순위
동물복지1 과	큰물새장	○ 사무실 - 사무실 확장 및 탈의실 - 천정재 철거 및 설치 - 샤워실, 화장실 설치 - 창호 3개소 신설 - 출입문 2개소 신설 - 내부 벽체도장 및 보강 - 옥상방수 및 미장공사	○ 창고 - 지붕재 철거 및 교체 - 지붕 트러스 교체 - 창고바닥 미장 - 내외부 벽체 도장 - 창문 2개소 신설 - 출입문 2개소 교체 - 벽체 보강공사	1

관리부서	동물사	시설 개선내역	우선순위
동물복지2 과	제1AF관	○ 사료창고와 외부계단사이 스테인레스 문 교체 ○ 사료창고와 건초창고 사이 조적벽 신설 및 문 설치 ○ 사료창고 천정설치 ○ 도장공사(사료창고 벽, 사무실 천정․벽, 통로 천정․벽) ○ 스틸문 도색	2
	곤충관	○ 곤충관내 사워실 (현재 사무실를 사워실,탈의실-사무실은 곤충교실로 이동) - 탈의실 천정 단열재 - 탈의실 바닥재 추가 - 냉온풍기 이동설치 - 내부 벽체 보강 - 탈의실 출입통로 문설치 - 사워실 설치(환기구 추가 설치) ○ 조리실보수 - 벽체설치 및 바닥보수, 지붕추가 공사 - 배수로 및 수도 보수 ○ 사무실 (곤충교실에 이동)-거점사무실 - 곤충교실 벽체 보수, 바닥교실 교체, 전등교체 - 출입문 교체	3
	대동물관	○ 사무실 출입문 및 창문 교체 ○ 연결통로 비 가림막 설치 ○ 샤워실 출입통로 문 설치 ○ 탈의실 환기시설 설치	4
	동양관	○ 직원화장실 리모델링 ○ 샤워실 꼭지 보수	5
	제2AF관	○ 방풍실 설치 ○ 사무실과 통로사이 벽체 일부 철거 ○ 사무실과 하마사 문 폐쇄후 조적마감 ○ 건초창고 창호 2개소 신설 ○ 하마사 직원 안전난간 설치	6

※ 공사예산 부족시 공사우선 순위에 따라 시행

5		예산 및 계약방법

□ 소요예산 : 100백만원

□ 공사공종 : 건축·전기·기계·통신공사(각 공사별 별도발주)

□ 예산과목

공원 이용시민 만족도 향상, 산림내 이용시설 및 조경관리 강화, 공원        시설물 유지보수 및 정비, 시설비(100-401-01)

※ 예산 부족시 집행잔액(낙찰차액) 또는 시설물 유지보수(연간단가)예산 사용

□ 계약방법

○ 공사 공종별로 공개경쟁입찰(지역제한) 또는 소액 수의계약

6		향 후 계 획

□ 추진일정

○ ‘17. 3  : 설계

○ ‘17. 4  : 계약 및 착공

○ ‘17. 7  : 준공

□ 행정사항

○ 시설물 관리부서와 공사시행 시기에 대해 사전 조율 후 실시

붙임 : 동물복지과 협조 공문 1부. 끝.