동부간선도로(녹천교~의정부시계) 확장

□ 목    적

○ 4→6차로로 확장하여 병목으로 인한 상습정체를 해소하고, 서울 동북부지역 교통여건 개선

□ 사업개요

○   위    치 : 동부간선도로 녹천교 ~ 의정부시계

○   규    모 : 도로확장 폭 4 → 6~7차로, 연장 5.45km

○   사업기간 : 2007. ~ 2017.

○   총사업비 : 3,850억 원(서울시 2,698억 원, 의정부시 1,152억 원)

- 재원분담내역 : 지방비 2,000, 국비 1,200, LH교통개선분담금 650억 원

□ 추진현황

○ '96.06.~'97.06. : 타당성조사 및 기본계획

○ '99.12.~'04.02. : 기본설계

○ '04.04.21.	: 광역도로 지정(녹천교~의정부시계)

○ '04.09.~'07.08. : 기본 및 실시설계 시행

○ '08.02.~'08.12. : 공사계약

○ '16.12.: 도봉지하차도 보완 설계완료

○ '15.5월 현재	:  총사업비 변경 및 공사중(공정률 46%)

□ 투자실적 및 계획(광역도로 구간)

(단위: 억 원)

구 분	총사업비	‘16년 까지	2017	장래
합 계	3,850	3,493	269	88
국 비	1,200	1,100	100	-
지방비	2,000	1,813	99	88
LH 교통개선분담금	650	580	70	-

※ 당초 사업계획에 따라 ‘17년 국비 투입(100%) 지방비(96%)가 기 투입되어 ‘17년 LH 공사 교통개선분담금 납부 필요

□ 향후계획

○ '17. 06. : 사업계획 변경에 따른 사업기간 연장 및 총사업비 조정

○ '19. 12. : 동부간선도로 확장구간 개통

○ '20. 12. : 최종 공사 완료(차로수 조정 등 잔여 공정)