동부간선도로 지하화 민간투자사업

□ 사업개요(제안서 기준)

○ 사업위치 : 강남구 청담동(경기고앞)~성북구 석관동(월릉교)

○ 사업규모 : 양방향 4차로, 연장 10.1km(소형차전용도로)

- 유출입시설 : 4개소(삼성, 청담, 군자, 월릉), 영업소 : 2개소(성수, 군자)

○ 사업기간 : 2019.12. ~ 2028.(운영 30년)

○ 총사업비 : 926,118백만원(시비 291,932백만원, 민간 634,186백만원)

- 총투자비 : 1,187,627백만원(시비 351,314백만원, 민간 836,313백만원)

※ 건설사업관리비(설계) : 2,193백만원(’15.4.30 불변가 기준)

○ 통행요금 : 2,500원(성수 1,600, 군자 900원) ※ 교통량 67,065대/일

○ 사업시행자 : (가칭)동서울지하도로주식회사(대우건설 등 12개사)

□ 추진경위

○ '19.11.27	: 서울시 재정계획심의위원회 심의

○ '19.12.10	: 기획재정부 민간투자사업심의위원회 심의

○ '19.12.20	: 시의회 동의

○ '19.12.26	: 제3자 제안공고 (서공고 제2019-3021호)

○ '20.03.24	: 평가 및 실시협약 업무 위탁협약 체결 (서울시↔KOTI)

○ '20.07.31	: 우선협상대상자 선정(대우건설 컨소시엄)

○ '20.09.09	: 실시협약 협상 착수(한국교통연구원)

○ '21.03.	: 기본 설계VE 완료(한국도로공사)

○ '22.02.	: 실무협상 시행

□ 향후 추진 일정

○ '22.02.	: 협상 완료 및 피맥 검토(30일), 실시설계 시행

○ '22.03.	: 서울공투 및 법률지원담당관 사전 심사(30일)

○ '22.04.	: 실시협약(안) 예고(20일 이상)

○ '22.04.~05.	: 市 재정계획심의/ 기재부 민간투자심의

○ '22.06.	: 시의회 보고 및 실시협약 체결

○ '22.12.	: 실시계획 승인신청

○ '23.하	: 공사착공

< 위 치 도 >

위 치 도