문서번호	체육정책과-1990
결재일자	2015.8.25.
공개여부	비공개
방침번호

				시 민
주무관	체육정책팀장	체육정책과장		관광체육국장
협 조
	동북4구사업추진반장
	체육진흥과장

동북권체육공원내 체육시설 조성 기본계획 변경

2015. 8.

관광체육국

(체육정책과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	도봉구청 관계부서와 사전 협의
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

동북권 체육공원 내 체육시설 조성 기본계획 변경

동북4구사업단의「창동운동장 체육시설물 이전계획(안)」에 따른 도봉동 동북권 체육공원 내 체육시설 이전 설치안을 반영해「동북권역 체육시설 조성 기본 계획」을 변경하고자 함

□ 그간의 추진 경과

○ ’14.12.31. 동북권역 체육시설 조성 기본계획 수립

- 동북권 체육공원 내에 대운동장과 다목적운동장 등 조성

○ ’15.  3.10. 창동운동장 대체 체육시설 이전 건의(도봉구 ➡ 서울시)

- 창동운동장 내 체육시설(실내배드민턴장 및 실내 테니스장)이전을 위한 사업계획 변경 및 예산 추가확보 요청

○ ’15.3.~6.  창동운동장 이전 실무 검토회의 실시

- 창동체육시설 이전 종합계획 수립 후 동북권 체육시설 조성키로 협의

○ ’15.7.17.  창동운동장 체육시설 이전계획 수립(동북4구사업단)

- 창동 체육시설 단계별 이전 : 단계별 추진(1, 2단계)

‣체육정책과 : 동북권 체육시설 조성 기본계획, 공원조성계획 변경 및 실외테니스장 설치 부족사업비 ‘16년도 추가확보

‣하천관리과/도봉구 안전치수과 : 빗물펌프장설치 부족사업비 ‘16년 확보/공사시행

○ ’15.8.18. 창동·상계 신경제중심지조성 추진사항 시장 보고(동북4구사업단)

및 동북권 체육시설 조성계획 변경관련 업무협의

- 서울아레나 조기추진을 위해, ’17년까지 체육시설 이전 필요(1·2단계 병행추진)

‣동북4구사업단 : 향후 추가소요 예산반영 및 투자심사 절차 진행

‣체육정책과	: 체육시설 조성 변경 방침 수립 및 ‘15년 예산(24억원) 도봉구 재배정

‣도봉구        : 체육공원 조성 설계용역 및 시설조성공사, 침수저감시설 설치  설계용역 및 공사, 공원조성계획변경 등

□ 체육시설 조성 변경 계획

□ 당초 조성계획

○ 사업개요

- 위    치 : 도봉구 도봉동 8번지 일대(창포원 인근)

- 면    적 : 33,819㎡(체육공원:25,091㎡,대전차방호시설:8,728㎡)

- 도시계획 : 자연녹지, 개발제한구역, 체육공원(미조성)

- 조성시설 : 대운동장 1면, 다목적 운동장 1면, 주차장‧관리실 등

□ 변경 조성계획(안)

○「창동 운동장 체육시설 이전 계획(안)」반영, 동북권 체육공원의 기 확보 부지 내에 축구장, 테니스장, 게이트볼장 및 기타 부대시설 조성

○ 변경 내용

당 초	➡	변경 (안)
① ② ③		② ① ③ 1단계 2단계 ② ④ ⑤
① 대운동장 1면 ② 다목적운동장 1면 ③ 주차장‧관리실 등 부대시설		① 축구장 1면 ② 테니스장 6면(실외) / 3면(실내) ③ 게이트볼장 2면(실내) ④ 부대시설(관리실) 등

○ 소요예산 (단위 :백만원)
구 분			‘15년	’16년	비 고
계			2,400	5,310
공사비	실외	축구장(1면), 부대시설, 공원조성	980		다목적운동장 제외
		테니스장 (6면)	-	720	야외 케미컬코트 조성비
	실내	테니스장(3면)	-	4,490
		게이트볼장(2면)	-	100
	기타	빗물펌프장 조성 관련	1,000		1단계 지역 배수로 공사
		공원조성계획 변경, 설계 등 기타	420

※ ’15년도 예산(24억원) 외 추가 사업비는 동북4구사업단에서 확보 추진

□ 체육시설 조성 예산 재배정 계획

□ 예산 현황

○ 예산과목 : 체육진흥과, 시민체육 및 국제스포츠 진흥발전, 시민체육공간 확충, 생활체육시설 확충, 시설비(401-01), 동북권역 생활체육시설 확충

○ 예산현액 : 24억원(※’14년 명시이월: 21억원, ’15년 편성: 3억원)

○ 재배정액 : 24억원

□ 예산 재배정

○ 예산배정 요청 : 체육정책과 → 예산담당관

○ 재배정 시행 : 체육정책과(체육진흥과) → 도봉구 공원녹지과

※ 생활체육시설 확충 시설비 편성 예산으로 체육진흥과 협조

○ 부서별 재배정 계획

(단위 :백만원)
부서	재배정액	내용
도봉구 공원녹지과	2,400	- 기본‧실시설계, 공원조성계획변경 용역 및 공사 시행 - 배수관로 공사 관련 용역 및 공사 시행 ※ 동북권체육공원 조성 총괄부서

□  향후 일정

○ ’15.08. ~ 동북권체육공원(체육시설) 조성의뢰 및 예산 재배정(시→도봉구)

○ ’15.09. ~ 공원조성계획, 기본‧실시설계 등 용역 발주

○ ’15.11. ~ 도시공원위원회 심의 등 공원조성계획 변경

○ ’15.12. ~ 공사발주.  끝.