1		동북권 창업지원센터 건립 추진현황

< 일자리노동국 창업지원과 >

□ 사업개요

○ 목   적 : ‘창동․상계 신경제중심지 조성’을 위한 마중물 사업으로, 동북권 창업지원센터 건립을 통해 사업 추진 조기 가시화 및 일자리 창출 기반 마련

동북권 창업센터

서울아레나

○ 위   치 : 도봉구 창동 1-8 (청소차량 차고지)

○ 규   모 : 연면적 8,100㎡(부지 7,663㎡ 중 일부)

○ 총사업비 : 22,025백만원(국비 11,000백만원 포함)

※ 타당성용역 89백만원(’15), 설계공모비 100백만원(’16),

실시설계비 909백만원(’16. 100백만원, ’17. 809백만원), 시설비 20,927백만원(’17)

□ 추진실적

○ ｢동북권 창업지원센터｣ 조성을 위한 타당성조사 용역 추진 중

- 기  간 : 계약일로부터 4개월간(소요예산 : 89백만원)

- 내  용 : 대상지 사업 여건 조사 및 종합적 환경 분석(입지여건, 수요 등)

경제성․재무성․정책성 분석을 통한 사업 적정성 평가(운영효과 산출 등)

- 추진내용

□ 기술심의 의뢰(기술심사담당관, 적정) : ’15. 10. 12.(월)

□ 입찰 공고(협상에 의한 계약) : ’15. 10. 29.(목) ~ 12. 1.(화)

※ ’15. 11. 18. 유찰되어 11. 20. 재공고 실시

□ 향후 추진일정

○ 타당성조사 용역 추진 ..............................  ’15.12 ~ ’16. 4.

○ 기본계획 수립 ....................................... ’16. 4 ~ ’16. 5.

○ 설계공모 및 실시설계 ............................... ’16. 6 ~ ’16. 12.

○ 건축공사 발주․완공 ................................. ’17. 1 ~ ’18. 6.