“국민과 함께하는 시설안전 글로벌 리더”
		한국시설안전공단
수신	남부도로사업소장
(경유)
제목	동작대교(도로교,철도교)정밀안전진단 준공기한 연기 요청

1. 귀 시(소)의 무궁한 발전을 기원 합니다.

2. 귀 시(소)와 2013. 9. 30 계약체결하여 수행중인 “동작대교(도로교, 철도교) 정밀안전진단”과 관련하여 아래와 같이 준공기한을 연기 요청 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

- 아   래 -

가. 용역건명 : 동작대교(도로교,철도교) 정밀안전진단 용역

나. 용역기간

- 당초(1차 및 2차분) : 2013. 10. 04. ∼ 2014. 7. 30.

- 변경(1차 및 2차분) : 2013. 10. 04. ∼ 2014. 9. 28. (60일 연장)

다. 계약금액 : 변경없음

라. 연기사유 : 동작대교(도로교, 철도교)통합발주와 관련하여 추가 과업 지시 및 조사 요청에 따른 추가 장비 투입으로 인한 현장조사 기간 연장 필요

붙임 : 1. 동작대교 추가 과업지시 공문 사본 1부

2. 동작철교 추가 조사요청 공문 사본 1부.

3. 동작대교 추가 과업수행 계획서 공문사본 및 계획서 1부.

4. 동작철교 추가 조사 요청에 대한 회신 공문 사본 및 계획서 1부.  끝.

							한국시설안전공단이사장
차장										차장										일반도로실장									시설안전본부장
협조자
시행			시설안전본부-51									(	2014.07.28.					)		접수			교량보수과-2214								(	2014.7.29.					)
우	411-758					경기 고양시 일산서구 대화동 2311															/			http://www.kistec.or.kr
전화		031-910-4238						/전송			031-910-4184					/	/sroot@kistec.or.kr												/	공개