문서번호	교통운영과-14384
결재일자	2018.8.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
전문관	BRT팀장		교통운영과장		보행친화기획관		도시교통본부장
협 조	버스정책과장
	교통정보과장
	교통지도과장
	교통운영팀장
	주무관
	주무관
	주무관

동작대로 연장 중앙버스 전용차로 개통 계획

2018. 8

도시교통본부

교통운영과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

동작대로 연장 중앙버스 전용차로 개통 계획

동작대로 연장 중앙버스 전용차로 단절 구간 중, 방배경찰서~과천대로 서울시계 공사가 9월중 완료 예정에 있어 유관기관 사전점검 등을 통해 개통에 차질이 없도록 만전을 기하고자 함.

1		사업현황

□ 사업 개요

○ 사 업 명 : 동작대로 연장 중앙버스 전용차로 설치

○ 사업구간 : 방배경찰서~시계

○ 사업규모 : 중앙버스전용차로 2.8km, 중앙정류소 4개소 (도심2, 외곽2)

○ 기    간 : ’17.10.~’18. 9.

○ 사 업 비 : 80억원

□ 추진 경위

○ ’16. 5.17.  : 사업계획 수립 (행정1부시장 방침)

○ ’16.12.09.  : 기본 및 실시설계 용역 착수

○ ’17.6. ~ 7. : 주민설명회 (관악구 6.26, 서초구 7.17)

○ ’17.08.31.  : 교통안전시설 심의 가결

○ ’17.12.31.  : 기본 및 실시설계 용역 착수

○ ’18.3. ~ 9. : 중앙버스전용차로 공사시행

2		개통 준비계획

□ 개 통 일 : ’18.9. 7.(금) 04:00

□ 주요 준비사항 및 일정

준 비 사 항			일 정	추진부서
· 개통계획 수립			’18.8.23(목)	교통운영과
· 중앙차로 버스운행계획 수립 (정류소 ID 및 명칭 부여, 운행명령)			’18.8.24.(금)	버스정책과
· 관계기관 사전 합동점검 (사전 버스 시범운행)			’18.8.29(수)	교통운영과 도시기반시설본부 등
· 대시민 홍보	안내간판 설치		’18.8.31(금)	도시기반시설본부
	보도자료 배포, 홈페이지 등		’18.9.4(화)	교통운영과
· 중앙버스전용차로 신설 고시 (시보게재)			’18.9.6(목)	교통운영과
· 운수종사자 및 모범운전자 교육		운수종사자	’18.8.31(금)	교통운영과, 버스정책과
		모범운전자	‘18.9.3(월)
· 현장비상근무		교통운영과	’18.9.7(금)~9.14(금)	교통운영과
		모범운전자	’18.9.7(금)~9.21(금)
· 모니터링			’18.9.7(금)~ 개통후 2월	교통운영과 / 용역사

3		준비사항 세부시행 계획

대시민 홍보

○ 보도자료 배포, 인터넷 및 SNS, VMS홍보 : ’18. 9.4(화) ~

○ 홍보용 안내간판 설치(도시기반시설본부) : ’18. 8.31(금)

- 설치수량 : 총 266개소

연번	구 분	수 량	규 격	비 고
총 계		266
1	중앙정류소 운행노선 안내	14	1.2×2.4m
2	가로변 정류소 폐지 및 운행노선 안내	20	0.9×1.8m
3	유턴 폐지에 따른 우회도로 안내	2	1.2×2.4m
4	개통 홍보(대형 입간판)	20	1.2×2.4m
5	개통 홍보(가로배너)	200	1.0×0.4m
6	무단횡단금지 안내	10	0.9×1.0m

관계기관 합동점검

○ 동작대로 연장구간 버스전용차로 개통 관계기관 합동점검

- 일    시 : ’18.8.29(수) 10:00 ~ 12:00 (120‘)

- 관계기관

□ 서울시 교통운영과, 버스정책과, 교통정보과, 도시기반시설본부

□ 서울지방경찰청(교통관리과, 신호운영실), 방배경찰서

- 점검내용 : 버스전용차로 개통에 따른 차선, 표지 등 교통안전시설, 승강장, 노선도 등 버스안내표지, 기타 시민홍보 안내문 등 전반

개통구간 사전 버스 시범운행

○ 동작대로 연장구간 버스전용차로 개통에 대비하여 버스를 시범운행

- 구    간 : 방배경찰서 ~ 서울시 시계, 전용차로 2.8km

- 일    시 : ’18.8.29(수) 10:00 ~10:30 (30‘)

- 참 석 자 : 보행친화기획관, 버스정책과장, 교통운영과장, BRT팀장,

서울지방경찰청, 방배경찰서 등 관계자

- 협    조 : 우신운수

- 운행계획 : 중앙버스 전용차로 5.6km (왕복)

구 분	거 리	소요시간	운 행 경 로
시계방향	2.8㎞	10분	방배경찰서→사당역(외각방면)→사당자동차학원
도심방향	2.8㎞	10분	남태령역(도심방면)→사당역(도심방면)→방배경찰서

- 협조사항 : 시공사

□ 중앙차로내 작업차량 등 버스운행 장애요인 사전 조치

□ 버스 통과후 일반차량이 진입하지 못하도록 즉시 도로통제

운수회사 관련자 교육

○ 1차 교육 : 시 → 운수회사 노선 담당자 교육 시행

- 대 상 자 : 운수업체별 노선 담당자(35명)

- 일    시 : ’18.8.31(금) 15:00

- 교육주관 : 교통운영과

- 교육내용 : 교통체계 변경사항, 중앙버스전용차로 운행요령 및 안전운행 준수사항 등

○ 2차 교육 : 운수회사별 자체교육 시행

- 대 상 자 : 운행노선 버스 운전기사

- 일    시 : ’18.8.31(금)~9.3(월)

- 교육주관 : 버스운수 업체별 시행(1차 교육 받은 노선담당자 전파 교육)

- 교육내용 : 1차 교육내용 전파 교육시행

모범운전자 교육 및 배치

○ 근무장소 및 근무요령 교육 : ’18.9.3(월)

○ 교육대상자 : 모범운전자

○ 배치계획

- 기 간 : ’18.9.7.(금)~9.21.(금), 15일간

- 인 원 : 모범운전자 41명/일(06시~22시, 20인×2교대, 관리자 1인 포함)

※ 인원 및 위치등은 경찰 협의를 통해 추후 확정

- 장 소 : 사당역 사거리 등 주요 교차로

현장 비상근무

○ 현장 상황에 대응 하기 위한 교통운영과 직원 비상근무 시행

- 기 간 : `18.9.7.(금)~9.14.(금), 8일간

- 상황반

· 인 원 : 3명(교통운영과장, BRT팀장, 담당자)

· 내 용 : 교통상황 관리 및 보고, 조치계획 수립 등

- 현장 대응반

· 인 원 : 14명(2인 1조, 주·야간 비상근무 시행) : 근무조 별첨

· 내 용 : 교통상황 점검 및 보고, 개선사항 발굴 등

4		행정사항

○ 불법주정차 단속 및 계도

- 방배경찰서~사당역사거리 불법주정차 행위 단속 및 계도

(협조부서 : 교통지도과, 동작구, 관악구, 서초구)

○ 중앙버스정류장 신설 및 교통체계 변경에 따른 노선도 및 지도 정보 수정

- 중앙정류소 유지관리업체, 네비게이션 및 포털 업체에 자료 제공

○ 현장근무에 따른 시간외수당 등 인정

- 초과근무자는 별도 사무실 테그 없이 초과근무 인정

- 수요일과 금요일 근무자에 최대 4시간까지 초과근무 인정

- 주말근무자의 경우 초과근무 4시간 인정 또는 8시간이상 근무시 대체휴무를 선택(‘18년 9월중 대체휴무 사용 가능)

붙임 : 1. 분야별 세부추진 일정 1부.

2. 부서(기관)별 협조사항 1부.  끝

분야별 세부 추진 일정 (동작대로)

붙임 1

주 요 내 용		완료일	주관부서	협조부서
정류소 이전에 따른 준비
	버스노선 확정 및 운행개선명령	8.24	버스정책과	교통운영과
	사전안내(버스내부 안내문 부착)	9.3	버스정책과 경기도	운수업체 버스운송조합
	버스 내부 노선도, 안내방송	9.3
	중앙정류소 정비(명칭 및 노선도 부착)	9.3	교통운영과	버스정책과
	가로변 정류소 이전 · 폐쇄	9.7	버스정책과	교통운영과
	BIT 입력내용 수정	9.6	교통정보과
	노선안내 홈페이지 수정	9.6	교통정보과
2. 대시민 홍보
	안내입간판 제작 및 설치	8.31	도시기반시설본부	교통운영과
	보도자료 배포	9.4	교통운영과
	인터넷 홍보(서울시 홈페이지)	9.4	정보기획담당관	교통운영과
	교통전광판(VMS)	9.4	교통정보과
3. 운수종사자 교육
	운수업체별 운행교육 담당자 교육	8.31	교통운영과	운수회사
	노선버스 운전기사 교육(내부교육)	8.31~	운수회사	교통운영과
4. 현장점검
	사전 합동점검(시,경찰,공단,사업소 등) 사전 버스 시범 운행	8.29	교통운영과	관계기관
5. 상황반 및 현장 대응반 운영
	근무인력 확보 및 연락망 구성	9.3	교통운영과
	상황반 및 현장 대응반 운영	9.7~ 9.14	교통운영과
6. 현장 교통관리
	모범운전자 교육	9.3	교통운영과
	모범운전자 교통관리원 운영	9.7~ 9.21	교통운영과
7. 불법 주정차 집중 단속		9.7~	교통지도과	관할구청

부서(기관)별 협조사항 (동작대로)

붙임 2

구분	담당부서(기관)	추 진 업 무
서울시	교통운영과	· 개통준비 관련업무, 관련부서(기관) 연락체계 구축 · 상황실 및 기동반, 현장모니터링 운영 · 민원사항 / 개선사항 접수 및 개선방안 도출
	버스정책과	· 중앙정류소 명칭 및 ID부여 등 관련업무 · 버스노선 조정 및 운행개선 명령 · 가로변 정류소 정비 등 관련업무
	교통정보과	· 교통전광판(VMS) 홍보 · BIT 설치 및 노선안내 홈페이지 수정
	도시기반시설본부	· 공사 및 현장관리, 홍보 입간판 설치 및 철거 · 민원사항 / 개선사항 검토 · 조치
	정보기획담당관	· 서울시홈페이지 홍보
	관할구청	· 민원사항 접수 및 개선사항 건의
서울 지방 경찰청	교통관리과	· 교통체계 변경 관련 협조 및 모니터링
	교통관리과 (신호운영실)	· 각 지점별 차량신호 / 보행신호 운영 등 협조
	관할경찰서	· 교통경찰 배치 등 교통안전 관련사항 협조
관련기관 및 민간업체	경기도	· 경기도 버스노선 조정 및 운행개선 명령 · 버스 내부 안내문 부착 · 버스 내부 노선도 및 안내방송 교체
	운수업체	· 운수업체별 운행요령 및 안전교육 시행 · 회사별 버스 운행실태 파악, 보고 등 개서사항 건의 · 개통 시 현장근무 및 대시민 홍보 지원
	버스운송조합	· 민원사항 접수 및 개선사항 건의 · 접수민원 전파(상황실 및 기동반) · 개통 시 교통지도원 배치 및 홍보 지원 · 개통 시 버스운행 감독 및 계도
	도로교통공단	· 각 지점별 차량신호 / 보행신호 운영 모니터링 등 협조
	전국모범운전자 연합회	· 정류소별 노선버스 및 횡단보도 안내, 우회도로 안내 · 교통운영체계 변경에 따른 홍보 및 운전자 계도 · 교통정리 및 무단횡단 방지 계도, 보행자 안전관리 등