보 고 서
			담당	팀장
				전결 12/23
문서번호	공사감독1처-14205
보존기간	5년		협 조	다급
결재일자	2014.12.23.			선임주임
공개여부	공개
제 목	동절기 공사중지 검토 보고

1		공사현황

가. 공 사 명 : 성내교 보수공사

나. 공사기간 : 2014. 10. 31 ~ 2014. 12. 31

다. 공 사 비 : 439,479,700원(도급비:332,604,700원, 관급비:107,145,000원)

라. 공사개요 : 받침교체 90개소, 표면보수 A=162㎡, 단면보수 A=126㎡

마. 도 급 자 : (주)선우씨앤드에이건설 대표 정우금

바. 발 주 청 : 동부사업소(시설보수과)

2		보고내용

상기 공사건에 대한 동절기 공사중지 검토보고 사항 임.

가. 현황 및 문제점

- 상기 공사 추진중 기온 급강하로(12월 평균 최저 기온 -7.5℃) 동절기 공사 품질확보에 어려움이 있음.

- 또한 기온 저하에 따른 작업원들의 정상적인 거동에 어려움이 따르는등 작업중 안전사고 발생 우려가 높음.

나. 검토의견

- 공정현황 : 2014년 12월 15일 현재(공정율 60%)

- 본 공사는 주 공종이 교좌받침 인상공으로 몰탈타설이 불가피한 사항이나, 12월 현재 서울지역 최저(평균)기온이 -7.5℃에 달하는등 공사추진에 어려움이 있음.

- 동절기 공사 시행지침 등 관련 규정에도 영상 4℃미만에는 한중콘크리트 로 시공토록 하고 있으며, 부득이한 경우가 아니면 동절기 물공사는 지향하도록 하고있는바, 본 공사도 공사의 품질확보 및 근로자의 안전을 위하여 동절기 공사를 중지함이 타당하다고 사료됨.

※ 성내교 보수공사 시방서

3		행정사항

상기 검토결과를 발주청에 제출하고 조치결과에 따라 처리코자 함..  끝.