함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	뚝도정수장 시운전 관련 단수작업 일정 변경 및 급수운영 협조요청

1. 고도정수반-4954호(2014.10.10.)와 관련입니다.

2. 『뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사』 2계열 여과지 시운전을 위한 단수작업 요청이 있어 이에 대한 급수운영 사항을 검토하고 아래와 같이 일정을 조정하고자 하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

◈ 뚝도정수센터 단수작업 요청

- 단수작업 요청사항

․요청사항 : 뚝도 총 2계열중 1계열 단수 요청(50만톤/일 ⇒ 25만톤/일)

․작업내용 : 2계열 신설여과지 유입수로 차단벽 제거작업

- 일정 변경 : 당초 10.13(월) 단수요청하였으나, 15(수) 이후로 변경

① 월요일은 평시대비 물 소비량이 증가하여 시민불편 우려

② 사전 시뮬레이션 시행으로 급수운영상 이상유무 검토 후 시행

◈ 뚝도 급수운영 시뮬레이션 시행

- 뚝도수계 관련 배수지 및 수계

구 분	지역배수지	1차배수지	직송수계(보광 수계)	비 고
배수지 및 급수구역	대현산 와우산 보광	만리, 능안 노고산 남산(대), 남산(소)	용산, 종로, 서대문구 고지대지역 약 45천세대

- 일   시 : 2014. 10.15(수) 11:00 ~ 17:00(6시간)

- 조치사항 : 사전 시뮬레이션 기간 중 생산량 감축 및 배수지 수위패턴 분석

․중부,서부,동부수도는 2014.10.15. 10:00까지 관련배수지 만수위 확보

․뚝도 직송수계는 공급량 부족으로 단수가 발생되지 않도록 급수운영

◈ 시뮬레이션 결과 이상 없을시 10.16(목) 11:00 ~ 17:00에 단수작업 시행(연결공사 추진중 작업시간 지연시 작업중단 및 원상복구)

※ 뚝도정수, 중부, 서부, 동부수도 기전팀장 이하 제어실 근무자 관련내용 숙지 요청

따로붙임 : 뚝도 시운전 관련 단수작업 요청 공문(고도정수반) 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	생산관리과장,급수운영과장,고도정수반장,중부수도사업소장,서부수도사업소장,동부수도사업소장,뚝도아리수정수센터소장
주무관			배수과장			급수부장
협조자	주무관
시행	배수과-6665	(	2014.10.13.	)	접수	정수시설과-2762	(	2014.10.13.	)
우			/
전화	02-3146-1435	/전송	02-3146-1429	/	moonpolo@seoul.go.kr	/	대시민공개