문서번호	고도정수반-4950
결재일자	2014.10.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	고도정수반장	시설안전부장		상수도사업본부부본부장
협 조

『뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리 시설공사』

총괄공사 수정공정표(공기연장) 검토 보고

2014. 10.

상수도사업본부

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

『뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리 시설공사』

총괄공사 수정공정표(공기연장) 검토 보고

뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리 시설공사 관련 2013~2017년 중기재정계획에 따른 총괄공사 공기연장 요청에 대한 검토 보고임.

Ⅰ		검토 근거

중기재정계획에 따른 총괄공정계획 수립 지시(시설과-328) : 2014. 01. 14

검토보고서 제출(삼건뚝도 2014-299) : 2014. 07. 29

공기연장 실정보고서 제출(뚝도CM 2014-293) : 2014. 07. 30

Ⅱ		검토 내용

1. 총괄공사 공정 비교

공 종	당 초	변 경	증 ․ 감
◦ 총공사비	212,408백만원	212,408백만원	-
◦ 총공사기간	1,860일	2,585일	725일
◦ 착공일	2009.12.04	2009.12.04
◦ 준공예정일	2015.01.06	2016.12.31	연기 23.8 개월
◦ 주공정 종료일
- 착수정	2013.05.01	2014.12.15	연기 19.5개월
- 응집침전지(2계열)	2012.03.06	2012.03.06	-
- 여과지(2계열)	2013.04.30	2014.11.30	연기 19.0개월
- 1계열 정수지방식	-	2014.08.31	-
- 중계펌프장	2013.09.15	2014.06.04	연기 8.6개월
- 활성탄흡착지	2013.12.31	2015.09.30	연기 21.0개월
- 오존접촉지	2014.04.15	2015.01.22	연기 9.3개월
- 응집침전지(3계열)	2013.12.26	2016.01.12	연기 24.6개월
- 여과지(3계열)	2014.06.30	2016.11.29	연기 29.0개월
- 준공(종합시운전포함)	2015.01.06	2016.12.31	연기 23.8개월

2. 년도별 예산편성 및 공정율

(단위 : 백만원, VAT포함)

구분		09년	10년	11년	12년	13년	14년	15년	16년	비고
당 초	년도별	1,793	15,600	20,324	15,263	42,930	116,498
	누계	1,793	17,393	37,717	52,980	95,910	212,408
	보할	0.8%	8.2%	17.8%	24.9%	45.2%	100.0%
변경	년도별	1,793	15,600	20,324	15,263	42,930	35,409	49,736	31,353
	누계	1,793	17,393	37,717	52,980	95,910	131,319	181,055	212,408
	보할	0.8%	8.2%	17.8%	24.9%	45.2%	61.8%	85.2%	100.0%
차이	년도별						-81,089	-31,353	-
	보할						-38.2%	-14.8%	-

◦ 연도별 예산배정 및 공정율은 당초 2014년말 준공기한이 종료되나, 예산부족으로       2014년도까지 예산배정 부족분(81,089백만원)의 집행공정율이 38.2%만큼 공정지연이       발생되어 공정계획 수정이 필요함.

◦ 2009~2014년도까지 예산집행 현황

분 야 별	금액(백만원)	공정율	비 고
① 현재계약	212,408	100%
② 예산집행	131,319	61.8%
③ 예산집행 부족분 (③=②-①)	81,089	38.2%	공정지연

◦ ‘14년 이후 집행예산은 “2013~2017년도 중기재정 계획”에 의한 예산집행 계획임.

3. 수정공정표 변경내용

공사비 및 보할 구성비 조정 : 변경없음

주공정내용 및 실작업 일수 조정

No	당 초		변 경		비 고
	공 종	일 수	공 종	일 수
01 02 03 04 05	인허가 및 진입로개설 혼화지 착수정 약품투입동 염소투입동	150일 171일 1,022일 170일 257일	인허가 및 진입로개설 혼화지 착수정 약품투입동 염소투입동	150일 171일 1,615일 170일 257일
※	대체급수(8만톤)	‘12.04월	대체급수(8만톤)	'12.04월
06 07 08 09 10 11 12 13	2계열 침전지 개량 2계열 여과지 1계열 정수지방식 2계열 여과지 시운전 중계펌프장 활성탄흡착지 오존접촉지 고도정수 시운전	538일 691일 - 61일 433일 334일 376일 181일	2계열 침전지 개량 2계열 여과지 1계열 정수지방식 2계열 여과지 시운전 중계펌프장 활성탄흡착지 오존접촉지 고도정수 시운전	538일 1,270일 120일 91일 585일 1,023일 696일 92일
※	대체급수(20만톤)	'13.04월	대체급수(20만톤)	'14.11월
14 15 16 17	2,3계열 여과지철거 3계열 침전지 개량 3계열 여과지 종합시운전 및 준공	80일 179일 308일 190일	2,3계열 여과지철거 3계열 침전지 개량 3계열 여과지 종합시운전 및 준공	155일 280일 525일 122일
계	총 작업일수	5,141일	총 작업일수	7,860일
	중복 작업일수	3,281일	중복 작업일수	5,275일
	실 작업일수	1,860일	실 작업일수	2,585일	증725일

4. 주요 시설물 목표일수 일정 변경

공 종	당초일정	변경일정	비 고
2계열 여과지 통수	2013.06.30	2014.11.30	표준 시운전
① 인허가 및 진입로	2009.12.04 ~ 2010.05.02	2009.12.04 ~ 2010.05.02
② 혼화지	2010.05.01 ~ 2010.10.18	2010.05.01 ~ 2010.10.18
③ 착수정	2010.07.15 ~ 2013.05.01	2010.07.15 ~ 2014.12.15
④ 약품투입동	2010.07.30 ~ 2011.01.15	2010.07.30 ~ 2011.01.15
⑤ 염소투입동	2010.12.02 ~ 2011.08.15	2010.12.02 ~ 2011.08.15
⑥ 2계열 침전지 계량	2010.09.16 ~ 2012.03.06	2010.09.16 ~ 2012.03.06
⑦ 2계열 여과지	2011.06.10 ~ 2013.04.30	2011.06.10 ~ 2014.11.30
⑧ 1계열 정수지방식	-	2014.05.04 ~ 2014.08.31
⑨ 2계열 여과지 시운전	2013.05.01 ~ 2013.06.30	2014.09.01 ~ 2014.11.30
고도정수 통수	2014.06.30	2015.09.30	고도 시운전
⑩ 중계펌프장	2012.07.10 ~ 2013.09.15	2012.10.28 ~ 2014.06.04
⑪ 활성탄흡착지	2013.02.01 ~ 2013.12.31	2012.12.12 ~ 2015.09.30
⑫ 오존접촉지	2013.04.05 ~ 2014.04.15	2013.02.26 ~ 2015.01.22
⑬ 고도정수 시운전	2014.01.01 ~ 2014.06.30	2015.07.01 ~ 2015.09.30
3계열 여과지 통수	2014.12.05	2016.11.29	종합 시운전
⑭ 2,3계열 여과지 철거	2013.04.05 ~ 2013.06.23	2014.12.01 ~ 2015.05.04
⑮ 3계열 침전지 개량	2013.07.01 ~ 2013.12.26	2015.04.08 ~ 2016.01.12
⑯ 3계열 여과지	2013.08.27 ~ 2014.06.30	2015.06.24 ~ 2016.11.29
⑰ 종합시운전 및 준공	2014.07.01 ~ 2015.01.06	2016.09.01 ~ 2016.12.31

Ⅲ		CM 검토의견

공정 계획의 적정성

◦ 총괄 공사기간(1,860일→2,585일)이 준수되게 계획 수립함

- 총괄공사기간

당초 : 2009. 12. 04 ~ 2015. 01. 06 (1,860일)

변경 : 2009. 12. 04 ~ 2016. 12. 31 (2,585일) (증725일)

◦ 공사구간, 공종별 선후간의 연관성을 고려 계획됨

◦ 연도별 예산 집행계획에 부합함

작성 기법

◦ Bar chart 형식의 NETWORK 공정관리 기법으로 작성됨

◦ 공사의 특성, 규모, 복잡정도 등을 감안한 적합한 기법으로 판단됨

◦ 공사구간 및 주요 공종별 공사추진계획과 보할, 공정율 등이 적정 명기됨

∴ 각 공종별 일정계획이 전체공사 추진목표에 부합되는 계획으로 공사 추진에        문제없을것으로 판단

Ⅳ		보고자 검토의견

상기 보고내용은 중기재정계획에 의한 총괄공사 수정공정표(공기연장)을 검토 보고한  사항으로, 실정보고 내용으로 승인 코자 함.

붙 임 : 관련 공문서. 각 1부.  끝.