뚝섬 제로에너지 건축물 R&D 용역 추진개요

□ 계약개요

○ 계 약 명 : 한강안내센터 제로에너지 건축물 설계 및 에너지 최적화 기술개발 연구용역(장기계속 1차, 계약번호 20160*******00)

○ 업 체 명 : ㈜제드 건축사사무소 외 1개사(대표 임희정, 571-1649)

- 전기분야 설계 분담이행 업체 : ㈜한길엔지니어링(대표자 : 김대석)

○ 체결내용

차 수	계약금액(원)	계약일	착수일자	완수일자	비고
총 차	134,970,000	‘16.08.01	‘16.08.01	‘17.09.30	1차 ‘16.11.30(122일) 2차 ‘16.9.30(총 426일)
1차(금차)	71,940,000	“	“	‘16.11.30

□ 추진개요

○ 과업수행계획서 및 착수신고서 제출(계약일로부터 14일 이내): ‘16.07.16까지

- ‘과업수행계획서’는 용역의 배경과 목적, 과업내용, 목표와 기대효과, 용역 수행 참여인력 구성 및 조직, 세부 과업수행 계획표(예정 공정표), 기타 용역수행에 필요한 제반사항 등의 내용을 개조식 으로 작성

- 월별 용역근로자 임금 등 지급 내역서 제출

※ 용역근로자 임금제도 개선계획 안내문자 발송(착수일로부터 10일 이내)

○ 착수보고(착수일로부터 15일 이내): ‘16.07.16까지

- 각 관련주체(건축, 기계, 전기, 통신, 색채 등)간의 업무범위와 책임한계

- 책임기술자명단, 참여기술자 조직표, 전문분야별 기술자중에 견적 및 내역작성업체, 공법, 기술을 지원하는 전문건설업체 등도 포함 작성 등

○ 중간보고 : 2회(개최 횟수는 상호 협의하여 조정)

○ 계획(기본)설계서 납품(착수일로부터45일 이내) : ‘16.09.15까지

- 법규검토, 건축·구조, 기계·전기설비(법령 필수사항 검토·작성), 계획설계 자문용 도면(10부), 건축 계획설계(납품) 도면(5부) 등

○ 중간설계(기본설계) 납품(착수일로부터90일 이내): ‘16.10.30까지

- 설계설명서(5부), 기본설계심의용 도면(필요시, 10부), 기본설계도면(5부) 등

○ 최종보고(계약만료일 14일전): ‘16.11.16일 이전

- 기술용역 결과를 종합하여 결과보고, 보고회 개최 5일전까지 최종보고서(안), 요약보고서(안) 등 관련자료 제출(용역 책임연구원이 연구결과를 종합보고)

○ 실시설계 최종납품 : ‘16.11.30까지

- 설계설명서(5부), 실시설계심의용 도면(설계심의 조건부여한 경우에 한함, 10부), 실시설계도면(CAD 등 관련파일 5부),

□ 주요 추진일정

○ 실증 건축물 설계 및 실증

구분		누적 개월
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	...	13	14
실증 건축물	기존 건축물 현황분석
	기본 및 실시설계
	감리 및 유지관리지침작성
	실증건축물 외 안내센터 리모델링 방안제시
	비용 타당성 분석

○ 쾌적성 모니터링 시스템 개발 및 분석

구분		누적 개월
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	...	13	14
기획	요구사항 분석
	스토리보드 작성
설계	설비, 전기분야 분석
	계측포인트 설계
	모니터링 프로그램 개발
설치검증	계측시스템 설치 및 서버 연동
보고서	에너지 모니터링 데이터 수집 및 분석 / 보고서 작성