동작대교 남단 기존관 연결공사 일정

□ 공사개요

□ 공 사 명 : 올림픽대로 상수도관 이중화 부설공사

□ 위    치 : 동작대교 남단 한강 둔치(반포수난구조대 헬기장)

□ 공사개요

- 기존관 중간밸브(D2200mm) 1개소 설치

- 기존관(D2200mm)과 신설관(D1500mm) 연결

※ 위 작업시행시 무단수공법(Line Stopping) 적용

□ 기존관 연결공사 공정표

구 분	4월		5월			6월
지반굴착 및 가시설 설치(25일)
피팅 및 플랜지 설치(3일)
피팅보호콘크리트 타설(4일)
가배관 천공(D1650)(6일)
가배관(D1650,L=43m)(4일)
가배관 청소, 통수 및 수질검사(4일)
차단용 샌드위치밸브 설치 및 천공(3일)
차단기 설치 및 차단 (1일)
밸브(D2200)설치 및 신설관 연결(3일)
차단기 철거 및 플러깅, 본관통수(1일)
가배관 차단 및 가배관 플로깅(1일)
가배관 철거(1일)

4.14.

5.8.

5.9.

5.11.

5.12.

5.15.

5.21.

5.16.

5.22.

5.19.

5.23.

5.19.

5.21.

6.2.

6.3.

6.4.

5.27.

5.28.

5.29.

5.31.

※ 가배관(D1650mm) 통수, 수질검사 : 5월 26일(월요일)

본관(D2200mm) 차단(Line Stopping) : 5월 28일(수요일)

본관(D2200mm) 통수, 가배관 차단 : 6월 2일(월요일)

가배관 플러깅 : 6월 3일(화요일)