품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 마곡구역도시개발사업단지조성공사(2공구)                   점검일 : 2015. 9. 1 ~ 9. 2

점검항목	점 검 사 항	점 검 결 과	판정
9. 계약변경	․ 계약변경(설계변경 포함) 관리의 적절성	◦ 현장소장은 설계변경 내용에 대하여 면밀히 검토한 후 관련 공종 참여자(기능공 포함)에 대한 교육을 실시 후 작업에 투입 될 수 있도록 조치하고 교육결과를 기록관리 하시기 바람.	시정 검토
18. 기자재 및 공사 목적물의 보존관리	․ 기자재 및 공사 목적물의 보존관리	◦ 시공에 사용될 자재가 관리 소홀로 열화나 손상에 의해 시공 품질에 영향을 미치지 않도록 보관자재 점검표를 자재 특성 에 맞게 작성 주기적 점검(월 2회)을 실시하기 바람.	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 현재 공정률 80%로 계획대비 100%로 대체로 양호한데 추진 되고 있으며, 주 공정인 도로포장공 및 배수공 등 주변 건축 공사와 병행 시공됨에 따라 품질확보에 필요한 인터페이스 관리가 중요한 시기인바 현장품질관리에 철저를 기하기 바람. ◦ 도로노반공사 그레이딩시 기 시공된 배수측구 맨홀에 토사 유입으로 기능의 저하와 토사제거에 많은 인력이 소요 예상 되므로 토사유입 방지막을 설치 후 시공 요망. ◦ 도로포장(보조기층재)시 맨홀 등 구조물 주변에 골재가 집중 되어 입도 및 다짐관리 곤란으로 품질저하가 우려되니 보완 바람.(토목시공 오세길) ◦ 포장 기층면 포설 후 차량 통행이 많아 기층면에 이물질이 많으므로 살수 및 청소를 표층면에 일체화 되도록 포설할 것. ◦ 기 시공된 맨홀의 상부 덮게를 고정하지 않아 안전사고 위험 이 있음으로 설치한 덮게를 고정하고 안전휀스를 설치하여 위험 지역을 표시할 것. ◦ 기 포설된 보조기층에 작업 차량이 다수 통과하여 이물질이 많으므로 이물질을 제거 후 보조기층면을 완료하고 기층포설 할 것.(토목시공 유정규) ◦ 중(집)1-16 기 설치된 L형 측구에 줄눈이 일부 누락되어 균열 이 발생된 구간이 있으니 보수조치 하고 일정간격(10m)으로 설치하는 줄눈이 누락되지 않도록 관리하시기 바람. ◦ 대(보)3-2교통섬 설치구간 경계석 턱낮춤이 시방규정과 불일치 하니 측구와 턱낮춤 구간의 단차를 1cm이하로 관리하시기 바람.(품질시험소)	시정 검토

※ 본 점검결과는“마곡구역 도시개발사업 단지조성공사(2공구)”의 시공자인 진흥기업㈜과 ㈜유신에서 제시한 문서와 구두

답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.

- 적    합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족

-  부 적 합 :  품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항

-  시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.