문서번호	시설관리과-20373
결재일자	2019.10.14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장		강서수도사업소장
협 조
	기전팀장

마곡구역 도시개발사업 상수도시설(2공구, 3-1공구) 인수·인계 추진계획

2019. 10.

강서수도사업소

(시설관리과)

	마곡구역 도시개발사업 상수도시설(2공구, 3-1공구) 인수·인계 추진계획

SH공사에서 시행하는 『마곡구역 도시개발사업』과 관련하여 2공구,3-1공구 상수도시설에 인수인계 추진계획을 보고드림

※ 관련공문 : 마곡사업부-5290(2019.9.25.)호

Ⅰ		사업개요 및 추진경위

□ 사업 개요

○ 사 업 명 : 마곡구역 도시개발사업(3,665천㎡)

○ 사업기간 : ’08.12. ~ ’19.11.

○ 시 행 사 : SH공사

- 2공구(진흥기업), 3-1공구(고덕종합건설)

○ 위    치 : 강서구 마곡동, 가양동, 공항동, 방화동, 내･외발산동

○ 급수계획 : 42천세대(114천명), Q=38,306㎥/일

- 상수도 공사규모 : D80~D1,500㎜, L=51.1㎞

□ 추진경위

○ ’12. 6. 8. : 마곡구역 도시개발사업 급수협의(2차)-본부(배수과)

○ ’13. 6.27. : 상수도 급수협의 관계자회의 개최

- 마곡지구 목동배수지 급수를 위한 관로부설 등 세부추진사항 통보

○ ’13. 7.~8. : 공구별 격점상세도, 시공계획도(관세척 흐름) 등    총 8차에 걸친 상수도 급수협의 검토완료

○ ’13. 9. 4. : 상수도 급수협의 검토결과 통보(사업소)

○ ’14. 1.24. : 상수도 공사협의 및 현장관리강화계획 통보(사업소)

- 상수도 시공현장 관리감독 강화

- 상수도공사 후 관세척 등 통수기간은 최소 30일전 협의(준비)

- 상수도 품질시공을 위한 정기 간담회 개최(’14.3.26일 총7차 진행)

○ ’16. 8.11. : 마곡지구 1공구 인수인계 완료 1~9차 (통수완료)

○ ’16.10.21. : 마곡지구(2~3-1공구) 10~12차 (통수완료)

○ ’16.11~‘18.12. : 원인자부담금 수납(요금과)

- 관세척수량 31,457㎥,  총공사비 69,078,940원

○ ’19. 9. 25. :  상수도시설(2~3-1공구) 인수인계 요청(SH공사)

Ⅱ		인수-인계 계획

□ 기본방향 : 유관부서 합동점검 이후 인수-인계 추진

□ 합동점검 개요

○ 기    간 : 2019. 10.16.~ 10.29.(10일간)

○ 유관부서

- 상수도사업본부 : 급수부(배수과), 시설관리부(시설관리과)

- 강서수도사업소 : 시설관리과(시설관리팀, 기전팀)

- SH공사 : 2공구 시공사(진흥기업), 3-1공구(고덕종합건설)

○ 점검방법 : 유관부서 합동 육안점검 시행

○ 점검내용 : 급수협의 이행 여부, 안전조치 사항 등

☞ 점검결과 경미한 사항은 현장에서 바로 조치하고, 중대한 사항은 보완 조치 후 공문 제출

○ 준비사항 : 도면 및 안전장비(안전모, 마스크, 장갑 등)

□ 인수-인계 : 인수인계서(붙임1)에 의거 추진

○ 대   상 : 2공구 상수도 시설

- 상수도관 : D20~D1,000㎜, L=26.5㎞

(단위, m)

구분	계	D20~D50	D80~D250	D300~D500	D600~D700	D800이상
계	26,536	615	9,634	14,327	1,943	17
배수관	25,902	-	9,615	14,327	1,943	17
급수관 (분기관)	634	615	19	-	-	-

※ 공동구 시설(D200~300㎜, L=1.79㎞) 포함

- 밸 브 류 : 총 389개                                         (단위, 개)

구 분	계	제수밸브	퇴수밸브	공기밸브	소화전	유량계	비 고
계	389	253	32	50	49	1
1차 통수	13	8	-	-	1		‘14년 3월
2차 통수	5	3	-	-	2		‘14년 7월
3차 통수	42	20	8	8	6		‘14년 10월
4차 통수	67	45	8	6	8		‘15년 4월
5차 통수	57	40	3	2	12		‘15년 6월
6차 통수	50	38	1	4	7		‘15년 9월
7차 통수	33	29	1	1	2		‘15년 11월
8차 통수	10	8	-	-	2		‘16년 4월
9차 통수	22	13	3	3	2	1	‘16년 6월
10차 통수	61	29	6	26	-		‘16년 10월
11차 통수	22	16			6		‘18년 4월
12차 통수	7	4	2		1		‘18년 12월

○ 대   상 : 3-1공구 상수도시설

- 상수도관 : D300~D1500㎜, L=1.8㎞                     (단위, m)

구분	계	D20~D50	D80~D250	D300~D500	D600~D700	D800이상
계	1,759			1,393		366
송수관	366					366
배수관	1,342			1,342
퇴수관	501			501

- 밸 브 류 : 총 27개

(단위, 개)

구 분	계	제수밸브	퇴수밸브	공기밸브	소화전	유량계	비 고
계	27	15	3	9
이설및기타	27	15	3	9

○ 기전시설(유량계, 전기방식)은 마곡지구 2공구, 3-1공구 인수인계에 포함

Ⅲ		행정사항 및 향후계획

□ 행정사항

○ SH공사

- 인수인계 추진계획에 의거 합동점검 준비 철저

○ 유관부서 합동점검 참석 요청

- 급수부(배수과) : 급수운영분야

- 시설관리부(시설관리과) : 시설물유지관리, 공동구 유지분담금 분야

- 강서수도사업소(시설관리팀, 기전팀) : 시설물유지관리, 기전시설

□ 향후계획

○ 유관부서 합동점검 : ’19. 10. 16. ~ 10. 29.(10일간)

○ 인수인계서 작성 및 교환 : ’19. 10. 30.

○ 마곡지구(3-2공구) 인수인계 추진 : ’19.11월 중

붙임 : 1. 인수인계서(안) 1부.

2. 준공도면 및 관망도 각 1부(별첨).  끝.