4-1		마곡지구 태양광 특화단지 조성

□ 추진부서 : 지역발전본부(서남권사업과)

□ 마곡지구 부지공급현황

구 분		계	공 동 주 택	산 업 용 지	상 업 용 지	업 무 용 지	기 타 시 설
공급면적		206.8만㎡	59.3만㎡	81만㎡	8.2만㎡	30만㎡	28.3만㎡
매각완료		157.1만㎡	59.3만㎡	53만㎡	8.2만㎡	20만㎡	16.6만㎡
미 매 각	미매각	42.6만㎡	0	20.9만㎡	0	10만㎡	11.7만㎡
	유보지	7.1만㎡	-	7.1만㎡	-	-	-

※ 총 366만㎡ 중 기반시설(159.2㎡) 제외한 건축물의 태양광 설치계획면적 : 206.8만㎡

□ 설치목표

○ 태양광발전 : 496개소  14,896KW (496필지 206.8만㎡)

대상설비	공동주택 용 지	상 업 용 지	업 무 용 지	산 업 용 지	의 료 시 설	학 교	공 공 청 사	사회복지 시 설	공 원
태 양 광	O	O	O	O	O	O	O		O
지 열	O	-	-	-	-	O	O	O	-

- 마곡구역내 모든 건축물에 태양광발전시설 설치의무(전력수요의 5%이상)

- 근거 : 마곡구역 도시개발사업 에너지사용계획서(2013.3.)

마곡도시개발사업 지구단위계획시행지침제34조

□ 설치현황 및 향후계획

○ 태양광발전시설 설치현황

(2017.9.현재 허가기준)

구 분	계	주거 용지	산업 용지	상업 용지	업무 용지	기타 시설
설치 대상	496필지 206.8만㎡	16필지 59.3만㎡	269필지 81만㎡	29필지 8.2만㎡	116필지 30만㎡	66필지 28.3만㎡
태양광 설치	174필지 137.5만㎡	16필지 59.3만㎡	58필지 43만㎡	29필지 8.2만㎡	42필지 14만㎡	29필지 13만㎡

- 총 496필지(206.8만㎡) 중 174필지(137.5만㎡)가 건축허가 되어 부지면적 대비 66.5% 태양광 발전시설 설치됨

- 현재 태양광 발전 목표량(14,896KW)중 부지면적 대비66.5% 9,906KW 보급완료

○ 향후추진계획

- 미매각부지(42.6만㎡)에 대하여는 토지공급계획에 따라 매각하여 태양열 보급

- 유보지(7.1만㎡)에 대하여는 향후 개발 추이에 따라 태양열 보급

□ 태양광발전시설 설치사례 (LG싸이언스 빌딩)

※ 건축물 옥상 전체에 태양광발전시설 설치

작 성 자	서남권사업과장 : 김윤규 ☎2133-1510 건축계획팀장 : 김동선 ☎1540 담당 : 남성준 ☎1541

지역발전본부 태양광 보급목표

□ 연차별 추진목표 : 총496개소 14,896KW (206.8만㎡)

구 분	계 (A+B)	추 진 계 획
		~’17(A)	소계(B)	’18	’19	’20	’21	’22
추진대상(개소)	496	174	322	80	80	62	60	40
설치용량(KW)	14,896	9,906	4,990	1240	1240	960	930	620

□ 연차별 투자계획 : (비예산)

(단위 : 백만원)

구 분		계 (A+B)	투자계획
			~’17(A)	소계(B)	’18	’19	’20	’21	’22
총사업비		0		0
	예 산	0		0
	민 자	0		0

□ 마곡지구 건축물(496필지)중 174필지 기설치 완료(건축허가 기준)

연번	부 서	시 설 명	위 치	옥상추정면적(㎡)	설치가능추정(KW)
1	서남권사업과	주거용지	강서구 마곡동	17,700	1,770
2	서남권사업과	산업용지	강서구 마곡동	44,910	4,491
3	서남권사업과	상업용지	강서구 마곡동	8,720	872
4	서남권사업과	업무용지	강서구 마곡동	14,860	1,486
5	서남권사업과	기타시설	강서구 마곡동	12,870	1,287

작 성 자	서남권사업과장 : 김윤규 ☎2133-1510 건축계획팀장 : 김동선 ☎1540 담당 : 남성준 ☎1541