마곡지구 공정점검회의(행정2부시장) 회의록

□ 일  시 : 2018. 5. 14.(월) 17:10 ∼ 17:45

□ 장  소 : 행정2부시장 집무실

□ 참석자

□ 서울시 : 행정2부시장, 푸른도시국장, 서남권사업과장, 서울식물원장 등

□ SH공사 : 도시공간사업본부장, 마곡위례스마트사업단장, 마곡사업부장, 기획운영부장 등

□ 회의내용

질문 및 지시사항 / 답변내용
마곡위례 스마트사업단장	<서울식물원 및 마곡광장 추진계획 보고>
푸른도시국장	유니버셜 디자인 및 장애인 인증 관련 점검은 건국대학교 강병근 교수가 그 분야의 전문가이니 참고하시기 바랍니다.
서남권사업과장	공항철도 마곡역 개통시기를 9월 29일(토)로 잠정 협의하였습니다. 9.24.~26.이 추석 연휴라서 그전에 개통하는 것으로 제안했지만 관계기관 측에서는 해당지역 교통량이 많이 증가하지 않을 것으로 예상하고 있고 철도 개통은 일반적으로 토요일에 하므로 9월 29일(토)에 개통하는 것이 좋겠다는 입장입니다.
행정2부시장	식물원 개원일자는 정확히 언제로 할 것인지?
마곡위례 스마트사업단장	9월30일(일)로 계획하고 있습니다.
행정2부시장	9월30일은 일요일이라서 개원하는 날로는 적당하지 않은 것 같고 공항철도개통은 식물원 개원 전 선행되어야 함. 공항철도 개통 일정을 앞당길 수 있도록 관계기관과 협의해보시기 바람.
	마곡광장 상업시설 사업자를 8월에 공모해서 9월에 운영 개시하는 것이 가능한 일정인지?
기획운영부장	네. 가능합니다. 8월초에 사업자 공모해서 9월 말에 운영개시 일정으로 충분합니다.
행정2부시장	문제없다고 하신만큼 담당자가 책임지고 일정에 차질 없도록 진행하기 바람. 공모 과정에서 유찰되는 경우도 있고 지연되는 경우가 많으니 유념하시기 바람.
도시공간사업본부장	사업자 공모가 유찰 등으로 인해 일정에 차질이 생길 경우를 대비해서 임시운영방안 등 대안도 함께 검토를 진행하겠습니다.
행정2부시장	식물원 항공사진은 언제 찍은 것인지?
마곡위례 스마트사업단장	4월말 촬영한 사진입니다.
행정2부시장	앞으로 공정보고 시 최신사진으로 보고하시기 바람.
푸른도시국장	사용승인 일정계획은 식물문화센터에 해당하는 내용인지? 아니면 식물원 내 모든 건축물에 해당하는 건인지?
마곡위례 스마트사업단장	식물문화센터 위주로 작성한 것입니다.
행정2부시장	청소시설을 축구장으로 이전하는 것은 물순환안전국하고 협의한 내용인지?
마곡위례 스마트사업단장	서남물재생센터와 협의하였습니다.
행정2부시장	이전부지는 언제까지 점용하는 것인지?
서남권사업과 건축계획팀장	이전부지 점용허가가 작년에 났고 3년간 점용하는 것으로 되어 있습니다.
행정2부시장	축구장은 어디로 이전하는지?
서남권사업과 건축계획팀장	서남물재생센터 내 다른 부지로 이전합니다.
마곡위례 스마트사업단장	축구장 이전공사도 현재 진행 중입니다.
강성필 비서관	청소시설 이전 건은 강서구와 2년 이상 협의를 진행하여왔고 구청으로부터 요구사항도 많은 사안이었습니다.
행정2부시장	향후 청소시설을 완전히 이전시켜야 할 것임.
서울식물원장	<서울식물원 편의시설 운영계획 보고>
푸른도시국장	매점이 입구에 있는 것은 기존 상권을 죽이고 식물원 안쪽에 있는 편의시설 이용자가 줄어들기 때문에 적정하지 않음.
서울식물원장	판매온실동은 정원가꾸기 상담 장소 및 연구동으로 사용하고 식물 판매는 주말에 광장 등에서 화훼장터를 여는 것으로 계획했습니다.
행정2부시장	식물 판매장도 있어야 하지 않는지?
푸른도시국장	식물문화센터 1층 기념품 판매소가 규모가 상당히 넓으니 기념품과 식물판매 기능을 함께 수용하는 것이 효율적일 것입니다.
	전문가들 얘기를 들어보면 식물원내 편의시설이 많은 편이고 호수변 지원시설이 활성화되면 식물원 내 편의시설은 침체될 가능성이 높다고 함.
행정2부시장	지원시설이 오픈하고 활성화되기까지는 시간이 걸릴 것이니 그때까지는 식물원 내 편의시설 운영에 대해 고민해야 할 것임.
서울식물원장	식물원 내 편의시설에서 영업행위를 하기 위해서는 SH공사에서 건축물 용도변경을 6월까지 진행해줘야 하며, 건축물 사용승인 및 소유권 이전 등도 조속히 처리가 되어야 할 것임.
푸른도시국장	소유권 이전이란 것은 사업준공이 되어야 하므로, 그전에 공용개시를 위한 협약을 맺든 해서 서울시가 재산권 행사를 할 수 있도록 절차를 진행해야할 것임.
도시공간사업본부장	SH공사에서 법률자문을 받아 처리하도록 하겠습니다.
행정2부시장	6월까지 식재 등 마무리하겠다고 보고하셨는데 시간이 얼마 남지 않았음. 보고하신대로 추진하시기 바람.
푸른도시국장	수목식재는 장마 때 식재하는 것이 한여름 뙤약볕에 심는 것보다 잘사는 경우가 있음.
도시공간사업본부장	항공사진은 한 달에 1회 촬영하고 있으며, 다음 공정회의 때는 최신사진을 촬영하여 보고하겠습니다.
행정2부시장	식물원 개원은 일반적으로 금요일이나 토요일에 개원하는 것이 적정할 것임. 잠정적으로 9월28일(금) 개원으로 추진해 주시기 바람.
	다음에는 현장에 나가 양천로 북측 유수지, 저류지 등을 점검하겠음.
푸른도시국장	다음 공정점검 회의 때 강서구청 청소시설 이전 담당자도 참석토록 하는 것이 좋지 않을지?
마곡위례 스마트사업단장	연락을 취해보겠습니다.
행정2부시장	한강연결 보행교는 어떻게 진행되고 있는지?
마곡위례 스마트사업단장	공사 진행 중입니다.
행정2부시장	그동안 양천로 북측구간은 신경을 쓰지 못했는데 다음에는 한강보행교, 유수지, 문화재 복원, 9월 양천로 남측 개원 시 북측구간은 어떤 방법으로 처리할지 방안 등 보고해주시기 바람.
도시공간사업본부장	식물원 개원 대비 주변 정비계획을 수립중이며, 현장사무실 부지도 펜스로 차폐하는 방안과 이전하는 안을 검토 중입니다. 서울시에서 의견을 주시면 참고하겠습니다.
행정2부시장	다음에는 현장에서 보는 것으로 이만 회의를 마무리 하도록 하겠습니다.