2. 음식폐기물 자원화시설 광역화 반대

	< 현장시장실 토론결과 >
○ 서남물재생센터내 음식폐기물 자원화시설 추진관련, 타당성조사 용역 시행중으로 타 자치구 음식폐기물 반입계획 수용불가 및 시설확장 계획 전면 백지화 요청사항에 대하여 ○ 음식물처리시설 문제점에 대한 대안검토 등 주민협의체와 협의추진하기로 결정

□ 사업개요

○ 위    치 : 서남물재생센터 내 폐기물처리시설 부지(9,282㎡)

○ 규    모 : 음식폐기물 광역 자원화시설 및 강서구 청소시설 설치

- 음식폐기물 광역처리시설 : 1일 450톤(강서구와 인근 4개구 처리 규모)

- 강서구 청소시설 : 쓰레기 적환장, 청소차고지, 재활용품선별 시설 등

○ 기    간 : ’13.1~’18.12(타당성조사 → 실시설계 → 시설공사 완료)

○ 내    용 : 음식폐기물 자원화시설 포함 “폐기물종합처리시설” 설치

○ 사 업 비 : 900억원 추정(국비 30%, 시비 70%)

□ 추진현황

○ ’13. 1. : 음식물쓰레기 처리 대책(행정1부시장 방침 제20호)

○ ’13.11. : ‘서울시 음식물류폐기물 자원화시설 확충과 강서구 폐기물 종합처리시설 설치사업’ 타당성 및 기본계획 용역 추진계획 수립

⇒ 강서구 청소시설을 통합 건설하기 위한 타당성조사 시행 결정

○ ’14. 6. : 마곡입주자협의체와 회의(마곡 홍보관)

⇒ 타당성조사 용역 내용을 주민설명회 등을 통해 설명하기로 함

○ ’14. 7. : 서남권 광역 자원화시설 타당성조사 및 기본계획 용역 착수

- 향후 20년간 서울시 음식폐기물 발생량 및 추이 분석

- 서남권 음식폐기물 광역 자원화시설 확충 기본계획 수립

- 강서구 폐기물종합처리시설 설치계획 수립(재활용선별장, 청소차고 등)

□ 향후계획

○ 14년12월 : 타당성 조사 및 기본계획 용역시행 중간보고, 경제적분석 의뢰

- 음식물폐기물 자원화시설 타당성부문 공법선정 및 경제적 분석 등

⇒ 중간보고 : 기후환경본부장, 경제적분석 : 서울공공투자관리센터(서울연구원)

○ 15년 2월 : 타당성조사 부문 투자심사 의뢰(재정담당관)

○ 15년 3월 : 타당성조사 용역내용 주민설명회 개최

- 서남물재생센터 주민협의회(서남물재생센터 일정협의 추진)

- 마곡입주자협의체(마곡사업단 일정협의 추진)

※ 음식물처리시설 문제점에 대한 대안검토 및 타당성조사 전반적 사항

○ 15년 7월 : 타당성조사 및 기본계획 용역 완료

○ 15년 9월 : 서남 폐기물종합처리시설(가칭 : 서남환경자원센터) 공사

기본 및 실시설계 착수

○ 16년 6월 : 서남 폐기물종합처리시설공사 기본 및 실시설계 완료

○ 16년 8월 : 서남 폐기물종합처리시설공사 착수

○ 18년12월 : 서남 폐기물종합처리시설공사 완료

작 성 자	생활환경과장 : 심상원 ☎2133-3720 음식물시설팀장 : 유병기 ☎3743 담당 : 송장현 ☎3747

□ 위치도 또는 조감도

□ 현황사진

서남물재생센터

폐기물처리시설부지

(9,282㎡)

방화서광아파트

가양벽산아파트

마곡지구

400m

1Km