마곡119안전센터

추진배경

○ 강서구 마곡지구 개발에 따라 증가하고 있는 소방서비스 수요 충족

○ 재난현장 5분내 도착 권역을 확대하기 위한 119안전센터 신설

추진계획

○ 사업목적 : 미래지식산업단지, 주택단지 등과 김포공항과 접근성 및 연계성이 밀접, 거주 및 유동인구가 급증하여 소방기관 설치가 필요

○ 사업근거 : 소방기본법 제3조(소방기관의 설치 등)

○ 사업내용

‣위    치 : 강서구 마곡동 749-8

‣사업기간 : 2018. 1. ~  2019. 10.(1년 10월)

‣규    모 : 부지면적 1,063㎡, 연면적 880.62㎡(지상3)

‣사 업 비 : 5,815,118천원
(시설비 : 토지매입비 3,445,183천원, 설계비 등 2,369,935천원)

‣2019년 예산현황                                                    (단위:천원)

세 목	배정예산	시설비	감리비	부대비	자산취득비	사무비
마곡119 신설	2,259,010	2,123,720	23,215	8,075	73,000	31,000

추진기간	사업추진절차	추진세부내용
2018.02~2018.03	부지매입	마곡119안전센터 신축부지 매입
2018.04~2018.07	설계용역	설계용역 발주 및 검수
2019.03~2019.09	공사발주	건축물 공사 착공 및 준공
2019.10	입 주	마곡119안전센터 개소

□ 추진일정

□ 마곡119안전센터 위치 및 전경

	ㅣ
신축부지 위치도	신축부지 항공사진	신축 조감도