마곡119안전센터 신축 경과보고

▢ 그간 추진사항

추진일정		주요내용
’16. 05. 02.	:	마곡도시개발지구 119안전센터 신설부지 배정요청
’16. 11. 01.	:	2017~2021회계년도 서울특별시 중기지방재정계획 반영
’16. 11. 17.	:	소방안전 중장기 투자계획 마곡119안전센터 신설 사업 반영(예산담당관-13373)
’17. 03. 17.		마곡119안전센터 신설 기본계획 보고
’17. 06. 13.	:	마곡119안전센터 신설 투자심사 조건부 적정(서울시)
’17. 07. 28.	:	17년 4차 공유재산심의회 적정
’17. 08. 18.	:	제3차 지방재정 중앙 투자심사 적정
’17. 11. 01.	:	제1593차 기술용역타당성심사 적정
’18. 01. 18.	:	신축부지 매입 계획수립
’18. 01. 26.	:	신축관련 자문단 구성 및 회의
’18. 02. 09.	:	마곡119안전센터 신축 설계 기본(안) 수립
’18. 02. 28.	:	마곡119안전센터 매매 계획보고
’18. 03. 07.	:	지명초청 설계경기 현상공모 계획 수립
’18. 03. 07.	:	마곡119안전센터 신축부지 매매계약 체결
’18. 04. 23.	:	마곡119안전센터 신축공사 현상설계 당선작 통보
’18. 05. 09.	:	신축관련 설계용역 계약체결(’18.5.14.~9.10.)
’18. 06. 19.	:	제8차 강서구 건축위원회 심의 의결(조건부 동의)
’18. 06. 29.	:	마곡부지 지질조사 굴착시공
’18. 07. 06.	:	기본설계 완료에 따른 경과보고회(합동회의)
’18. 07. 06. ~ 현재	:	설계공정별 실시설계 및 각종 인․허가 진행 중

▢ 향후 진행사항

추진일정		주요내용
’18. 00. 00.	:	경계 및 지적측량, 경관심의(서울시)
’18. 00. 00.	:	BF예비인증(장애물 없는 생활환경) 신청 및 심의
’18. 00. 00.	:	공용건축물 신축 협의요청(강서구청, 예방과)
’18. 09. 00.	:	설계도서 및 용역검토
’19. 01. 00.	:	서울시 계약심사과 원가심의 및 일상감사 의뢰
		서울시 계약발주 (재무과)
’19. 02. 00.	:	우리 소방서 자체발주(전기,통신,소방,폐기물 등)
		공사 착공식