문서번호	토목부-24496
결재일자	2017.11.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
협조
	주무관

만리재로 노후 보도블록 교체 민원 검토 보고

(퇴계로 외 1개소 도로공간재편공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017.11.

도시기반시설본부

(토목부)

만리재로 노후 보도블록 교체 민원 검토 보고

(퇴계로 외 1개소 도로공간재편공사)

만리재로 신공덕동 삼성래미안(2차) 상가 앞 소형고압블록이 노후화되어 통행불편 및 보행환경개선 민원 있어 보도블록 교체 추가 공사 검토 보고임

Ⅰ		관련근거

○ 신공2 제2017-90호(2017.9.20.)

- 만리재로 보도블록 정비공사에 따른 추가정비 요청

Ⅱ		공사개요

○ 공 사 명 : 퇴계로 외 1개소 도로공간재편공사

○ 공사위치 : 회현역 7번 출구 ~ 퇴계로 2가 / 만리2구역 ~ 공덕오거리

○ 공사규모

- 퇴계로 도로공간재편 : 연장 0.85km

․ 토목 : 차로축소, 교차로 개선, 불량보도 포장

․ 조경 : 가로수 10주 제거 및 168주 식재, 벤치 조성 등

- 만리재로 보행환경개선 : 연장 1.17km

․ 토목 : 차로축소, 교차로 개선, 불량보도 포장

․ 조경 : 불량 및 보행환경 저해 가로수 제거, 신규 식재, 띠녹지 조성

○ 공사기간 : 2017.01.04. ~ 2018.01.03.

○ 도 급 비 : 2,883백만원

○ 감 리 사 : ㈜도화엔지니어링 외 2개사

○ 시 공 사 : ㈜크로스텍엔지니어링 외 1개사

○ 공 정 률 : 78%

Ⅲ		건설사업관리단 보고내용

□ 만리재로 신공덕동 삼성래미안 상가 앞 노후 보도 교체

○ 신공덕동 삼성래미안아파트 상가 앞 소형 고압블록이 노후화되어 통행불편을 초래하고, 보행환경개선 요구 민원이 있어 본 공사에 포함하여 보도정비를 추가 시행

- 불투수 블록 포장 면적 : A=133[eqn: m ^{2}]

〈현황도〉

〈위치도 및 단면도〉

〈주요수량 현황〉

구 분	규 격	단 위	당 초	변 경	증·감	비 고
보도블록 걷기	t=6~8cm	[eqn: m ^{2}]	-	133	133
맨홀뚜껑 철거	φ648	개소	-	3	3
불투수 보도포장	200×200×60	[eqn: m ^{2}]	-	133	133
맨홀인상 및 설치	-	개소	-	3	3
불투수 블록 (관급자재)	200×200×60	[eqn: m ^{2}]	-	138	138

〈공사비 현황〉

(단위:천원)

구 분	당 초	변 경	증․감	비 고
기존구조물 철거	-	262	262
잔토운반 및 고재처리	-	603	603
맨홀 뚜껑 및 인상	-	2,722	2,722
보도포장	-	2,880	2,880
직접공사비	-	6,467	6,467
제경비	-	3,713	3,713
도급비	-	10,180	10,180
관급자재비	-	3,460	3,460
총공사비	-	13,640	13,640

Ⅳ		조치계획

○ 노후된 보도정비를 시행하여 보행인의 통행불편 해소 및 안전사고 예방을 위해 정비하는 것은 적정함으로 향후 설계 변경시 반영하고자 함

※ 추가공사비는 보도환경개선과에 요청

붙 임 : 건설사업관리단 검토 의견서 등 1부.  끝.