□ 맨홀정밀점검 용역 추진현황

용역명	계약업체 (대표자)	용역기간	책임기술자 성명(기술자격)	용역개요	예산액 (원)	계약금액 (원)	집행금액 (원) 준공기준	집행잔액 (원)
2017년 노원구 관내 상수도맨홀 정밀점검용역	㈜평화엔지니어링 (권재원)	17.04.05~12.31	심진아(고급)	소,중형맨홀 1,253개소	200,000,000	173,435,000	173,435,000	-
				원형맨홀 4,903개소
				구형맨홀 342개소
2017년 강북구 관내 상수도 맨홀 정밀점검 용역	㈜한국시설안전연구원	17.3.27~12.15	김맹신(특급)	소,중형맨홀 1,571개소	200,000,000	173,482,000	151,825,280	21,656,720
				원형맨홀3,432개소
				구형맨홀 221개소
2017년 상수도 맨홀 정밀점검 용역(강동구 관내)	서경구조안전진단(주) (장유진)	17.03.15~12.31	김창식(특급)	소,중형맨홀 250개소	200,000,000	173,285,933	150,000,000	23,285933
				원형맨홀 5,525개소
				구형맨홀 475개소
2017년 상수도 맨홀 정밀점검 용역(송파구 관내)	㈜장민이엔씨 (한영필)	17.03.15~12.31	조기주 (토목시공기술사)	소,중형맨홀 250개소	200,000,000	175,705,000	150,000,000	25,705,000
				원형맨홀 5,525개소
				구형맨홀 475개소

□ 맨홀정밀점검 용역 점검시행 현황

용역명	맨홀점검 설계 및 점검현황(12월 준공 기준 작성)										비고
	맨홀별	계	설계량 (개소)	점검량 (개소)	실적률(%)	정비현황(개소)
						계	변실정비 및 철개교체	변실교체	철개교체	포장정비 (침하,돌출)
	계	25,000	25,000	17,758	71%	120	3	63	54	0
2017년 노원구 관내 상수도맨홀 정밀점검용역	소계	6,250	6,250	6,498	100%	0	0	0	0	0
	소,중형	250	250	1,253	100%	0
	원형	5,525	5,525	4,903	100%	0
	사각	475	475	342	100%	0
2017년 강북구 관내 상수도 맨홀 정밀점검 용역	소계	6,250	6,250	5,224	100%	59	0	56	3	0
	소,중형	250	250	1,571	100%	4		3	1
	원형	5,525	5,525	3,432	100%	55		53	2
	사각	475	475	221	100%	0
2017년 상수도 맨홀 정밀점검 용역(강동구 관내)	소계	6,250	6,250	3,111	50%	25	3	0	22	0
	소,중형	250	250	501	200%	1	1
	원형	5,525	5,525	2586	47%	24	2		22
	사각	475	475	24	5%	0
2017년 상수도 맨홀 정밀점검 용역(송파구 관내)	소계	6,250	6,250	2,925	47%	36	0	7	29	0
	소,중형	250	250	432	173%	0
	원형	5,525	5,525	2,466	45%	36		7	29
	사각	475	475	27	6%	0