문서번호	도시디자인과-15521
보존기간	10년
결재일자	2016.12.22.
공개여부	공개

★주무관		디자인관리팀장		도시디자인과장	도시관리국장	부구청장
협조	계약팀장
	심사

- 명륜길 마을경관 개선사업 공사 -   2016년 예산 사전원인행위 시행 계획

도시관리국

도시디자인과

-명륜길 마을경관 개선사업 공사-

2016년 예산 사전원인행위 시행 계획

명륜길 마을경관 개선사업 공사가 연내 준공이 곤란하여 공사비에 대한 사전원인행위를 실시하여 예산집행에 만전을 기하고자 함.

1		관련근거

▢ 서울시종로구재무회계규칙 제55조(지출결의서 작성 및 원인 행위부의 정리구분)

▢ 지방회계법 제6조(회계연도), 제37조(지난 회계연도 지출)

2		공사개요

▢ 공사기간 : 2016. 12. 14. ~ 2017. 8. 13. (240일)

▢ 공사구간 : 명륜길2 ~ 명륜길99-2

▢ 공사규모 : 길이 1,000m, 폭 4~7m

▢ 공사내용

- 도로 아스콘 및 미끄럼방지포장, 계단정비, 녹지공간 및 쉼터조성 등

▢ 총공사비 : 735백만원(시:구 = 5:5)

3		추진현황

▢ 2015. 6.23. : 명륜길 마을경관개선사업 추진 계획 수립

▢ 2015.11.30. : 설계 용역 착수

▢ 2016. 8.30. : 설계 용역 완료

▢ 2016. 9.30. : 서울시 공사 계약심사

▢ 2016.11.10. : 공사 발주

▢ 2016.12.14. : 공사 착수

4		예산현황 및 원인행위 미필액

(단위 : 원)

구 분	예산액	기 원인행위액	원인행위 미필액	비 고
계	900,000,000	735,424,830	164,575,170
시비(재배정)	450,000,000	370,207,430	79,792,570
구비	450,000,000	365,217,400	84,782,600

※ 2016.12.12. 시비 예산 전액 사고이월 요청

5		사전원인행위 내용 및 사유

▢ 내용 : 2016년 예산 중 예산잔액(원인행위 미필액)인 164,575,170원을 2017년도에

지출하기 위해 사전원인행위하고자 함.

▢ 사유

- 명륜길 마을경관 개선사업 공사를 시행함에 있어 하반기 발주에 따른 절대공기

(240일) 부족으로 연내 준공이 어려우며,

- 공사 시 민원발생(마을버스통행으로 인한 야간공사 고려 등)과 지장물 이설 등에

따른 추가 물량 및 추가 공종 발생이 예상되어 이에 대비한 공사비, 자재비 등

제반사업비에 대하여 사전원인행위를 실시하여 공사를 차질없이 진행하고자 함.

6		향후계획

▢ 2016. 12. : 예산 사고이월

▢ 2016. 12. ~ 2017. 8. : 공사시행 및 완료.  끝.