명시이월사업조서

○  도시개발특별회계( 1건, 16,628,746천원)

(단위 : 천원)

연번	정책 사업	단위 사업	세부사업	통계목	명시이월내용	예산액	이월액	사 유
1	정보관리강화	기록물 시설관리	서울기록원 건립	계	‘16년 골조 및 마감 공사관련 예산	18,140,000	16,528,746	임반 터파기 공사에 따른 인근 주민 소음, 진동 민원으로 터파기 공사 지연으로 기초 및 골조공사 관련 예산 집행 차질 발생
				시설비		16,638,000	15,486,746
				감리비		1,470,000	1,010,000
				시설부대비		32,000	32,000