명시이월사업조서

(단위:천원)

부서-정책-단위-세부 편성목(통계목)					명시이월 내용	예산액 (재원)	이월액 (재원)	명시이월 사유
다산동					∘사 업 명 : 다산동 마을활력소 조성 ∘위 치 : 중구 동호로15길 50 ∘규 모 : 279.93㎡ ∘사업기간 : 2019. 5. ~ 2019. 12. ∘총사업비 : 215,000천원 ∘추진사항 - 동주민센터 2층 마을활력소 설계 및 시공 민관 참여단 워크숍 운영 주민주도 공간 재구성 및 자율 운영방안 마련	215,000 시 215,000	182,000 시 182,000	○ 마을활력소 운영계획 수립 용역 지연 및 민관참여워크숍 진행지연으로 당해연도 지출이 어려워 2020년 회계연도로 명시이월하여 사업비를 지출하고자 함.
	중구민을위한동행정운영(다산동)
		주민행정서비스제공
			주민참여마을활성화
				시설비 및 부대비 (시설비)
				시설비 및 부대비 (감리비)
				자산취득비 (자산 및 물품취득비)

○ 작성요령

- 예산액 및 이월액 : 재원별로 구분하여 기재 (국비, 시비, 구비, 특별교부세, 특별교부금 등)

- 천원 단위 작성 :  천원미만 금액은 절상하여 기재(추후 이월액 배정요구시 천원 미만 금액 기재하여 요구)

※ 명시이월사업조서 제출 이후 의회승인 전 이월요구액 중 추가 지출 사유가 발생하여 이월요구액에 변동 사항이 있을 경우 반드시 공문으로 수정 요구