□  명시이월비 설명서 (부서명 : 안전지원과)

○ 일반회계 :

							(단위 : 천원)
정책 사업	단위 사업	세부 사업	명시이월 내용	예산 과목	2015 예산액	2015 이월액	이 월 사 유
					(×18,756,000)	(×10,334,000)
	소방 차량 운영 관리	소방 차량 대폐차	소방차량 구매	계	(×10,076,000)	(×8,684,000)	∘소방차 제작 기간이 약5개월 정도 소요되므로 금년말까지 납품이 완료되지 못할 것으로 판단됨 ※펌프,탱크,화학,구조차,고가차, 굴절차,구조버스((7종31대) - 현재 국고지연(사업보류)
				소방차량대폐차	(×10,076,000)	(×8,684,000)
	소방 차량 운영 관리	기동 장비 교체 및 보강	외국산 고성능 화학차 구매	계	(× 7,880,000)	(× 850,000)	∘외국산 고성능화학소방차량으로, 제작 기간 약10개월 소요되므로 금년 말까지 납품이 완료되지 못할 것으로 판단됨
				노후소방차량교체 보강	(× 7,880,000)	(× 850,000)
		119구급대 감염 관리실 설치	외국산 특수(음압) 구급차 구매	계	(× 800,000)	(× 800,000)	∘외국산 특수(음압)구급차량으로,제작 기간 약6개월 소요되므로 금년 말까지 납품이 완료되지 못할 것으로 판단됨
				구급대 감염	(× 800,000)	(× 800,000)

3건 / 10,334백만 원