모의훈련 계획서

(버스정보팀 통합DB서버)

사 업 명	클라우드센터 인프라 구축(3단계)
주관기관	서울특별시 데이터센터
문서번호	MIG_EX_모의훈련 계획서(통합DB서버)

2018년 09월 13일

대신정보통신 컨소시엄

제·개정 이력

버전	변경일자	제.개정 내용	작성자
1.0	2018-09-13	최초 제정	함기태

목    차

1. 모의훈련 목적	1

2. 모의훈련 범위	1

3. 모의훈련 진행 내용	1

4. 모의훈련 이전대상 장비	1

5. 모의훈련 진행 절차	2

5.1 사전준비 단계	2

5.2 이전수행 단계	3

1. 모의훈련 목적

서울시 데이터센터	대신정보통신 컨소시엄

클라우드센터 인프라 구축(3단계)	모의훈련 계획서(버스정보팀 통합DB서버)

■ 본 이전 전 이전계획서의 시나리오 적정성 검토와 관련 참여자(통제인력)의 업무 숙지를 통한 안정적 이전 수행

■ 참여자의 이전 프로세스 및 매뉴얼 숙지

2. 모의훈련 범위

■ 이전계획 및 시나리오 교육/점검

■ 비상상황 발생 시 대처 및 보고체계 훈련

■ 시스템 해체에서 포장/반출/상차까지의 단계별 통제 체계 점검

3. 모의훈련 진행 내용

■ 일시 : 2018.09.27.(목) 09:00 ~ 19:10

■ 장소 : 클라우드센터 19층 회의실, 도시교통본부 5층 회의실

■ 대상 : 주관기관, 이전 사업자, 버스정보팀 운영 사업자

■ 내용

- 개인별 이전 당일 임무 숙지 및 역량 강화

- 모의훈련 시 무전기를 사용하여 진행 상황체크와 상황실 보고훈련 실시

- 사업총괄(PM)의 지시에 따라 개인별 업무를 수행하고, 위험요소 도출 및 서비스 중단

최소화

4. 모의훈련 이전대상 장비

구분	영역	업무 시스템명	수량	제조사	OS	DBMS	비고
이전	프론트 사설	통합 DB 서버	1	HP	HP-UX	Oracle	버스정보 DB 테스트

5. 모의훈련 진행 절차

5.1 사전준비 단계

5.1.1 주관기관 준비 사항

■ 대상 : 주관기관(서울시 클라우드센터, 서울시 도시교통본부)

■ 내용

- 내부직원 및 협력업체 교육일정 통보 확인

- H/W, S/W 변경금지 선언 등 확인

5.1.2 종합상황실 운영 준비

■ 내용

- 상황실, 대기실 안내표지 부착

- 비상연락망 비치(종합상황실/엔지니어 대기실/시스템실) 등

5.2 이전수행 단계

5.2.1 인력운영 방안

■ 대상 : 주관기관, 이전사업자, 버스정보팀 운영 사업자 및 이전지원 협력사

■ 내용 : 이전에 참여하는 인력의 임무부여 실시

구분	역할	기관/업체명	담당자
주관기관	이전상황 의사결정 및 상황체크	클라우드센터, 버스정보팀	최성욱 주무관 오현민 주무관
이전사업자	이전총괄 PM	대신정보통신(주) 컨소시엄	강민석 이사
	이전 PL		함기태 부장
	해체/절체		강재환 부장
	인력/주차통제		신일규 대리
	포장/반출		박영철 부장
	진행상황/위험상황관리		하영호 부장
	비상연락망/SMS발송		윤정윤 사원
	상면배치/케이블		강재환 부장
	반입담당		최정우 사원
	하차담당		김대승 대리
이전지원 협력사	시스템 H/W 점검	㈜본정보	박찬현 이사 외
	장비운송	베스트로직스	원성한 대표 외
	전기/통신지원	스마트파워	강종구 차장 외

5.2.3 참여자 안내 및 보안교육

■ 대상 : 이전지원 협력사(시스템 H/W 담당자)

■ 내용

- 주의사항(보안서약서 작성 포함) 및 안전교육 실시

- 비상연락망(성명/휴대폰) 재확인

- 조끼 및 임무카드 배포

5.2.4 이전개시 선언

■ 대상 : 주관기관, 이전사업자, 버스정보팀 운영 사업자, 이전지원 협력사

■ 내용 : 버스정보팀 통합DB서버 이전 개시선언

5.2.5 보양작업

■ 대상 : 이전지원 협력사(운반지원 업체)

■ 내용 : 운반로 바닥 보양 작업 실시

5.2.6 시스템 해체

■ 대상 : 이전사업자, 이전지원 협력사(전기/통신지원 업체)

■ 내용 : 서버 전원 확인 후 PDU, 리셉터클, 전원 콘센트, 네트워크 케이블 분리

5.2.7 반출 및 포장

■ 대상 : 이전사업자, 이전지원 협력사(운송지원 업체)

■ 내용 : 이전대상 장비 장비포장 Zone으로 이동

5.2.8 상차

■ 대상 : 이전사업자, 이전지원 협력사(운송지원 업체)

■ 상차 실시

1) 사전에 계획된 순서에 따라 운송차량 진입

2) 무진동차량(4.5톤)

5.2.9 운송

■ 대상 : 이전사업자, 이전지원 협력사

■ 운송은 상차 완료 후 선두차량 출발로 운송 시작(선두차량-무진동차량)

■ 배차계획

구분	운전자	선탑/동승자	차량번호	연락번호
선두	김남호 차장	강민석 PM 함기태 부장 외	51호 8618	강민석 PM : ************* 함기태 부장 : *************
무진동	최재영 부장	신일규 대리	서울 93루 8008	신일규 대리 : *************

5.2.10 보양작업

■ 대상 : 이전지원 협력사(운송지원 업체)

■ 내용 : 반입 경로 보양 작업 실시

5.2.11 하차 및 반입

■ 대상 : 이전사업자, 이전지원 협력사(운송지원 업체)

■ 하차과정 통제

1) 차량 이동 경로 및 진입로 확보

2) 지상 1층에 바닥 보양하여 에스플렉스센터 1층으로 이동 후 클라우드센터 전용 화물

E/V 이용하여 반입

3) 봉인지 확인 및 해체

5.2.12 장비 배치 및 케이블 연결

■ 대상 : 이전사업자, 이전지원 협력사(전기/통신지원 업체)

■ 내용

1) 통합DB서버 상면 배치 후 Aging

2) 선번장 확인 후 네트워크 케이블 및 전원 연결

5.2.13 시스템 점검

■ 대상 : 주관기관, 이전사업자, 버스정보팀 운영 사업자, 이전지원 협력사

■ 시스템 H/W 이상 유/무 확인

5.2.14 이전종료 선언

■ 대상 : 주관기관, 이전사업자, 버스정보팀 운영 사업자, 이전지원 협력사

■ 내용 : 버스정보팀 통합DB서버 이전 종료선언