2015 한강 몽땅 프로젝트 사업 추진상황

사업명	완료 시기	일 정														추진부서	’15년 예산 (백만원)
		1월	2월	3월	4월		5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월		12월
이촌권역 자연성 회복사업	‘16.12	착공/보도자료 제공														생태공원과	3,000
		설계용역	계약심사 설계준공	공사발주	공사착공		철거공사		수방기간 공사중지		자전거도로 이설 및 자연형 호안 조성
양화 친수공간 조성 및 운영	’15. 9	준공 물놀이장 운영개시 물놀이장 운영종료														생태공원과 공원기획과	사고이월 (376)
				물놀이장 운영방법 검토			물놀이장 운영 추진
반포 한강공원 생태공간 조성	‘15.12	3차 공사착공 3차 공사준공														생태공원과	2,100
		공사착수	콘크리트호안 철거후 사석시공						수방기간 공사중단		식물매트시공 및 산책로조성				공사준공
한강숲 조성	’15.12	여의도숲(봄) 준공 반포숲 준공 강서숲 준공 여의도숲(가을) 준공														생태공원과	2,800
	여의도		설계추진	여의도숲 봄식재						여의도숲 가을식재
	반포			설계추진	반포숲 식재
	강서				설계추진		강서숲 식재
힐링숲 조성	’15.12	전문가 자문 공사발주 준공														생태공원과	500
			계획수립 (대상지선정)	설계용역 시행				하천점용 등 절차 이행			공사 시행 및 준공
무궁화 동산 조성	’15. 7	전문가 자문 공사발주 준공														생태공원과	100
			설계추진	공사발주	공사시행				공사준공
한강공원 나들목 증설 및 개선	’18. 5	옥수나들목 준공 낙천정나들목 준공														치 수 과	7,150
	옥 수	마감공사		나들목 개통	준공
	낙천정	엘리베이터 및 마감공사						개통, 준공
	신청담
		강관제작		강관추진				수방대비				구조물공사
	개 화	공사발주를 위한 설계서 보완 작업						발주	계약 및 착수준비			착수(추진기지 설치)
여의 샛강공원 자전거 연결로	‘16. 4	공사착공														기전설비2과	6,000
			투융자 심사요청	투융자 심사	감리 및 공사발주		공사시행(기초공사, 교량상부 시설물 및 엘리베이터 제작)
서부이촌동 보행육교설치	’16.12	실시설계 용역착수 전문가 자문 주민설명희 준공														기전설비2과	200
		용역발주 서류작성	용역발주 및 착수		보도육교 재설치 실시설계용역 시행						공사발주 검토 및 준비
반포 주차장주변 교통체계 개선	’15. 9	기본 및 실시설계 용역착수 공사착공 1차준공(도로) 준공														시설관리과	1,000
			사전조사	기본 및 실시설계 용역				공 사 시 행(4개월)				보완(모니터링 포함)
한강공원 주차장 운영시스템 개선	’15.12	시범운영 개시														공원기획과	-
		관계자 협의 및 현장조사		설치프로그램 보완 및 시범시설 설치(1개소)				시범운영 및 모니터링					결과분석 및 확대추진 검토
대중교통 접근성 (버스 노선 신․증설)	’15.12	시범운영 개시														시설관리과	-
		현장조사	관련부서 협의 및 시범운영 준비		시범운영 및 관련시설 개선 등 운영 보완				시범운영 및 성수기 모니터링				결과분석 및 확대추진 검토
통합선착장	’15.11	준공														수상관리과	- (수자원공사 5,600)
		관계자협의 (수자원공사,국토부)		공론화 및 반대자설득 (여론조사, 방문설득)			설계 및 반대자설득	설치공사(수원공사 선착장 우선 설치)
관공선 셔틀	’15.12	시범운영 개시														수상관리과	50
		셔틀 운영 준비 (홍보, 준설, 안내간판설치 등)			시범운영								결과분석
수상비행기	‘16. 5															수상관리과	150
		전문가 자문 및 현장조사		타당성검토용역실시				이해관계자 등 의견수렴 투자심사		항공청 등 사전협의	예비사업자 공모,선정
											기반시설 설치 실시설계용역 실시
수륙양용버스	‘15.12															수상관리과	-
		시험운행, 사전 검토 시범운영자 공모 준비			예비사업자 공모,선정			진입로, 안내간판, 매표소 등 시설정비 및 운영 버스 확보 (제작 또는 도입기간 6개월 이상 소요)
한강 수중청소	’15.12	용역착수 준공														환 경 과	694
									용역설계 및 심사	용역발주 및 계약	수중청소용역시행			용역완료
한강 저수로 정비	’15.10	공사착수 준공														치 수 과	3,173
		설계 및 심사		계약 및 착공	공사시행								공사완료
시민이 찾기쉬운 안내판 정비	’15.10	공사발주 준공														시설관리과	200
			공사발주	현황조사	관렵부서 협의		점용허가	표지판제작	표지판설치				공사완료
한강 행복몽땅 프로젝트	’15.12	아이디어 공모 기자설명회 개막 폐막														총 무 과	498
		전문가 자문, TF 팀 구성,		기본 계획 수립‧보고	세부실행 계획수립		집중홍보 및 실행구체화	프로젝트 실행 준비	프로젝트실행		사업 평가 및 발전방안 검토				사업내역 정리
한강스토리텔링	’15.12	설치완료														문화홍보과	325
		유관기관 협의 및 추진계획수립			전문업체 선정		조형물 설치 등 사업시행						사업평가
퇴역함정 도입	’15.12	사업착수 용역착수 함정 전시														총 무 과	-
			해군본부 협의	기본계획 수립, 임대계약 체결 및 학술연구 용역			정박시설 준비 예산편성 준비(투심 등)		고속정 도입․리모델링 및 전시					호위함 도입 협의 완료
한강 수상 조형물 조성	’15.12	조형물 전시														문화홍보과	-
		유관기관 협의		공공성확보 심의	제작		설치 및 운영
열기구 도입	’15.12															공원기획과	-
			설치장소 검토 및 관려업체 협의		자문위원회 구성 및 의견수렴				국토부 등 사전협의	추진계획 수립	예비사업자 공모,선정		사업추진

사업명	완료 시기	일 정												추진부서	’15년 예산 (백만원)
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
한강 백리 꽃길 조성	’15.11	사업완료												녹지관리과		401
		대상지 조사		계획수립	계절별 꽃 식재 및 관리
한강 꽃 축제	’15.10	유채꽃 축제 개최 매밀꽃 축제 개최												문화홍보과		70
				기본계획 수립 대행사 공모	유채꽃 축제 실행계획 수립	유채꽃 축제 운영				메밀꽃 축제 실행계획 수립	메밀꽃 축제 운영
한강 청보리밭	’15.12	보도자료 시범조성 완료												녹지관리과	-
		토양조사, 기술자문	비료살포	종자파종	청보리밭 조성 (뚝섬,여의도)						종자파종 (이촌)
한강 백사장 조성	’15.11	운영개시												녹지관리과	300
		전문가 자문, 조성계획 수립				백사장 조성		백사장 운영
친환경 캠핑장	’15.12	운영개시												운 영 과	750
		현장조사	운영사 선정		실행계획 수립		집중홍보 및 점검	캠핑장 운영		결과보고 및 발전방안 검토
낚시공간 조성	’15. 8	준공												환 경 과	500
		전문가 자문		설계	실행계획 수립	공고	공사 시행 및 준공
잔교 설치 검토	‘16. 5	공사착공												수상관리과	-
		유사사례 검토	전문가 자문	설치계획 수립		투자심사	타당성 조사	예산 확보 (추경예산)		설계내역 작성	계약심사	공사시행
자전거도로 업그레이드	’15.12	준공												시설관리과	1,560
		현장조사	계약심사	공사시행									공사준공
자전거공방 설치	’15.12	운영개시												시민활동지원과	320
		전문가 자 문	세부계획 수 립	제안공모 실 시	운 영 자 선 정	시설설치	공방 운영
휴식공간 확대 (그늘막, 그늘쉼터 등)	’15. 6	준공												녹지관리과	221
		현장조사	설계 (도면작성)	공사발주	공사착공	공사시행	공사준공
강서 인공암벽장	’15. 8	준공												시설관리과	300
		설계 (도면작성)	계약심사	계약 및 착공		공사시행 및 준공
난지 풋살경기장	’15. 7	준공												녹지관리과	300
		현장조사	설계 (도면작성)	하천점용 허가 및 계약심사		공사발주 및 착공	공사시행	공사시행 및 준공
경관조명 개선	’18.12													기전설비1과	-
		투자심사 자료작성		투자심사 요청		투자심사	용역계획수립		용역 추경예산 반영 추진		용역발주
수변문화시설 운영 (물빛무대, 광진교)	’15.11	운영개시 운영종료												문화홍보과	210
		기본계획수립 및 대행사 공모		운영준비	공연대관 및 프로그램 운영							결과분석
뚝섬 자벌레 복합전시관 조성	’15.12													문화홍보과	200
				기타 운영방안 모색 및 검토․실행		기본․실시설계
생태프로그램 운영	’15.12													녹지관리과	30
		사업계획 수립	프로그램 운영										모니터링 및 결과분석
밤섬 시민참여	’15.12													환 경 과	28
				밤섬탐방 모둠 OT			밤섬둘러보기 실행계획수립	밤섬둘러보기 행사운영		시민과 함께 위해식물 제거작업
한강 문화장터	’15.11	합동장터												문화홍보과	140
		운영계획수립		지자체 당당자회의	문화장터 운영							결과보고
한강 자원봉사 운영	’15.12	액션데이 개최 자원봉사의 날												시민활동지원과	279
		현황조사	홍보	담당자교육	활동 및 운영							활동 결과분석
시민참여 생태공원 관리	’15.12													녹지관리과	-
		사업계획 수립				위해식물 제거작업 시행						모니터링 및 결과분석
거리공연 예술가	’15.12	거리공연 페스티벌												문화홍보과	64
		추진계획 수립	예술가 모집	예술가 O·T	한강 거리공연예술가 활동 및 매월 합동 공연							결과보고
한강역사탐방 프로그램 운영	’15.12													문화홍보과	-
			사업계획 수립	역사해설가 공모	역사탐방프로그램 운영								결과분석
아라호 매각 및 홍보선 활용	’15.12	팸투어 / 이클레이 밤섬투어 행복몽땅프레스투어시												수상관리과 문화홍보과	-
		매각진행						매매각 불가시 위탁, 직영 등 검토					결과분석
		기본계획 수립		운영준비	홍보선 운영
수상택시 운영 정상화	’15. 7	업체선정 운영개시												공원사업과	-
		양수자 선정((주)청해진해운)				협약서 작성	도선면허 및 도선장 이전	운영정상화
시민요트나루	’15.12													공원사업과	-
		소송대응, 재무적 검토	소송대응, 대응방안 검토,숙의	대응방안 검토숙의	소송대응 (3차변론)	대응방안 검토.숙의	1심 판결	소송결과에 따른 우리시 입장 결정	운영정상화 추진