문서번호	공원녹지정책과-2047
결재일자	2016.2.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	공원관리팀장	공원녹지정책과장	푸른도시국장

무장애 친화공원 조성사업 추진계획

2016. 2.

푸 른 도 시 국

(공원녹지정책과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	■	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	■	□	사업시행, 준공시 보도자료 작성
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

무장애 친화공원 조성 사업 추진계획

장애인, 노인, 영유아 동반자 등 교통 약자를 포함한 모든 사람들이 공원을 편하고 안전하게 이용할 수 있도록 장애요소를 최소화하고 공원 환경을 정비하여 시민들의 삶의 질 향상에 기여하고자 함

1		추진 배경 및 목표

□ 장애인과 비 장애인, 일반인과 교통약자의 구분 없이 누구나 안전하고      편리하게 살아갈 수 있는 장애물 없는 생활환경 (Barrier Free) 구축에      대한 필요성 증대

□ 대형수목, 많은 시설물들이 위치하고 평지와 경사가 혼재하는 공원의      특성을 감안, 공원의 장애요소를 최소화하고 이용에 편리하게          정비하는 「무장애 친화 공원」으로 조성

2		추 진 경 위

□ ’12. 2 ~ ’13. 2 : 여의도공원 무장애공원 조성

□ ’13. 1 ~  ’14. 6 : 보라매공원 무장애친화공원 조성

<무장애 공원에서 무장애 친화공원으로 추진 방향 변경 >

∘ 무장애공원 BF인증 관련, 전문가 자문 등을 거쳐 공원 여건, 절차 등을 검토한 바, 보라매공원 면적이 42만㎡가 넘는 대형공원으로, 평지와 경사지가 혼재하고 급경사가 많으며, BF인증을 위해서는 매점 및 독서실의 개축이 필요한 사항으로,

∘ 타당성 조사결과, BF인증을 위해서는 사업비가 160억이 필요하여 공원 내 장애 요소를   최소화하는 ’무장애 친화공원 조성사업’으로 변경 추진

□ ’14. 2 ~  ’15. 4 : 무장애친화공원 조성 기본 계획 용역 시행

시 공원을 대상으로 대상지 입지적 요건, 공원 내 주요 시설,              이용계층 등을 분석하여 공원별 기본 방향 설정 및 지침 수립

구분	용역대상	용역제외
계	17개소	5개소
동부 (5개소)	서울숲, 응봉, 천호, 시민의 숲, 길동생태공원	보라매공원(2013 시행)
중부 (7개소)	남산, 훈련원, 용산, 중랑캠핑숲, 간데메, 서울창포원, 북서울꿈의숲	낙산공원(산지형공원)
서부 (4개소)	월드컵, 독립, 서서울호수, 선유도공원	여의도공원(2012 시행), 푸른수목원(신규 조성)
시설관리공단 (1개소)	어린이대공원
서울대공원		서울대공원(혁신계획 수립중)

□ ’15.  8.       : 무장애 친화공원 조성 사업 투자심사 이행 (결과: 적정)

□ ’15.  1 ~  현재 : 월드컵공원(평화의공원) 무장애 친화공원 조성 중

3		추 진 방 향

□ 공원 여건, 시설 현황 등을 고려한 개선 계획

새로운 BF 시설의 추가 보다는 기존 장애물을 우선 제거

무리한 개선, 정비 보다는 기존 기능성과 경관성을 유지하면서 부분적 개선 또는 차선책 고려

□ 장애 유무에 관계없이 누구나 편리하게 이용할 수 있도록 계획

공원 내 모든 시설은 장애인과 비 장애인이 함께 이용 가능한 통합시설로 계획

통합시설 도입이 한정적인 경우, 교통약자를 위한 안내시설 설치

□ 무장애를 위한 다양한 해결 방법 제시

경사로, 수직리프트, 승강기 등의 다양한 방법 도출

물리적 개선이 불가능한 경우 인적서비스 활용

4		사 업 개 요

□ 사업기간 : 2012 ~ 2022년

□ 총 사업비 : 11,760백만원 (※ 무장애 친화공원 기본 계획 용역비 465백만원 포함)

□ 대 상 지 : 여의도 공원 등 총 18개소 <붙임 1 참조>

□ 사업내용

접근성 개선

- 포장 단차 제거, 경사로 설치, 점자 블록 정비, 안내체계 개선 등

편의성 증진

- 화장실 시설 개선, 포켓 쉼터 설치, 통합 안내판 설치, 음수대 정비 등

이용성 도모 : 통합 휴게시설, 놀이시설, 오감체험시설 등

안전성 개선 : 안전턱, 라인마킹, 안전난간 등

5		2016 사 업 계 획

□ 사업개요

위    치 : 천호공원, 월드컵공원 하늘·노을·난지천공원

사업규모 : 약 4,000㎡ (천호 약1,000㎡, 월드컵 약3,000㎡)

※ 공원면적 : 천호공원 26,697㎡, 하늘·노을·난지천공원 1,915,575㎡

사 업 비 : 921백만원 (천호 : 228, 월드컵 693)

사업내용

- 천호공원 : 휴게, 전망 공간 개선, 트렌치 덮개, 점자블록 교체 등

<휠체어 이용이 가능한 야외테이블>          <휠체어 접근이 용이한 데크포장>

- 월드컵공원 :안전턱 설치, 전망대 접근램프 개선, 화장실 시설개선, 휠체어그네 설치 등

<보행로와 구분된 휴게공간 조성>                   <휠체어 그네>

□ 추진일정

’16. 1 ~2월  : 계획 수립 및 시달, 기술용역 타당성 심의

’16. 3~ 7월  : 설계 용역 시행, 공사 발주

’16. 9~12월 : 공사 시행 및 준공

□ 예산과목 : 공원녹지정책과, 공원 녹지정책개발 및 만족도 개선

시민참여 프로그램 운영, 무장애 친화공원 조성, 시설비

6		행 정 사 항

□ 사업비 배정 및 전문가 자문 회의 등 실시 (공원녹지정책과)

□ 설계 및 공사시행(동부, 서부공원녹지사업소)

붙  임 : 1. 연차별 사업 추진 계획(안) 1부.

2. 서울시 무장애 친화공원 조성 세부 지침 1부.  끝.