청년공간 무중력지대 설치

(청년정책담당관/서대문구 일자리경제과)

□ 사업개요

◦위치 : ‘舊 안산치안센터’ 및 ‘신지식산업센터’

구분	조성부지	활용면적	소유권	현재용도
무악재	통일로 358-1(舊 안산치안센터)	133.49㎡(지상4층)	구	공 실
홍제	통일로 484(신지식산업센터)	316.8㎡(유진상가2층)	시	근로자복지센터

◦기간 : 2017.12.11. ～ 2018.05.08.(0%)

◦사업비 : 560,000천원(2017년)

□ 명시이월·사고이월 세부내역

(단위 : 원)

구 분		재배정액	원인행위액	지 출 액	사 고 이 월 액	명시이월액	집행잔액
계		560,000,000	314,897,800	15,630,000	299,267,800	100,000,000	245,102,200
사무관리비		40,000,000	9,970,000	800,000	9,170,000		30,030,000
공공운영비		50,000,000	0	0			50,000,000
시설비		350,000,000	300,375,500	14,830,000	285,545,500		49,624,500
	도 급 비		281,914,490	14,830,000	267,084,490
	관 급 비		18,461,010	0	18,461,010
감 리 비		20,000,000	4,552,300	0	4,552,300		15,447,700
자산및물품취득비		100,000,000	0	0		100,000,000

□ 2018 예산 재배정 요구 세부내역

(단위 : 원)

통계목	세부내용	설치장소	소요액	비 고
계			130,000,000
시설비	전기·소방공사	홍제	74,951,000
	CCTV 및 출입관리설비 설치공사	무악재, 홍제	5,049,000
	AV설비 구매	무악재, 홍제	20,000,000
	화장실 신규설치공사	홍제	20,000,000
감리비	무중력지대 홍제 건축감리	홍제	10,000,000

※ 빔프로젝트(3set) 등 정수물품 사전 사용승인 요망

청년공간 무중력지대 설치 운영

(청년정책담당관/양천구 기획예산과)

□ 사업개요

◦위치 : 양천구 목동 404-1

◦규모 : 지상 1층, 연면적 214.9

◦기간 : 2017.9.11.~ 2018.2.7.

◦총사업비 : 700,000천원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 청년거버넌스 활성화 및 자립기반 조성, 청년공간 무중력지대 설치,                   일반운영비(사무관리비)/시설비및부대비[시설비(감리비)]

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '16이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		700,000,000	700,000,000	502,867,370	221,521,750	281,345,620 (0)	197,132,630
사무관리비		70,000,000	70,000,000	14,676,240	1,707,240	12,969,000 (0)	55,323,760
공공운영비		20,000,000	20,000,000	0	0	0 (0)	20,000,000
시 설 비		500,000,000	500,000,000	482,681,130	219,814,510	262,866,620 (0)	17,318,870
	도 급 비			453,622,900	212,638,900	240,984,000 (0)
	관 급 비			29,058,230	7,175,610	21,882,620 (0)
감 리 비		20,000,000	20,000,000	5,510,000	0	5,510,000 (0)	14,490,000
자산 및 물품취 득 비		90,000,000	90,000,000	0	0	0 (0)	90,000,000

◦이월사유

- 무중력지대 조성 부지 내 지중 매설된 상·하수도관 이설에 따른 착공지연

- 착공 후 한전지중선 매설에 따른 건축설계 변경

- 원인행위미필액은 12,969,000원(간판, 내무 사인물 제작비)로 12월 중으로 원인행위 완료예정

청년공간 무중력지대 성북 설치

(청년정책담당관/성북구 일자리경제과)

□ 사업개요

◦위    치 : 성북구 동선동 5가 147-10(1필지)

◦기    간 : 2017.11.15. ～ 2018.02.22.

◦총사업비 : 494,000천원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 청년거버넌스 활성화 및 자립기반 조성, 청년공간 무중력지대 설치 및 운영(동북권-주민참여), 시설비및부대비[시설비]/자산취득비[자산및물품취득비]

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '16이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		494,000,000	494,000,000	405,565,450	72,283,640	329,759,810 (0)	91,955,550
사무관리비		94,000,000	94,000,000	8,172,800	8,172,800	0 (0)	85,827,200
시설비		294,000,000	294,000,000	293,897,350	64,110,840	229,786,510 (0)	102,650
	도 급 비			254,401,170	58,580,170	( )
	관 급 비			39,496,180	5,530,670	( )
감리비		6,000,000	6,000,000	3,521,000	0	0 (0)	6,000,000
자산및물품취득비		100,000,000	100,000,000	99,974,300	0	99,974,300 (0)	25,700

◦이월사유

- 무중력지대 성북은 ’16년 주민참여 예산사업(’16년 편성예산 500백만원)으로 선정되어 당초 성북구가 부지(공간)를 제공하고 시가 공간 리모델링 및 운영 예산을 분담하여 설치를 추진하였으나, 당초 공간(하월곡동 22번지, 진각종재단과 성북구청간 장기무상임대 제공 협약체결)에 대한 쌍방 최종 협의가 중단됨에 따라 대체부지 마련 및 변경계획 수립 등으로 설계 및 공사일정이 지연되어 명시이월함.

- 이후 ’17년 설치․운영 변경계획 수립 및  신축공사를 추진하여 ’17년 12월 개관 예정이었으나, 성북구·성북구 지역청년(단체)의 의견수렴을 통한 대체부지 신축 설계안 마련 및 기존 주민편의시설 이전에 대한 주민설명회 진행 등 지역주민과의 원만한 협의 도출 과정이 지연되어 부득이하게 사고이월을 추진함

- 주민편의시설 철거비용 증가에 따른 설계변경(원인행위미필액35,289천원) 및 책상·컴퓨터 등 자산구매비(원인행위미필액53,691천원)등에 대하여 12월 중에 원인행위 완료 예정