문화재보수정비 국고보조사업(방충사업) 추진 계획서

Ⅰ	보조금 개요

□ 사업주체   : 서울역사박물관장

□ 사업내용

ㅇ 사업기간 : 2014년도

ㅇ 사업대상 : 경희궁지 사적제 271호

ㅇ 사업내용 : 숭정전 서월랑 외부에 토양처리 실시, 경희궁지 서측 및 북측 담장 외부에 군체제거 설치하여 경희궁지 내부로 유입되는 흰개미를 차단하고, 목부재 흰개미 방제처리 및 방충부재를 도포하여 흰개미에 의해 피해 차단

□ 사 업 비

(단위 : 천원)

사 업 명	총 사 업 비					보조금 신청액	비 고
	계	국비	시비	군비	자부담
경희궁지	50,000	25,000	25,000	-	-	-

Ⅱ	사업부진 사유

□ 부진사유

ㅇ 국고보조사업비 문화재청 사전통지(2013. 10월)  대상에는 경희궁  방충ㆍ방부처리 사업비가 배정되지 않았으며, 그 후 2014. 1월 사업비(국비) 확정통보 받으므로서 시비를 확보하지 못하였음

ㅇ 2014. 10월 시비 확보 배정 받아 사업 시행

□ 만회대책

ㅇ 공사 입찰 공고중으로 시행업체가 선정되면 2014. 11월 사업완료

Ⅲ	사업추진

□ 사업개요

ㅇ 사 업 명 : 경희궁지 전역 방충ㆍ방부처리

ㅇ 사 업 비 : 국비, 지방비(세분화)

ㅇ 사업내용 : 토양처리 76㎡, 군체제거시스템 설치 260m, 130개소(1개소/2m)

목부재 흰개미 방제처리 298.87㎡, 방충방부제 도포 298.㎡

□ 추진현황

ㅇ 사업계획수립 방침 (2014. 8.11)

ㅇ 방충ㆍ방부처리 설계용역 시행완료 (2014. 8.18~9.26)

ㅇ 설계승인 심사요청 (문화재청,(시)역사문화재과 2014. 9.19)

ㅇ 설계승인 회신(문화재청 2014. 9.26)

ㅇ (시비)예산배정(2014.10. 8)

ㅇ 공사 발주 및 입찰공고(2014.10.13)

※ 개찰결과 (2014.10.20.) 낙찰 하한가로 유찰

재 입찰공고 진행중(20014. 10.20 ~ 24)

□ 추진계획

ㅇ 사업 시공사 선정(2014.10.24.)되는데로 사업 시행

ㅇ 2014. 11월중 사업완료