[붙임1]
물가변동으로 인한 계약금액 조정에 대한 종합의견서
1. 일반 현황
수요기관		서울특별시					공사명		구리암사대교 건설 전기공사(4회)
계약방법		일반경쟁					계약자		모범전설								낙찰률		85.495%
기술부서		업무부					담당자		이동진				전화 : 02-3443-3003						FAX : 02-3443-3002
계약현황		총공사 계약현황											시공중인 공사 계약현황
		계약일		2010-07-22			계약금액		5,476,649,000				계약일			2014-06-24			계약금액			739,007,000
		착공일		2014-01-27			준공예정일		2015-12-17				착공일			2014-07-01			준공예정일			2015-06-30
물가변동 조정현황		조정회수				1 회				2 회				3 회						4 회
		조정방법				지 수 조 정 률				지 수 조 정 률				지 수 조 정 률						지 수 조 정 률
		조정기준일				2011년 1월 1일				2011년 4월 30일				2012년 2월 29일						2014년 9월 1일
		조정률				3.31%				3.21%				3.21%						3.39%
		조정금액				85,482,000 원				53,655,000 원				21,633,000 원						10,112,000 원
2. 물가변동으로 인한 계약금액 조정 신청현황
물가변동 조정률(A)		3.39%			물가변동 경과기간		914 일				계약체결일 :						2010년 7월 22일
											입찰일(기준시점) :						2012년 2월 29일
											조정기준일(비교시점) :						2014년 9월 1일
물가변동대상공사의 계약금액(B)					5,476,649,000원						물가변동조정기준일 현재의공정률						예정 공정률				70.02%
																	실행 공정률				65.37%
물가변동적용제외 계약금액(C)					5,178,331,000원						물가변동적용대가[D] ( B - C = D )						298,318,000원
선금급공제금액[F] (D×A×E=F)					0원						물가변동등락대상조정 금액[G] ( A × D = G )						10,112,000원
경유세 공제금액 [H]					0원						물가변동조정적용금액 =(G-F-H)						10,112,000원
3. 물가변동으로 인한 계약금액 조정 검토 첨부서류
번호		첨부 서 류 명																부 수			비 고
1		물가변동으로 인한 계약금액 조정 내역 총괄표(프로그램 데이터 포함)																			붙임 2 참조
2		물가변동으로 인한 계약금액 조정 산출근거(프로그램 데이터 포함)																			붙임 3~11 참조
3		물가변동으로 인한 계약금액 조정 참고자료																			붙임 12 참조
4. 물가변동으로 인한 계약금액 조정 종합의견
1. 위 공사에 대한 물가변동으로 인한 계약금액 조정 검토 첨부자료의 프로그램 내용은 입찰당시 (직전 물가변동조정 당시)의 물가변동 기초자료의 내용과 부합됨을 확인하였으며, 물가변동자료의 오류ㆍ변조ㆍ위조ㆍ불일치 등의 문제가 있는 경우에 발생되는 모든 문제는 한국경제개발연구원에서 책임을 질 것이며
2. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제22조 및 동법률시행령 제73조, 동법시행규칙 제72조와 계약예규에 따라 물가변동으로 인한 계약금액의 조정률을 검토한바 3%이상 상승하였으며,물가변동 조정 경과기간도 90일이상 경과한 것을 확인하고, 귀청에 물가변동으로 인한 계약금액조정의 적정성을 사전 검토하여 줄 것을 요청합니다.
																	2015년 6 월
																	기관명: 도시기반시설본부
주) 1. 물가변동 조정 대상공사가 2건이상인 경우 그 내용을 별지에 작성하고 합계금액을 해당란에 기재하십시오
2. 물가변동 대상공사가 장기계속공사인 경우에 물가변동 대상 계약금액은 총공사 부기금액을 기준으로 합니다.