물량변경 사유서

◉ 건    명 : 아스팔트콘크리트(2014년 노후포장도로 정비공사B구역)관급자재 구매-남부

◉ 계약기간 : 2014.05.15 ～ 2015. 2.28

◉ 계 약 자 : (주)드림아스콘  대표 서정윤

◉ 변경사유 : 하반기 노후포장 정비예산 배정에 따른 추가 포장공사 시행으로 관급자재(스팔트콘크리트) 물량 증가

- 아스팔트콘크리트 별도 구매 시 발주·계약 및 플랜트·자재 사전검사 등 많은 시간(1개월 이상)이 소요되어 기온 하강에 따른 공사 품질확보가 어렵고,

- 노후포장 정비가 늦어져 도로파손으로 인한 민원발생 우려가 있어 부득이 물량을 변경하여 공사를 조속히 시행코자 함

◉ 주요 변경내역

구 분	단위	수 량		증․감	비고
		당 초	변 경
아스팔트콘크리트	일반	9,979	13,176	증 3,197
	개질	407	911	증 504