문서번호	기전과-6151
결재일자	2015.6.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	서부도로사업소장
협조	관리단속과장
	주무관

물품 납품 기간 연장 계획

(남산1호터널 수배전반 제작구매 설치)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 6

서부도로사업소

(기전과)

물품 납품 기간 연장 계획

(남산1호터널 수배전반 제작구매 설치)

남산1호터널 수배전반제작구매 설치 관급자재 납품을 아래와 같은 사유로 납품 기간을 연장코자 함.

□ 납품개요

○ 납 품 명 : 남산1호 터널 수배전반제작구매 설치

○ 납품기간 : 2015. 6. 3 ~ 2015. 6.28

○ 시 공 사 : **************

○ 계약금액 : 155,000,000원

□ 관련문서

○ 대신 제 15-019(2015.6.12)호

□ 보고내용 및 대책

보고 내용	대 책
조달청 시담 및 계약 중 변압기반 추가 제작 설치되어 절대 공기 부족	변압기반 제작 설치 기간을 더 연장하여 물품제작 설치에 문제점이 없도록 하고자 함

□ 문제점 및 대책

○ 물품 제작 납품 설치 기간이 2015.6.28.일까지로, 관급 자재 중 변압

기반이 도면에는 미 포함 되었으나, 내역에는 포함되어 조달청 담당자

와 전화 통화 중 변압기반을 추가로 포함 시켜 변압기반을 제작 설치

토록 하였는바 변압기반 제작 설치 기간이 추가로 소요되어 납품 설치

기간을 연장시키고자 함.

□ 공사기간 변경 검토

제작 설치 기간		변경사유
당초	변경
2015.6.3. ~ 6.28	2015.6.3. ~ 7.15	변압기반 추가 설치로 인하여 제작 구매 설치 기간 절대 부족

□ 보고자 의견

○ 관급자재 변압기반의 추가 설치에 따른 납품기한의 연장이 절대적으로 필요하여 납품 기한을 2015. 7.15일까지 연장코자 함.

따로붙임 : 관련 문서 1부.   끝.