(주)도화엔지니어링 (주)제일종합건축사사무소	감 리 검 토 의 견 서	2015. 4.
사 업 명	구리암사대교연결도로 건설공사	검토자	김윤호
검 토 건 명	미끄럼방지포장 검토

1. 개요

o 정수장사거리 ~ 훈련원사거리(명덕초등학교) 교통소통대책과 관련 서울지방경찰청        교통규제심의 결과에 따라 미끄럼방지포장 설

치 공사에 대하여 검토함

o 기존현황

명덕초등학생들의 안전을 위해 당초부터 설치되어있던 시설(상, 하행 8개소)을         변경되는 도로조성 현황에 따라 원상복구 하기 위해 재설치하는 것임.

* 관련근거(도시기반시설본부-14-42854)

- 2014. 11. 03 : 공사중 교통처리계획 변경 설치 통보 알림

미끄럼방지포장 구간

2. 시공현황

가. 개요

o 설치위치

정수장사거리~ 훈련원사거리간 상, 하행선

o 설치규모

횡단보도 4개소 전, 후방에 설치 A = 4,817㎡

나. 설치기준

o 설치재료 : 아스팔트콘크리트에 사용되는 수지계표면처리

o 재료 적용기준 : 별첨범위 이상 재료

* 도로안전시설 설치 및 관리지침『제4편 기타안전시설 : 미끄럼방지포장』

다. 설치위치

아남아파트

명덕초등학교

직업훈련원

롯  데  케  슬  아  파  트

정수장

사거리

훈련원

사거리

범 례
미끄럼방지포장
수량(㎡)	4,817

3. 미끄럼방지포장 단가적용 검토

가. 시공사 요청내용

o 시공사는 조달청에 등록된 우수제품업체 단가를 적용하여 실정보고 하였음.

* 유지관리부서(강동구청)에서도 우수제품 사용을 요청하였음.

나. 단가조사 결과

o 미끄럼방지 포장재는 조달청에 등록된 업체가 많으며(약 106 여개), 단가는     다양하게 제시되어 있어 어느 제품을 특정하여 지정할 수 없는 실정 임.

* 재질은 대부분 수지계표면처리 재료인 제강슬래그를 적용하였음

o 서울시에서는 도로 및 시설물 유지보수공사 설계지침(도시안전본부‘15)에             의거 미끄럼방지 포장재 단가를 적용하고 있으나 조달청보다 다소 고가 임.

* 서울시 단가 산출

- 국도건설공사 설계실무요령 (국토교통부 ‘13.5)

: 건설공사 표준품셈 12-6-6 미끄럼방지공 참조

- 도로 및 시설물 유지보수공사 설계지침 (서울특별시 도시안전본부 ‘15)

: “국도건설공사 설계실무요령”적용

o 미끄럼방지 포장재는 조달청 등록업체도 국토교통부 관련기준에 적합하므로            조달청 등록업체 단가를 적용함이 경제성에서 유리한 것으로 판단 됨.

* 관련기준 : 국토교통부 “도로안전시설 설치 및 관리지침”

다. 단가적용 검토: 서울시와 조달청 단가 비교

(단위 :원)

구 분	서울시 단가	조달청 단가		비 고
		최저가	최고가
금 액	52,136	31,800	37,200	시공비 포함

* 경제성에 유리한 제강슬래그 단가(52,136원/㎡) 적용

라. 계약단가 단가적용 방안 검토

구분	도급자 계약	조달청 계약
장, 단점	ㆍ공사 시공관리 효율적 ㆍ하자 발생시 책임소재 분명 - 원도급자 포장하자 전반 책임	ㆍ지속적인 하자 관리 : 발주처 (조달업체: 하자보증서 제출) . 다수업체 제품선정 곤란 . 입찰, 계약체결 및 시공준비에 다소 시공기간 소요 및 시공 시 업간체 협의에 혼선 우려
단가적용	ㆍ조달청 단가 반영	. 조달청 계약단가 또는 입찰시행 단가 적용 / 입찰 및 계약기간 추가필요 - 계약기간 다소 필요

4. 검토의견

〇 미끄럼방지포장 단가적용은 경제성을 고려 서울시 품셈기준의 단가보다 조달청에     등재된 제품 중 최저가격으로 제시된 단가로 공사비를 산출하며

〇 도급자인 (주)신성건설은 조달공사비 내에서 공사 시행에 대한 의사를 표명한 바      국토교통부 “도로안전시설 설치 및 관리지침”에 제시된 시방기준에 의거 우선      공사를 시행토록하고

〇 추후 설계변경 시 반영토록 함

〇 공사비 산출 : 153,180,000원을 공사비로 반영(제경비포함)

※ 조달청 발주금액 산정 방법

: (수량×단가) = 4,817㎡×31,800원 ≒ 153,180,000원

붙임 : 1) 공사전 미끄럼방지포장 설치 현황사진

2) 조달청 등록 단가 조사

3) 도로 및 시설물 유지보수공사 설계지침(서울시) 일위대가표

4) 관련공문

『 업무연락전 14-42854 (‘14.11.3), 서울지방경찰청 교통관리과-30192(’14.10.30),

강동구 도로과-6226(‘15.3.31), 신성암사 제2015-66 (‘15.3.12)』

5) 기타 참고 관련자료

책임감리원  우 재 경 (인)