민선6기 안내표지판 정비 세부추진계획

(문화체육관광본부/한양도성도감)

Ⅰ		안내표지판 현황 및 추진실적

□ 부서별 안내표지판 관리실태(현황)

❍  한양도성 주변 안내표지판

표지판 종류	현재수량 (개)	정비대상(개)			비 고
		계	신설	보수
길표지판	219	219		219	디자인마련중
문안설명판	52	52		52
지도안내판	53	53		53
기 타(위험표지등)	38	38		38
추가신설(예상)	70	70	70
총 계	432

□ 그동안 추진실적

❍  `13. 7 ~ `13. 12 : 디자인 개선안 마련(한양도성자문위원회2회, 서울디자인위원회 2회)

❍  `14. 1. 3 : 시장보고 (민간재단과 협업하여 디자인 보완 요청)

* 아름지기 재단 참여, 디자인 보완 추진

❍  `14. 4.30 : 시장보고 (디자인 추가 보완 요청)

❍  `14. 9.18 : 시장보고 (관련 전문가 의견을 모아 추진)

❍  `14. 10 : 한양도성 자문위원회 자문 (원형안내판 디자인 보완 필요)

❍  `14. 12 ~ `15.2 : 낙서금지, 성벽 계측관리 등 이용안내판 시범설치

Ⅱ		추진상 문제점 및 장애요인

□ 완성도 높은 디자인 마련에 다소 시간이 소요됨

❍  `14.1 ~ 9(3회) 시장보고결과, 안내판은 한양도성을 소개하는 중요한 시설로 완성도 높은 디자인 마련이 요구됨에 따라 디자인 개발에 시간 소요

❍  전문가 자문결과, 원형 길표지판의 경우 추가로 디자인 보완이 요구되어 현재 아름지기 재단에서 디자인 보완 진행중

Ⅲ		‘15년 사업계획

□ 2015년 분기별 정비계획

❍ 사업비 :   442백만원  (`14년 명시이월: 226백만원, `15년 : 216백만원)

구 분	목표수량	1/4	2/4	3/4	4/4	예산액(천원)
소 계					250	442,000
신 설					20	100,000
정 비					230	342,000

□ 세부 추진사항

❍  명칭변경 수정, 정확한 설명정보 제공

- “서울성곽” → “서울 한양도성” (2011.7 문화재청 변경고시)

❍ 서로 다른 재질, 색상, 형태로 되어있는 기존 안내판 디자인 개선

❍ 불필요한 안내판 제거, 멸실구간 및 단절구간 신설 등

Ⅳ		민선6기 연차별 사업계획

구 분	현황
		합계	‘13	’14	’15	’16	’17	’18
연차별 목표 및 실적	442	442	0	53	250	129	5	5
사업비 (백만원)	782	782	0	100	442	200	20	20