			박상구 의원 (도시계획관리위원회, 더불어민주당)
□ 요구번호 :	1898	번
□ 요구내용
사업별 개요(방침서 별첨), 추진현황, 향후계획, 소관부서 담당자 성명 및 연락처, 예산현황(국비/시비/구비 구분, 사업비 산출내역 포함) #지역발전본부(4건) 1. 마곡산업단지 글로벌 네트워크 구축 및 협력사업 추진(강서구 마곡동) 2. 마곡산업단지 공공지원센터 건립(강서구 마곡동) 3. 마곡산업단지 산학연 M-융합캠퍼스 조성(강서구 마곡동) 4. 마곡 문화거리 조성 기본계획 수립 (강서구 마곡동)

1		마곡산업단지 글로벌 네트워크 구축 및 협력사업 추진

□ 사업개요

○ 사업내용

- 마곡산업단지에 관심 있는 글로벌기업 타깃마케팅 실시 및 홍보

- 해외 첨단산업박람회 참가를 통한 홍보관 운영 및 관심기업 발굴

- 해외 유수 산업클러스터 방문을 통한 단지 활성화 인프라 벤치마킹

○ 총사업비: 40백만원                                     (단위: 백만원)

계	시비	산출내역
40	40	- 마곡산업단지 홍보 브로셔(영문 등) 제작 4.5 통역 및 해외 박람회 참가 6 해외기업, 기관 유치 광고 9.5 해외 글로벌 R&D 센터 협력행사 등 참가 10 글로벌 투자자 유치홍보여비 10

□ 추진현황

○ 프랑스 MIPIM 부동산박람회 참가를 통한 마곡 홍보마케팅('19.3)

○ 덴마크 바이오 관련 기업 크리오(cryo)사 면담('19.4)

○ 싱가폴 공공창업보육시설 블록 71(Block71) 면담('19.5)

○ 한국연구재단 해외연구기관 유치 관련 협력사업 협의('19.5)

○ 해외 공공연구기관(6개) 유치 및 협력사업 발굴을 위한 서한 발송('19.6)

○ 클러스터 및 산업단지 관리기구 등 유럽선진기관 벤치마킹('19.7)

○ 주한영국상공회의소 디렉토리 광고('19.8)

○ 외국어 홍보 브로셔(영문, 중문) 제작('19.9)

○「2019 월드스마트시티 엑스포」홍보부스 운영('19.9)

□ 향후계획

○ '19.10.   호주 주정부의 도시개발사업 벤치마킹을 위한 마곡 방문

○ '19.11.   해외 공공연구 및 지원기관 대상 홍보 서한 추가 발송

작 성 자	서남권사업과장 : 오희선 ☎2133-1510 사업관리팀장 : 강계표☎1530 담당 : 김경희 ☎1531

2		마곡산업단지 공공지원센터 건립

□ 사업개요

○ 위치·규모: D28-2필지 / 연면적 21,425㎡(지하4층, 지상8층)

○ 사업기간: '14.12. ~ '21. 5.

○ 주요시설 : 강소․창업기업 입주공간(70개), R&D창업기업 육성공간, 국제회의실, 홍보전시관, 기업지원시설 등

○ 기  능: 강소기업 연구공간, 지원시설, 산단관리

○ 총사업비: 76,005백만원                               (단위: 백만원)

계	시비	공공기여	산출내역
76,005	64,605	11,400 (토지)	- 시설비 61,107, 토지비 11,400 - 연구용역비 166, 감리비 3,200 - 시설부대비 132

□ 추진현항

○ '15. ~ '18. 7.	타당성조사 및 기본계획 수립, 투자심사, 설계완료

○ '18. 8.	공사 착공, 시설 운영 및 기업지원 방안 연구용역

○ '19. 5.	운영방안 전문가 자문 및 M-밸리 포럼 시 의견 수렴

○ '19. 8	지하층 터파기 공사 및 지열공사 완료

○ '19. 9.~	지하층(4개층) 바닥 타설공사 중

□ 향후계획

○ '19.12.	운영계획 수립(운영주체 선정안 포함)

○ '20.	운영자 선정, 운영준비 TF구성․활동, 세부 운영계획 확정

○ '21.	내부공간 구성, 입주기업 모집, 준공(5월), 개관(7월)

작 성 자	서남권사업과장 : 오희선 ☎2133-1510 사업기획팀장 : 김태진☎1512 담당 : 엄주호 ☎1513

3		마곡산업단지 산학연 M-융합캠퍼스 조성

□ 사업개요

○ 위    치: 산업시설용지 D29-2, 3(4,495㎡)

○ 규    모: 지하4층 / 지상6층, 연면적 약 26,000㎡

○ 사업기간: '18. 3. ～ '24. 12.

○ 시    설: 연구공간, 기술이전센터, 강의실, 실습실, 도서관 등

○ 운    영: 맞춤형 기술교육 등 산학연 협력 R&D 인재 양성

○ 총사업비: 약 92,600백만원                              (단위: 백만원)

계	시비	공공기여	산출내역
92,600	78,000	14,600 (토지)	- 공사비 68,200, 토지비 14,600 - 용역비 2,000, 부가세 7,800

□ 추진현황

○ '19. 2.~8.	M-융합캠퍼스 관련 기관 방문 협의

- 한국과학기술연구원(KIST), 과학기술연합대학원대학(UST), 고려대, 한양대 등

○ '19. 4.	기본구상 및 타당성조사 용역 착수

○ '19. 7.15~23	해외 선진사례 벤치마킹 공무국외출장

- 독일 아들러스호프, 스웨덴 시스타 사이언스 파크 등 방문

○ '19. 7.∼8.	기본구상 및 타당성조사 용역 중간보고

- M-융합캠퍼스 역할과 기능, 학위 및 교육과정, 운영 주체 등 검토

○ '19. 8.	지방투자사업관리센터(LIMAC) 타당성조사 의뢰

□ 향후계획

○ '19. 9.～'20. 4.	지방투자사업관리센터(LIMAC) 타당성조사

○ '20.～'21.	투자심사, 기본 및 실시 설계, 대학원 및 연구소 유치

○ '22.～'24.	착공 및 준공(’25년 이후 운영)

담 당 자	서남권사업과장 : 오희선 ☎2133-1510 정책지원팀장 : 신흥교☎1519 담당 : 정윤정 ☎1520

4		마곡 문화거리 조성 기본계획 수립

□ 사업개요

○ 용 역 명 :「마곡지구 문화거리 조성 기본계획 수립」연구용역

○ 사업기간 : '19. 11. ~ '20. 6.(계약일로부터 8개월)

○ 용역범위

- (가칭)마곡 문화거리(5호선 발산역 ~ 마곡역 약 1,000m 연결녹지 구간)

- 강서구 마곡지구 일대 전지역

○ 주요 과업내용

- 마곡 문화거리 현황 조사, 사업여건 분석 등 기본계획 수립

- 마곡지구와 강서구 내 문화시설이 연계된 테마거리 발굴 및 설계안 제시

- 마곡지구 문화 활성화를 위한 거리연계 방안 제안

- 사업시행계획 수립 및 기대효과 분석

○ 계약방법 : 제한경쟁입찰(협상에 의한 계약)

○ 사 업 비 : 150백만원                                    (단위: 백만원)

계	시비	산출내역
150	150	- 용역비 148백만원, 심사수당 2백만원

□ 추진현황

○ '19. 6월말	'19년 제1차 추가경정예산 편성(자치단체자본보조비)

○ '19. 9. 9	지방보조금 교부(市 → 강서구청 문화체육과)

○ '19. 9.19	용역 수행과업 조정을 위한 관계자(마곡상가단) 회의 개최(강서구)

○ '19. 9.27	용역 추진계획 방침 수립(구청장 방침서 별첨)

□ 향후계획

○ '19. 9월말	문화거리 조성 기본계획 연구용역 일상감사 의뢰(감사담당관)

○ '19.10.~11.	연구용역 입찰공고/제안서 평가 및 계약체결(문화체육과)

○ '19.11.~'20. 6.	연구용역 수행(문화체육과)

※ 소관부서 : 강서구청(문화체육과)

구 분	문화체육과장	문화시설팀장	담당자
서 명	신 현 영	주 미 정	방 승 억
연락처	2600-6067	2600-6606	2600-6071

작 성 자	서남권사업과장 : 오희선 ☎2133-1510 개발계획팀장 : 이기호☎1535 담당 : 안동국 ☎1535