반포 덮개공원 사업수행 절차

□ 시행절차

도시계획시설 결정		현상공모
공동주택과		도시공간개선단

	기본 및 실시설계		공사시행
	한강사업본부(24개월)		한강사업본부(36개월)

※ 망원 초록길 조성 사업  기본 및 실시설계용역(‘09.8.5 ~ ‘11.2.22. 19개월)

□ 기본 및 실시설계 단계별 구분

단   계

과 업 수 행 계 획

추  진  방  향

성과품

1단계

	과업착수 현황조사		･착수보고 ･관련계획 수집 및 검토 ･노선주변 일반현황, 수문및하천등 각종조사 ･교통량조사 분석·평가

	착수보고 및 계획서제출		･착수계 제출 ･현황조사 반영 노선 검토후 착수보고 ･과업수행계획서 작성 ･교통성검토서 작성

	①착수계 ②과업수행 계획서 ③교통성 보고서

관련계획검토

및 현황조사

2단계

	설계기준검토		･도로의 구분, 설계속도, 도로폭원 및 횡단구성
	설계방침		･설계기준, 최적노선에 대한 방침요청
	구조물 형식		･구조물(지하차도)에 대한 형식검토
	교차로 검토		･교통분석을 통한 지하차도 규모 산정

	노선검토		･기존도로 선형 분석 ･구조물 형식 선정 ･교통처리방안 제시 ･관계기관협의서류 작성

	①관계기관 협의서류 ②노선자문 보고서 ③자재공법 검토서

기본설계

3단계

	도 로		･설계기준 확정 및 선형설계 ･공종별 세부설계
	구 조		･구조물 구조계산 및 세부 설계
	기 타		･비탈면 안정대책, 연약지반 처리, 상수도 이설 설계
	환 경		･현황조사 및 주민의견 수렴 ･환경보고서 작성 및 협의

	세부설계 추진		･분야별 설계 기준확정 ･경제성·시공성을 고려 한 분야별 세부설계 - 표준도 작성 - 설계도 작성 - 각종 계산서 작성 ･설계VE 및 설계자문 실시 ･건설기술심의

	①설계VE 보고서 (기본/실시) ②마무리 자문보고서 ③각종계산서

실시설계

4단계

	설계도서 작성 및 보완		･각종 설계도서 작성 ･인허가 서류 작성 ･설계심의 결과 반영 보완

	준 공		･설계종합 결과 보고 ･인허가 협의 ･준공검사

	①전성과품

설계도서 및 인허가서류 작성

□ 관계기관 현황 및 협의사항

연번	관 계 기 관	협 의 사 항	비 고
1	국방부	군사시설(참호등) 현황 및 저촉에 따른 처리방안
2	한강유역청	환경관련협의
3	서울지방국토관리청	국가하천 근접(한강)공작물설치 협의	하천관련부서
4	서울시청	올림픽대로 지하화에 따른 검토의견	도로계획과도로관리과치수과 교통운영과
5	도시기반시설본부	올림픽대로 지하화에 따른 검토의견	시설안전국 (연계사업)
6	서울시상수도사업본부	지하매설물 현황 및 저촉에 따른 처리방안
7	서초구청	시설물 현황 및 관련계획 저촉여부	관련 실과
8	서초수도사업소	지하매설물 현황 및 저촉에 따른 처리방안
9	서울시설공단	시설물 현황 및 저촉에 따른 처리방안	시설관리본, 도로교통본부
10	서초경찰서	교통시설물 저촉여부 및 처리방안
11	한국전력공사	지하매설물 현황 및 저촉에 따른 처리방안
12	한국수자원공사 (수도권지역본부)	지하매설물(광역상수도) 현황 및 저촉에 따른 처리방안
13	KT	지하매설물 현황 및 저촉에 따른 처리방안
14	SK	지하매설물 현황 및 저촉에 따른 처리방안
15	한국가스공사	지하매설물 현황 및 저촉에 따른 처리방안