밤 고 개 로 확장공사

교 통 소 통 대 책

2017. 6

서울시 도시기반시설본부

밤 고 개 로 확장공사 교통안전시설 개선개요

공사 단계	위치	공사 (점용) 기간	공사 개요	교통안전시설 변경내역	교통관리계획
1-1	수서 IC	2017.6.1 ∼ 2017.8.31 (총92일간)	도로 확장 및 선형 개량 공사	□밤고개로 차로 일부점용 (B=6.8m(보도 2.9m포함), L=245.0m)	□점용시간: 전일점용 □공사시간: 주간공사(09:00∼18:00) □교통안전시설 설치로 안전사고 예방 -안전칸막이(전면 윙커) 및 라바콘 설치 -경광등 설치(시·종점부 및 20m 간격) -교통신호수배치(시·종점에 2인 22:00∼06:00) -교통안전표지판 설치 -홍보표지판 및 공사안내표지판 설치 -교통통제수는 모범운전자로 배치제시 -버스정류소 점용시 임시이설(전방 80m지점) -보행자 우회동선 제시
1-2	수서 IC ∼ 수서역 사거리	2017.9.1 ∼ 2017.12.1 (총92일간)	도로 확장 및 선형 개량 공사	□밤고개로 1개차로 점용 (차로 재구획으로 현황차로수 유지) (B=8.6m(보도 3.0m, 확장 3.9m 포함), L=280.0m) □횡단보도 위치조정:1개소 □신호기(차) 위치조정: 2개소 □신호기(보) 위치조정: 2개소	□점용시간: 전일점용 □공사시간: 주간공사(09:00∼18:00) □교통안전시설 설치로 안전사고 예방 -안전칸막이(전면 윙커) 및 라바콘 설치 -경광등 설치(시·종점부 및 20m 간격) -교통신호수배치(시·종점에 2인 22:00∼06:00) -교통안전표지판 설치 -홍보표지판 및 공사안내표지판 설치 -교통통제수는 모범운전자로 배치제시 -버스정류소 점용시 임시이설(전방 80m지점) -임시보행통로 확보(B=2.0m)
2	교수 마을 앞 ∼ 자곡 사거리	2017.12.2 ∼ 2018.4.2 (총122일간)	도로 확장 및 선형 개량 공사	□밤고개로 1개차로 점용 (차로 재구획으로 현황차로수 유지) (B=12.5m(보도 4.1m, 확장 7.4m 포함), L=740.0m) □신호기(차) 신설: 2개소 □신호기(차) 위치조정: 2개소 □신호기(보) 위치조정: 2개소	□점용시간: 전일점용 □공사시간: 주간공사(09:00∼18:00) □교통안전시설 설치로 안전사고 예방 -안전칸막이(전면 윙커) 및 라바콘 설치 -경광등 설치(시·종점부 및 20m 간격) -교통신호수배치(시·종점에 2인 22:00∼06:00) -교통안전표지판 설치 -홍보표지판 및 공사안내표지판 설치 -교통통제수는 모범운전자로 배치제시 -임시보행통로 확보(B=1.8m)

공사 단계	위치	공사 (점용) 기간	공사 개요	교통안전시설 변경내역	교통관리계획
3	교수 마을 앞 ∼ 자곡 사거리	2018.4.3 ∼ 2018.7.31 (총120일간)	도로 확장 및 선형 개량 공사	□밤고개로 1개차로 점용 (차로 재구획으로 현황차로수 유지) (B=5.6m(보도 3.1m, 확장 1.5m 포함), L=740.0m) □횡단보도 위치조정:2개소 □신호기(차) 신설: 2개소 □신호기(차) 위치조정: 2개소 □신호기(보) 위치조정: 2개소	□점용시간: 전일점용 □공사시간: 주간공사(09:00∼18:00) □교통안전시설 설치로 안전사고 예방 -안전칸막이(전면 윙커) 및 라바콘 설치 -경광등 설치(시·종점부 및 20m 간격) -교통신호수배치(시·종점에 2인 22:00∼06:00) -교통안전표지판 설치 -홍보표지판 및 공사안내표지판 설치 -교통통제수는 모범운전자로 배치제시 -버스정류소 존치(대기공간 확보(B=3.0m), 통제수 설치) -임시보행통로 확보(B=2.0m)
4	방죽 사거리 ∼ 세곡동 사거리	2018.8.1 ∼ 2018.12.31 (총123일간)	도로 확장 및 선형 개량 공사	□밤고개로 1개차로 점용 (차로 재구획으로 현황차로수 유지) (B=11.3m(보도 4.5m, 확장 4.8m 포함), L=665.0m) □횡단보도 위치조정:1개소 □신호기(차) 위치조정: 3개소 □신호기(보) 위치조정: 3개소	□점용시간: 전일점용 □공사시간: 주간공사(09:00∼18:00) □교통안전시설 설치로 안전사고 예방 -안전칸막이(전면 윙커) 및 라바콘 설치 -경광등 설치(시·종점부 및 20m 간격) -교통신호수배치(시·종점에 2인 22:00∼06:00) -교통안전표지판 설치 -홍보표지판 및 공사안내표지판 설치 -교통통제수는 모범운전자로 배치제시 -임시보행통로 확보(B=2.0m)
5	방죽 사거리 ∼ 세곡동 사거리	2018.12.2 ∼ 2019.4.2 (총122일간)	도로 확장 및 선형 개량 공사	□밤고개로 1개차로 점용 (차로 재구획으로 현황차로수 유지) (B=10.2m(보도 3.5m, 확장 5.4m 포함), L=665.0m) □횡단보도 위치조정:1개소 □신호기(차) 위치조정: 1개소 □신호기(보) 위치조정: 1개소	□점용시간: 전일점용 □공사시간: 주간공사(09:00∼18:00) □교통안전시설 설치로 안전사고 예방 -안전칸막이(전면 윙커) 및 라바콘 설치 -경광등 설치(시·종점부 및 20m 간격) -교통신호수배치(시·종점에 2인 22:00∼06:00) -교통안전표지판 설치 -홍보표지판 및 공사안내표지판 설치 -교통통제수는 모범운전자로 배치제시 -임시보행통로 확보(B=2.0m)