밤고개로 확장공사(2구간)

공사중 교통소통대책

(교통규제심의)

2018. 02

서 울 특 별 시

도시기반시설본부

밤고개로 확장공사(2구간) 교통안전시설 개선개요

공사단계	공사(점용)기간	공사개요	교통안전시설 변경내역	교통관리계획
보도조성 단계	(1-1단계 공사전 완료)	□공사지점 : 밤고개로(770∼1+220지점) □공사시간 : 주간공사(09:00∼18:00, 전일점용) □공사방법 : 지장물철거 → 토공 → 포장(보도)	□횡단보도 신설(2개소)	-
1-1단계	18.3.20∼18.4.10 (22일)	□공사지점 : 밤고개로(1+040∼1+220지점) □공사시간 : 주간공사(09:00∼18:00, 전일점용) □공사방법 : 지장물철거 → 토공 → 포장(도로 및 보도) → 시설물 이설설치 → 차선도색 □점용차로수 : 수서방면 1차로 점용	□차로 재구획(L=151m) □노면표시 삭제(12개소), 신설(27개소) □교차로내 유도선 재설치(자곡사거리) □신호등 철거(2개소), 신설(2개소) □교통안전표지판 삭제(2개소), 이설(1개소), 신설(2개소) □절대 주정차금지구역 설치(세곡119안전센터 입구) □도로중앙 차선규제봉 설치(L=220m)	□『서울특별시 도로점용공사장 교통소통대책에 관한 조례 시행규칙』에 의해 공사안내표지 설치 □자곡사거리 버스정류소 임시이설(2개소) □자곡사거리 횡단보도 반폭공사 □보행안전도우미 배치(3인) □도로중앙 차선규제봉 설치(L=220m) □교통안전표지판 이설 및 신설 □교차로 내 유도선 수정(자곡사거리) □세곡119안전센터 입구 절대 주정차금지구역 설치 □차로 재구획(공사구간) □임시버스정류소 운영계획 수립 □공사작업장비 진출입계획 수립 <밤고개로 차로운영 계획> □수서방면 3차로, 성남방면 3차로 확보(좌회전차로 제외)
1-2단계	18.4.11∼18.5.01 (21일)	□공사지점 : 밤고개로(0+975∼1+040지점) □공사시간 : 주간공사(09:00∼18:00, 전일점용) □공사방법 : 지장물철거 → 토공 → 포장(도로 및 보도) → 시설물 이설설치 → 차선도색 □점용차로수 : 수서방면 1차로 점용	□차로 재구획(L=308m) □노면표시 삭제(17개소), 신설(23개소) □교차로내 유도선 재설치(서울율현초교앞 삼거리) □신호등 철거(1개소) □횡단보도 이설(1개소) □교통안전표지판 삭제(1개소), 이설(1개소), 신설(2개소) □도로중앙 차선규제봉 설치(L=176m)	□『서울특별시 도로점용공사장 교통소통대책에 관한 조례 시행규칙』에 의해 공사안내표지 설치 □버스정류장 이설 설치(1개소) □보행안전도우미 배치(2인) □도로중앙 차선규제봉 설치(L=176m) □교통안전표지판 삭제, 이설 및 신설 □교차로 내 유도선 수정(자곡사거리) □차로 재구획(공사구간) □서울율현초교앞 삼거리 횡단보도 반폭공사 <밤고개로 차로운영 계획> □수서방면 3차로, 성남방면 2차로 확보(좌회전차로 제외) <서울율현초교방면 접속도로 차로운영 계획> □서울율현초교방면 2→1차로 축소, 밤고개로 방면 2차로 유지
2단계	18.5.02∼18.5.15 (14일)	□공사지점 : 밤고개로(0+900∼0+960지점) □공사시간 : 주간공사(09:00∼18:00, 전일점용) □공사방법 : 지장물철거 → 토공 → 포장(도로 및 보도) → 시설물 이설설치 → 차선도색 □점용차로수 : 수서방면 1차로 점용	□차로 재구획(L=219m) □노면표시 삭제(21개소), 신설(25개소) □교차로내 유도선 재설치(자곡사거리, 서울율현초교앞 삼거리) □신호등 철거(1개소), 신설(1개소) □횡단보도 이설(1개소) □교통안전표지판 삭제(1개소), 신설(4개소) □도로중앙 차선규제봉 설치(L=159m)	□『서울특별시 도로점용공사장 교통소통대책에 관한 조례 시행규칙』에 의해 공사안내표지 설치 □보행안전도우미 배치(2인) □도로중앙 차선규제봉 설치(L=159m) □교통안전표지판 삭제(1개소), 신설(4개소) □교차로 내 유도선 수정(자곡사거리, 서울율현초교앞 삼거리) □차로 재구획(공사구간) <밤고개로 차로운영 계획> □수서방면 3차로, 성남방면 3차로 확보(좌회전차로 제외) <서울율현초교방면 접속도로 차로운영 계획> □서울율현초교방면 2→1차로 축소, 밤고개로 방면 2차로 유지(우회전도류화)

공사단계		공사(점용)기간	공사개요		교통안전시설 변경내역	교통관리계획
3-1단계	18.5.16∼18.5.31 (16일)			□공사지점 : 밤고개로(0+830∼0+900지점) □공사시간 : 주간공사(09:00∼18:00, 전일점용) □공사방법 : 지장물철거 → 토공 → 포장(도로 및 보도) → 시설물 이설설치 → 차선도색 □점용차로수 : 수서방면 1차로 점용	□차로 재구획(L=193m) □노면표시 삭제(18개소), 신설(15개소) □교차로내 유도선 재설치(서울율현초교앞 삼거리) □횡단보도 이설(1개소). 신설(1개소) □도로중앙 차선규제봉 설치(L=150m)	□『서울특별시 도로점용공사장 교통소통대책에 관한 조례 시행규칙』에 의해 공사안내표지 설치 □버스정류장 이설(수서방면 60m 지점) □보행안전도우미 배치(2인) □도로중앙 차선규제봉 설치(L=150m) □교차로 내 유도선 수정(서울율현초교앞 삼거리, 방죽마을 사거리) □차로 재구획(공사구간) <밤고개로 차로운영 계획> □수서방면 3차로, 성남방면 3차로 확보(좌회전차로 제외)
3-2단계		18.6.01∼18.6.16 (16일)	□공사지점 : 밤고개로(0+770∼0+830지점) □공사시간 : 주간공사(09:00∼18:00, 전일점용) □공사방법 : 지장물철거 → 토공 → 포장(도로 및 보도) → 시설물 이설설치 → 차선도색 □점용차로수 : 수서방면 1차로 점용		□차로 재구획(L=152m) □노면표시 삭제(6개소), 신설(5개소) □교차로내 유도선 재설치(방죽마을사거리) □교통안전표지판 신설(2개소) □신호등 철거(1개소), 신설(1개소) □도로중앙 차선규제봉 제거(L=37m)	□『서울특별시 도로점용공사장 교통소통대책에 관한 조례 시행규칙』에 의해 공사안내표지 설치 □버스정류장 이설(성남방면 60m 지점) □방죽마을사거리 횡단보도 반폭공사 □보행안전도우미 배치(1인) □도로중앙 차선규제봉 설치(L=37m) □교차로 내 유도선 수정(방죽마을 사거리) □차로 재구획(공사구간) <밤고개로 차로운영 계획> □수서방면 3차로, 성남방면 3차로 확보 <한신휴플러스APT방면 접속도로 차로운영 계획> □한신휴플러스APT방면 1차로 유지, 밤고개로 방면 2→1차로 축소 □임시보행로 확보(B=2.0m)
4-1단계		18.6.17∼18.7.01 (15일)	□공사지점 : 밤고개로(0+700∼0+760지점) □공사시간 : 주간공사(09:00∼18:00, 전일점용) □공사방법 : 지장물철거 → 토공 → 포장(도로 및 보도) → 시설물 이설설치 → 차선도색 □점용차로수 : 성남방면 1차로 점용		□차로 재구획(L=330m) □노면표시 삭제(20개소), 신설(23개소) □교차로내 유도선 재설치(서울율현초교앞 삼거리, 방죽마을사거리) □차량등 추가설치(1개소) □횡단보도 연장(2개소) □교통안전표지판 삭제(1개소), 신설(3개소) □도로중앙 차선규제봉 설치(L=289m)	□『서울특별시 도로점용공사장 교통소통대책에 관한 조례 시행규칙』에 의해 공사안내표지 설치 □임시보행로 개설(B=2.0m) □보행안전도우미 배치(2인) □도로중앙 차선규제봉 설치(L=289m) □교통안전표지판 삭제 및 신설 □교차로 내 유도선 수정(서울율현초교앞 삼거리, 방죽마을 사거리) □차로 재구획(공사구간) □버스정류소 이설설치(1개소) <밤고개로 차로운영 계획> □수서방면 2차로, 성남방면 3차로 확보(좌회전차로 제외) <세곡동방면 접속도로 차로운영 계획> □세곡동방면 2→1차로 축소, 밤고개로 방면 2차로 유지 □임시보행로 확보(B=1.5m)
4-2단계		18.7.02∼18.7.16 (15일)	□공사지점 : 밤고개로(0+620∼0+700지점) □공사시간 : 주간공사(09:00∼18:00, 전일점용) □공사방법 : 지장물철거 → 토공 → 포장(도로 및 보도) → 시설물 이설설치 → 차선도색 □점용차로수 : 성남방면 1차로 점용		□차로 재구획(L=173m) □노면표시 삭제(5개소), 신설(5개소) □교차로내 유도선 재설치(방죽마을 사거리) □교통안전표지판 신설(1개소) □횡단보도 삭제(1개소) □도로중앙 차선규제봉 설치(L=173m)	□『서울특별시 도로점용공사장 교통소통대책에 관한 조례 시행규칙』에 의해 공사안내표지 설치 □임시보행로 개설(B=2.0m) □보행안전도우미 배치(2인) □도로중앙 차선규제봉 설치(L=173m) □교차로 내 유도선 수정(방죽마을 사거리) □차로 재구획(공사구간) <밤고개로 차로운영 계획> □수서방면 3차로, 성남방면 3차로 확보(좌회전차로 제외)

공사단계	공사(점용)기간	공사개요	교통안전시설 변경내역	교통관리계획
5단계	18.7.17∼18.8.31 (46일)	□공사지점 : 밤고개로(0+775∼0+870지점) □공사시간 : 주간공사(09:00∼18:00, 전일점용) □공사방법 : 지장물철거 → 토공 → 포장(도로 및 보도) → 시설물 이설설치 → 차선도색 □점용차로수 : 성남방면 1차로 점용	□차로 재구획(L=330m) □노면표시 삭제(14개소), 신설(14개소) □교차로내 유도선 재설치(서울율현초교앞 삼거리, 방죽마을사거리) □차량등 추가설치(1개소) □교통안전표지판 삭제(1개소), 신설(1개소) □도로중앙 차선규제봉 설치(L=290m)	□『서울특별시 도로점용공사장 교통소통대책에 관한 조례 시행규칙』에 의해 공사안내표지 설치 □버스정류장 이설(수서방면 60m 지점) □임시보행로 개설(B=2.0m) □보행안전도우미 배치(3인) □도로중앙 차선규제봉 설치(L=290m) □교통안전표지판 삭제 및 신설 □교차로 내 유도선 수정(서울율현초교앞 삼거리, 방죽마을 사거리) □차로 재구획(공사구간) <밤고개로 차로운영 계획> □수서방면 3차로, 성남방면 3차로 확보(좌회전차로 제외) <세곡동방면 접속도로, 밤고개로 접속도로 차로운영 계획> □세곡동방면 2→1차로 축소, 밤고개로 방면 2차로 유지, 임시보행로 확보(B=1.6m) □현황 3.75∼3.9m 도로 →3.0m로 차로폭 축소, 임시보행로 확보(B=2.0m)
6단계	18.9.01∼18.10.31 (61일)	□공사지점 : 밤고개로(0+870∼1+200지점) □공사시간 : 주간공사(09:00∼18:00, 전일점용) □공사방법 : 지장물철거 → 토공 → 포장(도로 및 보도) → 시설물 이설설치 → 차선도색 □점용차로수 : 성남방면 1차로 점용	□차로 재구획(L=210m) □노면표시 삭제(24개소), 신설(21개소) □교차로내 유도선 재설치(자곡사거리, 서울율현초교앞 삼거리) □신호등 철거(3개소), 신설(3개소) □횡단보도 이설(3개소) □교통안전표지판 삭제(1개소), 이설(1개소), 신설(1개소) □도로중앙 차선규제봉 설치(L=210m)	□『서울특별시 도로점용공사장 교통소통대책에 관한 조례 시행규칙』에 의해 공사안내표지 설치 □버스정류장 임시이설(1개소) □버스정류장 이설설치(1개소) □임시보행로 개설(B=2.0m) □보행안전도우미 배치(4인) □도로중앙 차선규제봉 설치(L=210m) □교통안전표지판 삭제, 이설 및 신설 □교차로 내 유도선 수정(자곡사거리, 서울율현초교삼거리) □차로 재구획(공사구간) <밤고개로 차로운영 계획> □수서방면 3차로, 성남방면 3차로 확보(좌회전차로 제외)
7-1단계	18.11.01∼18.11.30 (30일)	□공사지점 : 밤고개로(0+615∼0+760지점) □공사시간 : 주간공사(09:00∼18:00, 전일점용) □공사방법 : 지장물철거 → 토공 → 포장(도로 및 보도) → 시설물 이설설치 → 차선도색 □점용차로수 : 한신휴플러스APT방면 1차로 점용	□차로 재구획(L=356m) □노면표시 삭제(60개소), 신설(100개소) □교차로내 유도선 재설치(자곡사거리) □신호등 철거(1개소), 신설(1개소) □교통안전표지판 삭제(2개소), 신설(6개소) □도로중앙 차선규제봉 설치(L=356m)	□『서울특별시 도로점용공사장 교통소통대책에 관한 조례 시행규칙』에 의해 공사안내표지 설치 □보행안전도우미 배치(2인) □도로중앙 차선규제봉 설치(L=356m) □교통안전표지판 삭제 및 신설 □교차로 내 유도선 수정(자곡사거리) □차로 재구획(공사구간) <밤고개로 차로운영 계획> □수서방면 3차로, 성남방면 3차로 확보 <한신휴플러스APT방면 접속도로 차로운영 계획> □한신휴플러스APT방면 1차로 유지, 밤고개로 방면 2→1차로 축소 □임시보행로 확보(B=2.0m)
7-2단계	18.12.01∼18.12.30 (30일)	□공사지점 : 밤고개로(0+615∼0+760지점) □공사시간 : 주간공사(09:00∼18:00, 전일점용) □공사방법 : 지장물철거 → 토공 → 포장(도로 및 보도) → 시설물 이설설치 → 차선도색 □점용차로수 : 수서방면 1차로 점용	□차로 재구획(L=175m) □노면표시 삭제(16개소), 신설(10개소) □도로중앙 차선규제봉 설치(L=175m)	□『서울특별시 도로점용공사장 교통소통대책에 관한 조례 시행규칙』에 의해 공사안내표지 설치 □방죽마을 사거리 횡단보도 반폭공사 □보행안전도우미 배치(2인) □도로중앙 차선규제봉 설치(L=175m) □차로 재구획(공사구간) <밤고개로 차로운영 계획> □수서방면 3차로, 성남방면 3차로 확보 <한신휴플러스APT방면 접속도로 차로운영 계획> □한신휴플러스APT방면 1차로 유지, 밤고개로 방면 2→1차로 축소 □임시보행로 확보(B=2.0m)