-신마포나들목 신설공사-

기존방음벽 기초말뚝 보강계획

『신마포나들목 신설공사』와 관련하여 비개착공(UPRS) 강관  추진중에 강변북로 하부 방음벽 기초말뚝이 저촉되어 방음벽에 대한 안전성을 확보하고자 기초말뚝에 대한 보강계획임.

Ⅰ		공사개요

❍ 공 사 명 : 신마포나들목 신설공사(장기계속)

❍ 공사규모

나들목명	위 치	규 모(m)			비고
		폭	높이	길이
신마포나들목	마포구 용강동 148-2 (마포대교 북단 하류 500m)	5.0	3.5	51.5	비개착구간 30m

❍ 공사기간 :‘17. 8.30 ~ ‘19. 11. 17 (27개월)

❍ 시공사/감리단 : ㈜우탑건설 /(주)삼안 외 2개사

Ⅱ		방음벽 기초말뚝 저촉 현황

▶ 방음벽 저촉 현황

❍ 저촉위치 : 강변북로 하부(마포구 용강동 148-2)

❍ 저촉현황

- 방음벽하부 B=8.4m , 방음벽기초 하부 H=3m,

- 기초말뚝(파일간격 3.5m) 2본,

- 강관파일규격 Φ406.4mm, 강관파일두께 T=9mm

▶ 추진경과

❍ ‘18. 06. 14(08:40) : 2열식 상부 강관추진 20m 지점 방음벽 말뚝 발견

❍ ‘18. 06. 14(09:30) : 발주청 보고 및 긴급대책회의 실시

- 책임기술자, 현장대리인, 협력사 소장, 담당기술자

❍ ‘18. 06. 14(16:00) : 대책위 협의 실시(건설사업단 사무실)

- 시설공단 담당, 공사관리관, 설계사, 구조기술지원기술자, 책임기술자, 현장대리인, 협력사 현장소장, 담당기술자

- 현 상황(20m) 기초말뚝 제거 후 추진작업 진행완료(30m)

- 추후 설계사 대책안, 구조기술지원기술자 검토안 발주청 보고

❍ ‘18. 06. 26(14:00) : 기초말뚝 보강방안 검토보고(설계자)

Ⅲ		방음벽 기초말뚝 보강계획

○ 검토목적 : 『신마포 나들목 신설공사』와 관련 강관추진 시 방음벽기초말뚝저촉에 따라 방음벽지주 보강 및 기초말뚝 절단구간 보강으로 안전성을 확보 시공코자함.

○ 보강방안(설계사 검토의견)

- 강변북로 방음벽에 보강재(레이크) 설치 후 방음벽 말뚝 절단에 대한 구조안전성 검토결과, 방음벽 기초말뚝 및 보강재는 응력, 지지력, 변위에 대하여 구조 안전성을 확보할 수 있는 것으로 검토

- 방음벽 보강재 설치 후 강관 추진 중 방음벽 말뚝 절단 실시하고 추진 완료 후 추진관과 기초말뚝 연결.

○ 구조분야 기술지원기술자 검토의견

- 기존 방음벽 기초 파일의 간섭에 따라 현장에서 제시한 통과공법은 현장 상황에 적합한 것으로 판단됨.

- 단 강관 추진시 방음벽 기초가 예상한 것과 다를 경우 즉시 공사 중단 등 주의시공 요함.

- 레이크 경사 길이가 길므로 운반 및 거치시 주의 시공 요함.

Ⅳ		한강사업본부 검토결과

○ 설계사 및 구조기술지원기술자의 검토의견과 건설사업관리책임기술자 검토의견을 종합하면 방음벽에 보강재(레이크) 설치하고 비개착 강관 추진완료 후 방음벽 기초막뚝을 보강(그라우팅)하는 계획이 적정하다고 판단됨.

붙임 1) 기존 방음벽 안전성 검토 결과 및 보강계획도  1부.

2) 방음뼉 기초말뚝 보강 구조계산서 1부.  끝.