문서번호	공원녹지과-@N
보존년한	5년
결재일자
공개여부	공개

★⊙주무관		공원시설팀장	공원녹지과장		도시관리국장

방화대교 남단 환경개선사업 관련 관계기관 실무자 회의개최 결과 보고
		0

도시관리국

공원녹지과

방화대교 남단 환경개선사업 관련

관계기관 실무자 회의개최 결과 보고

방화대교 남단 환경개선사업의 원할한 추진을 위하여 관계기관 실무자 회의를 개최하고 회의결과를 보도 드림

회의개요

○ 일    시 : 2015. 6. 19(금) 10:30~

○ 장    소 : 강서구청 가양동별관 3층

○ 참 석 자

- 강서구 : 공원녹지과장, 공원시설팀장, 생활체육팀장, 점용허가팀장, 운수관리팀장

- 서울시 : 방화대교 남단 접속도로 건설공사 김한귀 감리단장 등 3명

- 관계기관 : 서서울고속도로(주) 문대수 부장, 신공항하이웨이(주) 하강희 차장

회의내용

○ 환경부 생태계보전협력금 반환사업 승인 통보(’15. 5.13)에 따라 공사착공을 위한 관계기관 협조사항 전달 - 공사지장물 처리 등

○ 방화대교 남단 환경개선사업 실시설계(안)에 대한 의견수렴 및 공사시행 전반에 관한 사항 협의

회의결과 - 세부내용 별첨

○ 생태계보전협력금 반환사업 구간은 환경부 사업승인이 통보됨에 따라 6월중으로 시공사에서 공사착공이 가능하도록 관계기관의 협조요청

(서울시 사업구간은 도기본 접속도로 공사일정상 10월말까지 실험실 등 존치필요)

○ 게이트볼장 및 주차장 조성은 본 사업의 취지에 부합되지 않음으로 미반영하고, 음수대, 수세식 간이화장실은 이용객의 최소한의 불편해소를 위해 예산 범위 내에서 설치 검토

○ 도로변 비산먼지 차단을 위하여 마곡지구 내 지장수목(양천향교길 녹지대 은행나무)을 이식하여 가로수 개념으로 식재(SH공사 협의)

기관별 협의내용 및 협의결과

기 관 명	협의내용	회의결과
서울시 도시기반 시설본부	- 사업구간내 공사지장물 현황 및 향후 처리 일정 - 사업부지 내 변압기 관리용 진입도로 노선 변경 관련사항 - 사유지 경계부의 휀스 설치 여부 - 사업구간 내 교량배수관 설치현황 및 시설개선 협조 (하천형직배수관⇒육교형연결배수관)	- 환경부 사업구간은 6월말 공사착공에 지장이 없도록 조치하고, 서울시 사업 구간은 10월말 공사준공까지 존치필요 - 터널 변압기 관리용 진입로는 필요한 시설로서 환경부사업에 미치는 영향을 최소화할 수 있도록 노선 조정 - 사유지 경계부 휀스 설치는 부지 관리 기관과 협의 필요(협의공문 기 시행) - 교각하부 휴게공간에 우수가 직접 떨어지 않도록 도로공사에 반영하여 시설개선
신공항 하이웨이 (주)	- 사업구간 내 공사지장물(대집행잔재물, 현황 및 향후 처리일정 - 사업구간 내 교량배수관 설치현황 및 시설개선 협조 - 범머리 웅덩이쪽 토지주(잡종지) 진입로 개설 관련 민원	- 환경부 사업이 6월말 공사 착공할 수 있도록 공사측에서 지장물 이전 조치 - 교량배수관은 현장 미팅 후 해결모색 (’15. 6. 30 10:00 현장미팅 예정) - 범머리웅덩 쪽 진입로 문제는 민원이 아직 해결되지 않고 장기화될 것으로 예상됨에 따라 본 사업구간에서 제외
서서울 고속도로 (주)	- 민자고속도로 사업현황 및 향후 일정 - 사업구간 내 향후 민자도로 교각 설치 공사 관련 사항	- 민자도로사업은 지역민원으로 공사착공 시기가 불투명함으로 환경부에서 우선 공사시행하고, 향후 민자도로측에서 철거 후 원상복구할 계획임
문화체육과	- 기존 게이트볼장과 신규 사업구간의 동선 연계 가능 여부 - 신설 족구장2면의 향후 관리부서 지정	- 실내게이트볼장 건설 및 주차장 조성은 본 사업 취지와 맞지 않음으로 미반영 - 이용활성화를 위해 기존 게이트볼장과 동선 연계 필요
건설관리과	- 사업부지 내 국·공유지 무단점유시설 (콘테이너 등) 처리계획	- 물류창고 부지는 현재 점용허가를 내준 상태이나 공사착공 이전까지 이전조치 - 나머지 지장물은 고질적인 불법적치물로 해결에 어려움이 있음
교통행정과	- 마을버스 종점부지의 공사 지장 여부 및 위치 조정	- 마을버스는 현재 도로선형에서 회차가 가능함으로 공사에 지장이 없음